투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서부공원녹지사업소장(공원운영과장)
(경유)
제목	신월IC 가속차로 관련 허가 기간연장 요청

1. 신월IC 가속차로 공사수행과 관련하여 지장물(한전주, 전파기지국) 이설 기간 추가소요로 인한 서서울호수공원 임시 점용허가 기간연장을 요청하오니 협의하여 주시기 바랍니다.

○ 허가기간 요청내용

1) 당초 : 2020.11.20. ~ 2021.04.15

2) 변경 : 2020.11.20. ~ 2021.07.31

붙임 : 관련문서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	홍민철		방재시설과장	김태중		방재시설부장	04/15 박홍봉
협조자
시행	방재시설부-4963	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	02-3708-8765	/전송	02-3708-8756	/	mchong@seoul.go.kr	/	부분공개(7)