실정보고 검토서

공사명

개봉고가 성능개선공사

공사개요

· 위    치: 구로구 개봉로 68~개봉로 124

· 규    모: 폭 18.9m, 연장 332m

· 공사기간: ’19. 8. 12.~’23. 4. 11.

· 도 급 비: 13,729백만 원

· 시공사: 홍익산업개발(주) 외 1

· 감리단: ㈜유신 외 2

· 설계사: ㈜경동엔지니어링 외 2

실정보고 건명

개봉고가 하부 시·종점부 PE방호벽, 가림막 설치공사 반영

실정보고

사유

개봉고가 하부 작업 차량, 철거장비 진·출입이 용이 하도록 EGI펜스를 PE방호벽과 가림막 펜스로 변경하여 설치

건설사업관리단

검토의견

개봉고가 시·종점부 PE방호벽, 가림막 펜스 변경 시공은 적정함

공기에 미치는 영향

(  -  )  개월

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
규모	*********** ********** ********* ***********	*********** * * ***********	******** ******* ****** ********
도급금액	**********	***********	*************

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

- “해당 없음”

발주처

검토의견

개봉고가 하부 작업 차량, 철거장비 진·출입이 용이 하도록 EGI펜스를 PE방호벽과 가림막 펜스로 변경 설치는 적정함.

비 고

결재

담당

김구

과장

장수철

부장

04/19

김용제