업무연락전
지시번호	SMIH-14-34368	연번(문서번호)	SMIH-14-34368
지시일자	2014-08-11	작성일자	2014-08-11
지 시 자	이종근	처리기한	2014-08-19
제 목	업무지시(장충체육관 리모델링 기계설비공사)
내 용
1. 장충체육관 리모델링 기계설비공사추진과 관련입니다. 2. 2014. 8. 8.(금) 본부장님 주재 장충체육관 현안사항에 대한 공정회의시 보고된 바와 같이 천정 소화배관설치, 무대기계장치(바텐) 설치공사가 선행공정이 지연되어 공사가 진척되지 못하고 있는 실정입니다. 3. 이에 따라 공기내 잔여공사의 차질 없는 시행을 위해 유관공정과 긴밀한 협의 및 대책이 필요하여 다음 사항에 대해 업무지시 하니 책임감리원은 기계설비 잔여공사에 대한 추진계획을 수립하여 2014.8.19.(화) 까지 제출하여 주시기 바랍니다. - 다 음 - 가. 시운전 일정을 감안한 잔여공사 추진 일정(공정표 포함) 나. 기반시설(도시가스, 상수도) 인입 및 공사일정 다. 잔여공사 추진과 관련 유관공정 협조사항 라. 대관(인·허가, 신고) 업무 일정. 끝

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부