투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시(장충체육관 리모델링 기계설비공사)

1.문서번호 : SMIH-14-34368

2.작성일자 : 2014-08-11 01:08:08

3.제    목 : 업무지시(장충체육관 리모델링 기계설비공사)

4.내    용 :

1. 장충체육관 리모델링 기계설비공사추진과 관련입니다.

2. 2014. 8. 8.(금) 본부장님 주재 장충체육관 현안사항에 대한 공정회의시 보고된 바와 같이 천정 소화배관설치, 무대기계장치(바텐) 설치공사가 선행공정이 지연되어 공사가 진척되지 못하고 있는 실정입니다.

3. 이에 따라 공기내 잔여공사의 차질 없는 시행을 위해 유관공정과 긴밀한 협의 및 대책이 필요하여 다음사항에 대해 업무지시 하니 책임감리원은 기계설비 잔여공사에 대한 추진계획을 수립하여 2014.8.19.(화) 까지 제출하여 주시기 바랍니다.

-  다  음 -

가. 시운전 일정을 감안한 잔여공사 추진 일정(공정표 포함)

나. 기반시설(도시가스, 상수도) 인입 및 공사일정

다. 잔여공사 추진과 관련 유관공정 협조사항

라. 대관(인·허가, 신고) 업무 일정. 끝

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							이종근			열빛총괄과장					08/11 권오식
협조자
시행			설비부-8882									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길15, 2동 2층(서소문동)															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8603						/전송			02-3708-8659					/	keun@seoul.go.kr												/	대시민공개