행복한 변화, 사람 사는 동작
			동작구
수신		내부결재
(경유)
제목	설계변경(정산) 시행(신대방 빗물펌프장 노후시설 개선공사)

우리 구에서 시행중인 「신대방 빗물펌프장 노후시설 개선공사」에 대하여 다음과 같이 설계변경(정산) 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 신대방 빗물펌프장 노후시설 개선공사

2. 공사기간 : 2020. 06. 26. ~ 2021. 04. 30.

3. 도 급 액 : 387,642,000원

4. 예산과목 : 물순환안전국 하천관리과, 치수 및 하천관리, 수방대책 사업, 신대방 빗물펌프장 성능개선 공사, 시설비(시비)

5. 도 급 자 : 영일건설㈜ 대표 최상윤

6. 변경사유 : 실시공 물량 증·감에 따른 설계변경

7. 변경내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감(-)	비 고
총 공 사 비		544,646,000	532,402,880	-12,243,120
도급비	공 급 가 액	352,401,819	347,227,273	-5,174,546
	부가가치세	35,240,181	34,722,727	-517,454
	계	387,642,000	381,950,000	-5,692,000
관급자재		87,833,000	94,316,000	6,483,000
이 전 비		69,171,000	56,136,880	-13,034,120

붙 임 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 검토보고 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 검증확인서 1부.  끝.

주무관	이승한		치수팀장	황재호		치수과장	김상훈		도시건설국장	04/23 김승수
협조자	계약팀장	유진숙		재무과장	백금희		일자리경제국장	민영기
시행	치수과-5957	(		)	접수		(		)
우	06928	서울특별시 동작구 장승배기로 161 동작구청	/	www.dongjak.go.kr
전화	02-820-1416	/전송	02-820-1453	/		/	부분공개(5)