문서번호	도시철도토목부-4875
결재일자	2021. 4. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
김근수		허동	04/26 최병훈
협 조
	신림선과장			권영민
	주무관			김현오

『신림선 경전철 민간투자사업 궤도공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역』

사업기간 연장에 따른 건설사업관리 기술자 투입기간 조정

2021. 04.

도시기반시설본부

(도시철도 토목부)

「신림선 경전철 민간투자사업 궤도공사 건설사업관리용역」

사업기간 연장에 따른 건설사업관리 기술자 투입기간 조정

철도종합시험운행지침 개정에 따른 ********************** 반영과 현장 안전관리를 위한 선행 노반 공정조정에 따라 궤도공사 공정변경이 발생되어 건설사업관리기술자 투입기간을 최소 범위에서 조정하고, 이에따른 ********하고자 보고드림.

※ 건설사업관리용역사 철도2부 – 3606호(2021.4.23) 계약금액 변경 요청 건설사업관리기술자 투입기간 연장승인 요청

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 신림선 경전철 민간투자사업 궤도공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 구    간 : 영등포구 여의도동 ~ 관악구 신림동

○ 규    모 : 궤도부설 16.7kn(단선기준), 분기기 부설 18개소

○ 용역기간 : 2019.10.28. ~ 2022.02.27.

○ 계약금액 : 1,078,440천원

○ 계 약 자 : ************************************

□ 계약현황                                            (단위:천원)

구 분	총 차	1차	2차	3차
용역기간	‘19.10.28∼ ‘22.02.27	‘19.10.28∼ ‘19.12.31.	‘20.01.01∼ ‘20.12.31.	‘21.01.01∼ ‘22.02.27.
용역금액 (천원)	1,013,330	78,900	650,520	349,020

□ 보고내용

○ 선행공종인 토목분야 공정조정 및 ***************************에 따라 궤도공사 공정이 조정***********************되어 건설사업관리 기술인 투입기간 조정이 필요한 실정임.

□ 기술인 변경 검토내용

○ 건설사업관리기술인 투입기간 조정

구 분	투입 종료기간		투입 인원(인·월)
	당 초	변경	당초	변경	증·감
계			62.3	63.7	증1.4
책임 기술인(고급)	‘21. 6. 24	‘21. 7. 13	20.0	20.6	증0.6
분야별 기술인(중급)	‘21. 6. 24	‘21. 6. 15	17.0	16.8	감0.2
	‘21. 5. 07	‘21. 4. 30	11.9	11.8	감0.1
분야별 기술인(초급)	‘21. 4. 30	‘21. 4. 30	8.5	8.5	-
	‘21. 5. 21	‘21. 7. 13	4.9	6.0	증1.1

□ 계약금액 검토                                           (단위:천원)

구 분		총 차	1차	2차	3차
용역금액 (천원)	**	*********	******	*******	*******
	**	*********	******	*******	*******
	***	********	*	*	********
용역기간	변경 없음	‘19.10.28. ～ ’22.02.27.	’19.10.28. ～ ‘19.12.31.	‘20.01.01. ～ ’20.12.31.	‘21.01.01. ～ ’22.02.27.

□ 조치계획

○ 상기의 검토 내용과 같이 총사업기간 연장에 따라 “신림선 경전철 민간투자사업 궤도공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역”의 건설사업관리기술자 투입기간을 조정하여 계약금액을 변경하고자 함.

붙임 : 계약금액 변경 요청 공문 및 공구별 공정표 각1부.  끝.