문서번호	교량안전과-7293
결재일자	2021. 5. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		교량관리팀장	교량안전과장
정성민		박찬규	05/07 한휘진
협조
	주무관		박상홍

- 2021년 한강교량일상유지보수공사(1공구) - 제11차 작업지시(광진교) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 5.

안전총괄실

(교량안전과)

- 2021년 한강교량일상유지보수공사(1공구) -

제11차 작업지시(광진교) 검토보고

광진교 정밀안전점검 및 자전거도로 점검 결과 등에 대하여 일상유지보수를 시행하고자 검토 보고드림

□ 공사개요

○ 공사명 : 2021년 한강교량일상유지보수공사(1공구)

○ 공사규모

- 교면(아스팔트) 포장 54.8a, 교면방수 50a, 신축이음보수 115m

- 균열보수 30m, 표면보수 1,360㎡, 단면보수 180㎡, 강재도장 5,000㎡ 등

○ 공사기간 : `21.1.6.~`21.12.31.

○ 도 급 비 : 2,782백만원 (관급비 248, 이전비 46)

○ 시공사/사업관리 : ㈜국일구조/㈜동명기술공단 외 2개사

□ 광진교 재원

○ 위 치 : 서울특별시 광진구 광장동 ~ 강동구 천호동

구 분	구조형식	연 장(m)	폭(m)	설계하중	준공년도	비 고
본교	STB+SPG	1,055.9	20∼23.9	DB-24 DL-24	2005
북단램프	STB+R.C	139.6	7.5		2005
남단램프	STB+R.C	244.9	7.5		2007

□ 주요 손상현황

○ 2009년 ‘광진교 걷고싶은 다리 조성’시 상류측에 자전거도로를 신설하였으나, 공용기간 경과에 따른 망상균열, 균열 및 마모 등 다수 손상이 진행 중으로 자전거이용자 통행불편을 해소하고 안전사고 예방을 위하여 전면 재포장을 시행하고자 함.

- 절삭후 아스팔트 덧씌우기(t=5cm) : 22.6a (직접공사비 : 49,561천원)

- 손상 현황

결함종류	단위	북단 램프		비고
		물량	개소
포장 균열	m	148.1	120	평가등급 c~d
포장 망상균열	㎡	1747.3	25
포장 파손	㎡	0.05	1
포장 박리	㎡	2.51	9
체수	㎡	14.9	9

자전거도로 손상현황	광진교 8번가 앞

※ 자전거도로 재포장시 시의원 요청사항으로 자전거도로 선형을 조정하여 광진교 8번가 앞 출입구 앞 안전공간 확보 (보행자와 자전거이용자의 충돌 방지)

○	광진교 옛 교명주(1936년) 이설

- ‘36년 광진교 최초 건설당시의 교명주로서, 광진교의 역사를 간직한 옛 유산으로서의 가치를 고려하여 적정 위치로 이설

- 교명주 이설 및 안전난간 교체 10m (직접공사비 : 3,886천원)

교명주 이설 위치	교명주 이설구간 난간 교체

○ 금회 시행 중인 정밀안전진단 현장 조사 결과, 남단 램프 S4 구간 바닥판 하면 철근 노출이 확인되어 낙석 등에 따른 안전사고 예방을 위하여콘크리트 보수공 시행 (※ 현장조사시 부석 제거 임시조치 완료)

- 콘크리트 단면보수 3.9㎡  (직접공사비 : 1,474천원)

남단 램프 S4 철근 노출(낙석 위험)	판석 들뜸부 콘크리트 보수(P6~P10)

○ 기타 안전시설 및 부대공 1식

- 공사홍보물, 교통정리원, 사인보드 등 (직접공사비 : 13,210천원)

□ 작업지시 내역

- 개략 공사비 :124백만원 (관급자재비 105백만원, 폐기물처리비 5백만원 별도)

연번	세부위치	공 종	규 격	수 량	단 위	작업방법		작업조건		비고
						인력	기계	주간	야간
1	상류 P8, 하류 A2	보도용블럭 인력철거	B-TyPe	90.2	m2	○		●
2	상류 A1~A2	폐기물운반(아스콘)	야간,BH(0.2㎥)+DT(4.5T) 현장->집하장10㎞	113	m3		○		●
3	상류 P8	폐기물운반	주간,인력+DT(2.4T) 현장->집하장	7	m3		○	●
4	하류 A2	교명주 이동 재설치	주간	1	개소	○	○	●
5	상류 A1~A2	절삭후 아스팔트 덧씌우기(교량보도부)	야간,A-Type, T=5cm	22.6	a	○	○		●
6	상류 A1~A2	포장장비(중기)운반	광명시 소하동~광진교 (L=25Km적용)	6	회		○		●
7	상류 P8, 하류 A2	보차도 도로경계블록설치	주간,300미만, B-Type,직선구간	43.5	m	○		●
8	상류 P8, 하류 A2	보도용 블록 설치	주간,240미만, B-Type	90.2	m2	○		●
9	상류 A1~A2	미끄럼방지포장재	t=3mm	2,261	m2	○		●
10	하류 P6~P10	콘크리트 단면보수Ⅰ	t=30㎜,벽체	3.7	m2	○		●
11	남단 램프 S4	콘크리트 단면보수Ⅱ	t=30㎜,천장,철근노출	0.2	m2	○		●
12	하류 P6~P10, A2, 남단램프 S4	콘크리트 치핑	주간,인력 (10㎡미만,개소당)	5.4	m2	○		●
13	하류 A2	신구접착 콘크리트 프라이머	신구접착제	1.5	m2	○		●
14	하류 A2	철근가공 및 조립	간단	0.08	ton	○		●
15	하류 A2	합판거푸집	3회(복잡)	2.8	m2	○		●
16	하류 A2	현장비빔타설	인력,소형구조물	0.78	m3	○		●
17	하류 A2	케미칼 앵커설치	D16mm	40	EA	○		●
18	하류 A2	교량난간 설치	W2000*H1100	9.3	m	○		●
19	공사구간	라바콘 설치 및 철거	일반용 L400×W400×H750㎜	105	개소	○		●	●
20	상류 A1~A2	차선도색(융착식) 실선,황색	융착식	161.5	m2		○		●
21	공사구간	사인보드	주간, 29구 SB, 2.5톤, 1㎾, 8hr/일	16	HR		○	●
22	공사구간	사인보드	야간, 29구 SB, 2.5톤, 1㎾, 8hr/일	96	HR		○		●
23	공사구간	교통정리원	주간, 1인/일	6	일	○		●
24	공사구간	교통정리원	야간, 1인/일	18	일	○			●
25	교량진입구간	공사홍보물	재설치 (배너,간판,현수막)	14	SET	○		●
26	공사구간	공사홍보물	에어기둥(0.8*4m)	12	일		○		●

□ 조치계획

○ 2021년 한강교량일상유지보수공사(연간단가)-1공구에 작업지시하여 보수시행하고 추후 설계변경시 정산하여 반영하고자 함.

붙임  1. 작업지시서 및 내역서 각 1부.

2. 설계도면 1부.  끝.