문서번호	방재시설부-6179
결재일자	2021. 5. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		조경시설과장	방재시설부장
송석범		현학범	05/12 박홍봉
협조
	주무관		허성민

「동대문실버케어센터 건립공사」

조경공사 실정보고 검토보고

2021. 5.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「동대문실버케어센터 건립공사」

조경공사 실정보고 검토결과

본 공사 포장공사 중 데크포장 3,4층 테라스부분의 목재데크수량 산출에 누락되어 공사반영 필요성에 대한 실정보고 내용 검토결과임

※ *********************************************

1		공사개요

○ 공 사 명 : 동대문실버케어센터 건립공사(현공정 87.94%)

○ 위치/규모 : 동대문구 황물로 8[지하1층,지상 4층(연면적 2,884㎡)]

○ 공사기간 : 2019.8.1.~2021.7.4.(23개월)

○ 공 사 비 : *******************

○ 시 공 사 : ㈜서유종합건설

○ 감 리 사 : ㈜펨코엔지니어링건축사사무소

2		실정보고 내용

○ 보고경유(시공사→건설사업관리단→우리 본부)

- 조경공사(데크포장) 실정보고[서유21-04-08호(21.4.9.)호]

- 건설사업관리단 기술검토 및 실정보고 승인 요청[(PC21실버케어)-634(21.4.29.)호]

○ 보고내용

- 포장공사 중 데크포장 3,4층 테라스부분의 목재데크 수량산출이 내역에 누락되어 반영 필요

※ 누락사유

1) 설계 시 3,4층 테라스의 목재데크 물량이 조경도면에 누락되어 있음

2) 지상3층, 지상4층 146㎡(당초 272㎡→ 변경 418㎡)

○ *****************************

- ***************

- ************************

3		검토결과 및 조치의견

○ **********************************************************************

○ 계약변경 전 선시공 할 수 있도록 승인하는 것이 좋을 것으로 사료됨

붙임  실정보고서 1부.  끝.