문서번호	기전과-3841
결재일자	2021. 5. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	남부도로사업소장
박상갑		석대창	05/13 代이원철
협조	주무관		이정호
	주무관		조소현

상도터널 진입차단시설 설치 공사

설계 변경 검토 보고

2021. 5.

남부도로사업소

(기  전  과)

상도터널 진입차단시설 설치 공사

설계변경 검토 보고

설치도로터널 방재시설개선 예산 이전비에 대한 사용계획을 수립하여, 예산을 효과적으로 사용하여 예산 불용을 최소화 하고자 함.

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 상도터널 진입차단시설 설치 공사

○ 사업내용 : 터널진입차단시설 설치 1식(상, 하행)

○ 계약금액 : ************

○ 계약업체 : **************

○ 계약기간 : 2020. 12. 15. ~ 2021. 5. 14.

▢ 설계변경 내역

❍ 설계변경 금액

구 분	금 액(원)		증 감(원)
	변경 전	변경 후
도급금액	**********	**********	************

❍ 주요 설계변경 내용

공 종		내 용	비고
전원설비공사	강제전선관	야간 할증
	내화전선	야간 할증
제어설비공사	강제전선관	야간 할증
	내열전선	야간 할증
제경비	보험료 외	실비용 정산

❍ 예산과목 : 기전시설물 관리, 도로터널 방재시설 개선, 시설비 및 부대비, 시설비

▢ 보고자 검토의견

- 해당 공사구간은 교통량이 많은 구간으로서 터널 내 작업 시 주간 작업 불가하며 보도 폭이 좁아 보행자의 안전사고 위험이 높으므로 야간작업 실시함.

- 건강, 연금, 노인장기보험료 등 집행내역이 없는 보험료는 감액하였음.

- 제비율 검증결과 설계변경내역에 이상이 없으므로 설계변경 준공을 시행하고자 함.

▢ 향후계획

❍ 2021. 5. 12.    계약 변경 의뢰 (→ 관리단속과)

❍ 2021. 5. 14.    공사 준공

붙임  1. 실정보고 공문 및 실정보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 검증확인서 1부.

4. 공사 신고확인서 1부.  끝.