투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	한국전력공사 사장(강서양천지사장)
(경유)
제목	한전시설물 이설 요청[국회대로 2단계 1,2공구]

1. 우리 시 시정에 협조해주시는 귀 공사에 감사의 말씀을 드립니다.

2. 우리 시에서는 서울특별시 고시 제2021-220호(2021.5.6.)로 도시계획시설(도로)사업
실시계획 인가 고시된 「국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계) 건설공사」를 추진하고 있습니다.

3. 본 공사 구간에 저촉되는 한전시설물에 대하여 이설요청하오니「도로법」제90조(부대공사의 비용) 제2항에 따라 이설 비용은 귀사 부담으로 시행하시기 바라며, 공사 공정계획에 차질이 없도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 저촉 한전시설물 이설요청 현황

가. 1공구

위 치	시설명 및 수량		이설완료 요청 시점	비 고
	선로이설(m)	전주이설(EA)
STA.1+210~1+365	153	-	`21.6.30.까지	지중선로
STA.1+365~1+505	143	3		가공선로
STA.1+725~2+055	333	10		가공선로
STA.2+135~2+165	32	1		가공선로
STA.2+245~2+310	68	2		가공선로
STA.1+510~1+595	90	2		가공선로
STA.1+790~1+910	124	3		가공선로
계	943	21

나. 2공구

위 치	시설명 및 수량		이설완료 요청 시점	비 고
	선로이설(m)	전주이설(EA)
STA.2+306~3+326	62	2	`21.5.28.까지	지중선로
계	62	2

붙    임     1. 이설요청 문서(1공구, 2공구) 2부.

2. 도시계획시설(도로) 실시계획인가 고시 자료 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	노진우		방재시설과장	代김소연		방재시설부장	05/14 박홍봉
협조자	주무관	김소연
시행	방재시설부-6323	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	02-3708-8742	/전송	02-3708-8756	/	jiinnw@seoul.go.kr	/	부분공개(5)