문서번호	물재생계획과-7393
결재일자	2021. 5. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	하수악취저감팀장	물재생계획과장		물순환안전국장
이진숙	김형수	이임섭		05/21 최진석
협 조

「서울형 하수악취 저감 기본계획 수립 용역」

1차수 준공계획 보고

2021. 5.

물순환안전국

(물재생계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□	민원현황 검 토
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□	자문회의
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□	관련지침 검 토 (하수관로 악취관리지침)
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	■	□	환경보전
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	자치구 협 력
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□	환경보전
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「서울형 하수악취 저감 기본계획 수립 용역」 1차수 준공계획 보고

하수악취 없는 쾌적한 서울을 만들기 위한「서울형 하수악취 저감 기본계획 수립 용역」의 1차 과업을 완료하고 준공처리하고자 보고드림

1		용역개요

용 역 명: 서울형 하수악취 저감기본계획 수립 용역

대상지역: 서울시 전역

용역기간: ´20.6.30.~´21.12.31.(1차: ´20.6.30.~´21.5.31.)

용역금액: 금549,718,400원(1차: 금323,000,000원)

용역업체: ㈜한국하수도기술, 주식회사 태성종합기술

과업내용

□ 하수악취조사 및 공간별 등급 분류

□ 등급별 악취관리 목표 설정

□ 등급별 맞춤형 악취 저감방안 강구

□ 시범사업, 연차별 투자비용 산정

2		추진경과

□ 용역 계약 및 착수(´20.6.30.)

□ 착수보고 및 외부 자문회의 개최(´20.7.20.)

□ 1차 중간보고 및 외부 자문회의 개최(´20.12.2.)

□ 용역 변경계약(´20.12.26. 사유: 지속적 강우 및 겨울철 악취조사 장애)

- 준공기한 연장: (당초)´20.6.30.~´20.12.31.→(변경)´20.6.30.~´21.5.31.

□ 2차 중간보고 및 내부회의 개최(´21.5.20.)

3		준공(1차) 내역

과업 수행내용: 하수악취조사 및 공간별 등급 분류(1차)

□ 국내외 도심의 하수악취 저감 사례조사

- 국내외 하수도 악취 개선 관련 연구 및 적용 사례 조사

□ 하수악취 현황 조사

**********************************************

□ 서울시 자치구 동별 악취민원 현황 조사

*************************

□ 서울시 하수관로 전산시스템을 활용한 하수관로 현황 조사

**************************************

□ 등급별 하수 악취 시각화 지도 작성

********************************

□ 등급 선정을 위한 기준 및 관련근거 제시

***************************************

**************************************

**************************

□ 맨홀 악취 측정시 영향을 줄 수 있는 정화조 현황, 공기공급장치 현황, 관로퇴적 상태 등 자료 수집

***************************************

4		향후계획

□ ´21. 5. : 2차수 계약의뢰(물재생계획과→재무과)

□ ´21. 5. : 1차수 용역 준공검사 시행 후 준공처리

□ ´21. 6. : 2차수 용역 착수

□ ´21. 6. : 시범사업 계획 수립 및 자치구 예산 재배정.  끝.