투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	설계변경(총차3회, 3차1회) 계약 의뢰-중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사

우리부에서 시행중인 「중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차3회,  3차1회)을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사

나. 도 급 액 : 19,020,980천원

다. 공사기간 : 2019. 05. 27. ~ 2022. 08. 09.

라. 계 약 자 : (유)동경건설 외 2개사

마. 예산과목 : 하천관리과, 치수및하천관리, 하천복원및정비, 중랑천마스터플랜단기사업, 시설비

바. 설계변경사유

- 실정보고 사항 반영

- 공사 물량 조정

사. 설계변경 내역 (공사기간 : 변경사항 없음)

구분	계약금액		비고
	당 초	변 경
총차	19,020,980,000원	18,990,785,000원	감) 30,195,000원
3차	1,549,603,000원	1,487,519,000원	감) 62,084,000원

붙임 : 1. 검토보고서 1부.

2. 설계변경내역서(총차, 1차, 2차) 각1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	송민섭		치수시설과장	손창익		방재시설부장	05/28 박홍봉
협조자	주무관	이병환
시행	방재시설부-6942	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	02-3708-8772	/전송		/	sms2002@seoul.go.kr	/	부분공개(7)