문서번호	설비부-7906
결재일자	2021. 6. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
양우창		여인웅	06/08 김호성
협조

마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 기계설비공사 TAB기술용역 및 관급자재 변경계약 검토보고

2021. 6.

도시기반시설본부

(설비부)

마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 기계설비공사 TAB기술용역 및 관급자재 변경계약 검토보고

마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 기계설비공사 관련, TAB기술용역 및 관급자재 2종에 대한 계약변경 건에 대해 검토 보고 드림.

1		공사개요

○ 위  치: 강서구 마곡동 771-1

○ 규  모: 지하4층/지상8층, 연면적 21,628.58㎡

○ 기  간: 2018.10.18. ~ 2021.10.20.

○ 용  도: 지식산업센터(업무시설, 근린생활시설)

2		관련근거

○ TAB기술용역 외2건 계약변경 요청(토희마CM-606호)

3		검토내용

○ 계약기간 변경사유: 건축 공사기간 연장으로 인한 후속공정 순연

○ 계약기간 변경내역

구 분 (계약금액)	당 초	변 경	비 고 (계약번호, 납품요구번호)
TAB 기술용역 (금56,070,200원)	2020.5.6. ∼ 2021.6.30.	2020.5.6. ∼ 20021.10.30.	20200412C3D-00
엘리베이터 (금538,650,000원)	2020.11.3. ∼ 2021.6.19.	2020.11.3. ∼ 2021.10.20.	00-20-8-0293-05 12-20-2-67053-00
전기히트펌프 (금49,085,370원)	2021.4.26. ∼ 2021.6.25.	2021.4.26. ∼ 2021.8.24.	00-19-8-1574-13 12-21-2-22833-00

○ 건설사업관리기술자 의견

- TAB기술용역, 관급자재(엘리베이터, 전기히트펌프) 계약변경 내용을 검토한 결과, 건축공사 공사기간 연장의 사유로 계약기간을 연장함이 타당함.

4		보고자 의견

◯ 계약기간 변경 건에 대한 건설사업관리기술인의 검토의견이 적정하다고 판단되므로 계약부서(총무부)에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임: TAB기술용역 외2건 계약변경 검토보고(건설사업관리단) 1부 끝.