“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	공원녹지과-14410		주무관	자연생태팀장		공원녹지과장		도시환경국장
			김준식	최수영		김현경		전결 06/21 안재혁
등록일자	2021.6.21.
결재일자	2021.6.21.
공개구분	부분공개(5)
			협조자		행정국장		이수진
					재무과장		지영애
					계약팀장		한혜란

『2021년 근교산(대모산) 등산로 정비사업』

설계변경 추진 및 정산 보고

2021.  6.

	도 시 환 경 국
(	공원녹지과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	․「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 ․ 행정자치부 예규 제1호(2017.7.26.)『지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준』
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	․ 추진경위: 2021년 근교산(대모산) 등산로 정비사업 추진계획 [공원녹지과-794(2021.01.12.)]
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	․ 산출근거: 2021년 강남구 건설공사 설계기준 및 표준품셈 등
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	․ 지역주민 및 일반시민 등
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ○ ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ○ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	․ 서울시 및 자치구 사례 검토
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	․ 해당사항 없음

『2021년 근교산(대모산) 등산로 정비사업』

설계변경 추진 및 정산 보고

우리구에서 시행 중인 「2021년 근교산(대모산) 등산로 정비사업」과 관련하여 현장여건에 따른 사업물량 조정 및 신규공정 발생으로 인한 설계변경 필요사항 등을 실정보고하고 아래와 같이 설계변경코자 함

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명: 2021년 근교산(대모산) 등산로 정비사업

❍ 위    치: 강남구 일원동 산52-15번지 일대(대모산 도시자연공원)

❍ 공사기간: 2021. 05. 17. ~ 07. 15.

❍ 공사내용: 목계단 정비, 보행매트 설치, 횡배수대 설치, 수목식재 등

❍ 총공사비: 금83,279,170원(시비)

- 도급비: 80,111,170원

- 관급비: 3,168,000원

❍ 도급업체: 주식회사 청무이엔씨 대표 이현희

Ⅱ		설계변경 및 정산개요

❍ 설계변경 사유 및 내역

- 공사 추진 중 현장여건에 맞춰 신규공정 발생

구 분	현황 및 문제점	검토결과	비 고
시설공	∙ 기 설계된 목재 축대목 설치 대상지가 녹화되어 설치 불필요	○ 목재 축대목 - 목재축대목 설치(H700) 11m → 0m	적정
식재공	∙ 사업대상지가 지역 주민들이 이용하는 대모산 자락길과 인접함을 고려, 경관 개선을 위한 식재 물량 증대 필요 ∙ 교목 식재 대상지에 수목이 생육하고 있어 식재 물량 조정 및 위치 변경 필요	○ 수목식재 - 전나무(H2.0*W0.9) 15주 → 0주 - 덜꿩나무(H1.0*W0.4) 0주 → 350주 - 조팝나무(H1.0*W0.5) 0주 → 350주 - 좀작살나무(H1.2*W0.4) 150주 → 250주 - 꽃댕강나무(H0.8*W0.5) 150주 → 300주 - 화살나무(H0.8*W0.4) 0주 → 350주 - 황매화(H0.8*W0.4) 150주 → 250주 - 꽃무릇(개화구) 0본 → 600본 - 맥문동(8cm) 0본 → 2,260본	적정

❍ 현황사진

목재 축대목 설치 불필요(사면 피복)	수목 및 초화료 식재 대상지

❍ 정산내역

구 분	정산내용	비 고
보험료 정산	∙ 산재보헙료 899,357원 → 994,182원 ∙ 고용보험료 211,470원 → 233,767원 ∙ 건강보험료 850,814원 → 0원 ∙ 연금보험료 1,116,228원 → 0원 ∙ 노인장기요양보험료 98,013원 → 0원 ∙ 산업안전보건관리비 1,015,666원 → 1,069,459원 ∙ 환경보전비 156,611원 → 185,342원 ∙ 기타경비 3,957,600원 → 4,725,236원	감1,097,773원

❍ 공 사 비: 증10,517,830원

(단위: 원)

구 분		금액(원)			비고
		당 초	변 경	증 감
도급비	공급가액	72,828,337	82,390,000	9,561,663
	부 가 세	7,282,833	8,239,000	956,167
	계	80,111,170	90,629,000	10,517,830	13.1%증
관급비		3,168,000	3,168,000	-
총공사비		83,279,170	93,797,000	10,517,830	12.6%증

❍ 예산조치계획

- 본 공사 낙찰차액 내에서 사용

(단위: 원)

사업명	예 산 액①	원인행위액②	예산잔액 (낙찰차액포함)①-②	사 용 액	비고
대모산 등산로 정비(강남구)	93,797,000	83,279,170	10,517,830	10,517,830	낙찰차액(10,518천원)

- 예산과목: 푸른도시국 자연생태과, 생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호,

생태계 보전사업, 근교산 등산로 정비, 시설비 및 부대비, 시설비(시비)

Ⅲ		향후계획

❍ 2021. 6.: 설계변경 계약원가심사(공원녹지과 ⇒ 재무과)

❍ 2021. 6.: 설계변경 및 공사 준공

붙임: 1. 실정보고사항 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 검증확인서 1부.  끝.