2021년도 제20차 교통영향평가 심의위원회 심의안건

□ 일  시 :  2021. 06. 21.(월) 14:00

□ 장  소 :  서울시청 서소문별관 1동 7층 회의실

□ 안  건 :  삼익파크아파트 재건축정비사업 외 4건

접 수 번 호	사 업 명	사업시행자	평가기관	심의 종류	심의 결과	비 고
2021-43	삼익파크아파트 재건축정비사업 (강동구 길동 54번지 일대)	삼익파크아파트 재건축정비사업조합	㈜우리종합기술	신규	보완	강동구 (주택재건축과)
2021-40	홍제3구역 주택재건축정비사업 (서대문구 홍제동 104-41번지 일대)	홍제3구역 주택재건축정비사업조합	㈜도시미래종합 기술공사	변경	수정의결	서대문구 (주택과)
2021-32	명일동 복합시설 신축공사(약식) (강동구 명일동 48번지)	주양쇼핑 재건축위원회	㈜대건이엔씨	변경	수정의결	강동구 (건축과)
2020-91	마장축산물시장 일대 지구 단위계획구역 및 계획 결정 (성동구 마장동 510-3 일대)	서울특별시장	㈜태승알엔디	보완	보완	재생정책과
2020-104	청량리 제6구역 주택재개발 정비사업 (동대문구 청량리동 205번지 일대)	청량리 제6구역 주택재개발정비사업조합	㈜KTS엔지니어링	보완	수정의결	동대문구 (주거정비과)

2021년도  제20차 서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 삼익파크아파트 재건축정비사업

(강동구 길동 54번지 일대)

□ 심의일시 : 2021. 6. 21.(월) 14:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 48,446.00㎡, 건축연면적 240,640.88㎡

○ 사업기간 : ~2027년

○ 사  업  자 : 삼익파크아파트 재건축정비사업조합

○ 수립대행자 : ㈜우리종합기술

□ 심의내용 : 보완

구 분	심 의 내 용	비 고
	○명일로는 사업시행시 도로 용량 적정성 분석을 재검토하고, 용량 확보 방안을 제시할 것 ○사업지 2단지 남측 일방통행 시점부에 오진입 방지를 위한 도류화시설 및 안전시설물 등을 재설계할 것 ○사업지 주변 교차로는 신호현시를 재설계할 것 - 회전교통량 고려하여 재설계, 대각선횡단보도(2개소) 삭제 등 ○사업지 진출입구는 재설계할 것 - 1단지 : 주출입구 진입 2개 차로, 진출 2개 차로, 반사경 등 안전시설물을 추가 설치 - 2단지 : 진입 2개 차로, 진출 1개 차로 설계, 반사경 등 안전시설물을 추가 설치 ○사업지 주출입구의 회차공간은 회전반경을 충분히 확보하고 차로(8.0m) 폭원 축소 및 드롭존 규모 확대 등 재설계할 것 ○사업지내 부출입구(2개소) 어린이통학차량 정차공간 및 회차공간을 지하주차장에 추가 확보하여 설치할 것 ○지하주차장 108동 하부를 포함하여 전반적으로 주차면 위치를 조정하여 교차지점 및 주차면을 재설계할 것 ○사업지 서측 공원조성 계획에 대한 구체적 사유 등을 제시할 것 - 진출입로 및 주차계획에 대한 구체적 내용 제시

○ 의결내용 세부명세

2021년도  제20차 서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 홍제3구역 주택재건축정비사업(변경)

(서대문구 홍제동 104-41번지 일대)

□ 심의일시 : 2021. 6. 21.(월) 14:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 27,284.60㎡, 건축연면적 109,390.35㎡

○ 사업기간 : ~2026년

○ 사  업  자 : 홍제3구역 주택재건축정비사업조합

○ 수립대행자 : ㈜도시미래종합기술공사

□ 심의내용 : 수정의결

구 분	심 의 내 용	비 고
	○사업지 주출입구는 재설계할 것 - 진입차로(학원차량) 삭제 등 - 주출입구의 어린이통학차량 정차공간은 삭제하고, 주차장 내부의 회차가 원활한 동선상에 안전한 위치로 재설계(3개소 이상) ○지하주차장 램프#2는 부출입구 진출입 차량과의 상충을 최소화하는 방안을 강구할 것 - 램프의 진출입 방향 변경 등 ○Ⓚ지점 공공자전거 대여소는 남측으로 위치 조정을 검토하고 서울시 자전거정책과 등 관련부서와 협의할 것 - 공원 및 지하철역과 연계 검토

○ 의결내용 세부명세

2021년도  제20차 서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 명일동 복합시설 신축공사(약식)(변경)

(강동구 명일동 48번지)

□ 심의일시 : 2021. 6. 21.(월) 14:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 6,770.40㎡, 건축연면적 99,440.29㎡

○ 사업기간 : ~2025년

○ 사  업  자 : 주양쇼핑 재건축위원회

○ 수립대행자 : ㈜대건이엔씨

□ 심의내용 : 수정의결

구 분	심 의 내 용	비 고
	○사업지 앞 노상공영주차장은 진출입부 도류화 및 동남로73길과 연계하여 동선을 재설계할 것 ○사업지 진출입구는 동남로73길상에 설치하고, 교차로로 운영하여 전방향 회전이 가능하도록 재설계할 것 ○지하주차장 램프의 연석은 삭제하고, 폭원을 재조정할 것 ○사업지 남측 어린이보호구역내 버스정류장 및 노상주차면은 삭제 또는 위치 조정을 검토하고, 자치구 관련부서와 협의할 것

○ 의결내용 세부명세

2021년도  제20차 서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 마장축산물시장 일대 지구단위계획구역 및 계획 결정

(성동구 마장동 510-3 일대)

□ 심의일시 : 2021. 6. 21.(월) 14:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 구역면적 269,091.00㎡

○ 사업기간 : ~2030년

○ 사  업  자 : 서울특별시장

○ 수립대행자 : ㈜태승알엔디

□ 심의내용 : 보완(2차)

구 분	심 의 내 용	비 고
	○마장축산물시장 서문 교차로는 교통량 및 통행패턴을 종합적으로 고려하여 대안을 검토할 것 ○사업지내 일방통행 체계는 전반적으로 재검토할 것

○ 의결내용 세부명세

2021년도  제20차 서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 청량리 제6구역 주택재개발 정비사업

(동대문구 청량리동 205번지 일대)

□ 심의일시 : 2021. 6. 21.(월) 14:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 60,446.30㎡, 건축연면적 242,942.31㎡

○ 사업기간 : ~2025년

○ 사  업  자 : 청량리 제6구역 주택재개발정비사업조합

○ 수립대행자 : ㈜KTS엔지니어링

□ 심의내용 : 수정의결

구 분	심 의 내 용	비 고
	○소로2-1호선 및 소로2-2호선은 홍릉로와 연계하여 순환동선체계로 재설계할 것 - 소로2-1호선 : 일방통행 방향 변경 등 ○사업지 주출입구는 진입 2개 차로, 진출 2개 차로로 설계하고, 회전반경은 어린이통학차량을 고려하여 추가 확보할 것 ○사업지 동측 부출입구 위치는 경희사이버대학교 앞 교차로와 일치시키고, 이와 연계하여 경희사이버대학교 앞 교차로 통행체계도 재설계할 것 ○계획주차대수는 원안(사전검토보완안) 수준으로 최대한 추가 확보할 것

○ 의결내용 세부명세