문서번호	물재생계획과-9210
결재일자	2021. 7. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	하수악취저감팀장	물재생계획과장		물순환안전국장
이진숙	김형수	이임섭		07/06 최진석
협 조

「서울형 하수악취 저감 기본계획 수립 용역」

시범사업 추진계획

2021. 7.

물순환안전국

(물재생계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□	민원현황 검 토
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□	자문회의
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□	관련지침 검 토 (하수관로 악취관리지침)
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	■	□	환경보전
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	자치구 협 력
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□	환경보전
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「서울형 하수악취 저감 기본계획 수립 용역」 시범사업 추진계획

「서울형 하수악취 저감 기본계획 수립 용역」관련 하수악취 저감방안 검증을 위해 신공법 등을 적용한 시범사업을 추진하고자 함

1		추진근거 및 경과

추진근거

□ 악취 등 3대 시민생활불편 개선계획(시장방침, 생활환경과, ´15.6.14)

□ 하수악취 저감 기본계획 수립(물재생계획과-11764, ´19.8.27)

- 모든 하수악취 등급이 포함된 자치구를 선정하여 목표달성방안 검증을 위한 시범사업을 실시하여 용역결과에 반영

추진경과

□ 서울형 하수악취 저감 기본계획 수립 용역 시행(´20.6.~´21.12.)

- 착수보고(´20.7.20.)

- 1차 중간보고(´20.12.2.): 25개 자치구 중 12개 자치구 조사 후

→ 목표 등급별 시범사업 대상지 1차 검토(서초구, 금천구, 중구)

- 2차 중간보고(´21.5.20.): 25개 자치구 전체 조사 후

→ 최적 시범사업 대상지 선정 검토(동대문구)

□ 시범사업 관련 자치구 및 관계기관 의견조회(´21.6.)

□ 악취저감시설 설치 세부지점 및 사업비 확정(´21.7.)

	<서울형 하수악취 저감 기본계획 수립 용역>
▸ 용역기간 : ’20.6.30.~’21.12.31. (2차:’21.5.26.~‘21.12.31.) ▸ 계약금액 : 549,718천원 (2차: 226,718천원) ▸ 용 역 사 : ㈜한국하수도기술, ㈜태성종합기술

2		시범사업 개요

사업대상: 동대문구 회기역 주변(면적 76,728㎡, 관로연장 3,662m)

□ 맨홀 악취조사(29개소) 결과 악취 등급(최대 농도): **********

□ 기상중 악취지도 결과 3,4,5등급 하수관로 연장 비율: *****

사업기간: 2021. 7.~11.

소요예산: *********(용역비와는 별도예산, 구비 56,000천원 포함)

추진방법: 자치구 예산 재배정하여 추진

□ 악취저감방안 제시(설계) 및 사업효과 분석: 서울시

□ 악취저감시설 설치 공사발주 및 사업시행: 동대문구(치수과)

-「서울형 하수악취 저감 기본계획 수립 용역」수행 중인 용역사와 긴밀히 협력하여 추진

사업내용

□ 하수악취발생 특성 및 원인에 따라 신공법 등을 적용하여 다양한 악취저감시설을 설치 후 저감효과를 분석

□ 목표등급 달성을 위한 저감방안을 검증하여 기본계획 용역에 반영

< 동대문구 회기역 주변 시범사업 대상구역 >

3		시범사업 세부계획

목표 악취등급: 2등급

□ 시범사업 대상지 포함 토구별 소구역(3): 이문-1, 이문2-1, 이문2-2

⇒ 3개 소구역 모두 하수악취 관리구역 구분 기준상 목표 악취등급이 3등급인 일반관리구역에 해당하나, 시범사업임을 감안하여 목표등급을 2등급으로 상향 설정하여 시행

하수악취 저감시설 및 측정시설 설치계획

□ 악취저감시설 설치 대상관로: 3,4,5 등급 하수관로

구분	색상	관로 개소수	관로 연장(m)	비율(연장기준)
1등급(쾌적)		4	93	2.5%
2등급(양호)		17	431	11.8%
3등급(보통)		31	847	23.1%
4등급(불량)		36	1,065	29.1%
5등급(불쾌)		54	1,226	33.5%
계	-	142	3,662	100.0%

□ 악취 발생원, 발산원, 배출원에 따른 적용기술

- 하수관로 악취 관리 지침(환경부, 2020)의 최신기술 및 신기술 등

시설별 설치계획(세부내역: 붙임 시범사업계획 참조)

구분		지점수	시설수	설치기준
발생원 대책	정화조 악취저감시설	10	16*	악취발생 지점 인근 건물 정화조
	맨홀 인버트	17	17	악취발생 지점 인근 하수관로 맨홀 중 인버트 미설치 맨홀
	간이복합단면	1	(30m)	통수능 문제가 없고 청천시 유속 증가로 퇴적 상황 개선 가능한 구간
	세정 및 준설	-	(3,138m)	악취지도 기준 3~5등급 하수관로
발산원대책	박스 낙차부 낙차완화시설	3	4	악취발생 지점 인근 하수관로 중 박스형 하수관로에 연결된 낙차 0.3m이상 지점
	지주형 악취제거시설 (외부노출)	6	6	강제배출형 정화조 영향만으로 악취가 발생하는 지점을 제외한 악취발생 지점 인근 하수관로 중 원형 하수관로 구간
	스프레이 악취저감시설 (외부노출)	3	3	강제배출형 정화조 영향만으로 악취가 발생하는 지점을 제외한 악취발생 지점 인근 하수관로 중 박스형 하수관로 구간
배출원 대책	맨홀 악취차단장치	61	61	악취발생 지점 인근 하수관로 맨홀
	빗물받이 악취차단장치	83	146	악취발생 지점 인근 하수관로로 연결된 빗물받이 중 빗물받이 악취차단장치 파손 또는 미설치 빗물받이
측정 시설	하수악취 측정시설 (외부노출)	3	3	정화조 악취저감시설 의무설치 대상 정화조에 의해 악취가 발생하는 지점, 정화조 악취저감시설 설치 및 하수관내 악취저감시설 설치 대상지 인근 지점

* 정화조 악취저감시설(공기공급장치 등)은 500인조 당 시설 1개 설치 기준

- 해당 구역내 200인조 미만 강제배출형 정화조는 없음.

4		예산배정 계획

예산배정기준: 서울형 하수악취 저감 기본계획 수립 용역에서 산출한 사업비를 동대문구에 배정(정화조 악취저감시설 설치비 제외)

□ **************************************)

□ 세부산출내역

구분		단가(천원)	개소수	합계(천원)		비고
발생원 대책	정화조 악취저감시설	*****	****	********		****************
	맨홀 인버트	**	**	******		************
	간이복합단면	******	***	*****		*********
	준설 및 세정	******	******	******		************
발산원 대책	박스 낙차부 낙차완화시설	***	*	*****		*********
	지주형 악취제거시설	**	*	**	*******	*********
				**	******	******
				**	******	******
				**	*******
	스프레이 악취저감시설	**	*	*******		*********
배출원 대책	맨홀 악취차단장치	***	**	*****		****************
	빗물받이 악취차단장치	***	** ******	******		**************** *************
하수 악취 측정 시설		**	*	**	******	*********
				**	*****	******
				**	*****	******
				**	******
소계		*	*	******* *********

예산 배정액: *******천원

□ 예산과목: 물재생계획과, 사업비용, 영업비용, 관거비, 수선유지교체비, 수선유지비(하수도 악취 저감 추진)

5		행정사항

□ 시범사업 예산 자치구 배정(서울시→동대문구)	: '21. 7.
□ 사전절차 이행 및 공사시행(동대문구)	: '21. 7.~10.
□ 시범사업 효과분석 및 용역 결과에 반영(서울시)	: '21. 11.

붙임  1. 서울형 하수악취저감 기본계획 용역_시범사업 계획 수립 보고서 1부.

2. 시범사업 적용 하수악취 저감시설 개요 1부.

3. 자치구별 하수악취저감 예산신청 및 배정 세부내역 1부.  끝.

붙임2		시범사업 적용 하수악취 저감시설 개요

정화조	악취저감시설
	황산화미생물(SOB) 담체와 회전류 기포발생장치인 캐비테이터로 구성, 호기성 미생물을 활성화하여 악취물질발생 억제
공공하수도	맨홀내 인버트
	원활히 하수가 흐르도록 하여 퇴적물 생성 방지
	간이복합단면
	하수관로 유속 향상을 통한 퇴적물 생성 방지
	하수관로 낙차완화장치
	하수관로와 유입하수관 간의 낙차를 완화시켜 악취물질 발산 억제
	하수관로 악취저감시설	하수박스 악취저감장치 하수관로 악취 흡착분해시설
	□하수박스: 물을 분사하여 황화수소 등 악취물질 제거 □하수관로: 악취물질 흡착분해처리
	맨홀, 빗물받이 악취차단장치	맨홀 악취차단장치 빗물받이 악취차단장치
	악취차단을 통한 외부 배출 방지

붙임3		자치구별 하수악취저감 예산신청 및 배정 총괄내역('21년)

(단위 : 천원)

자치구	신청액	배정 총액	1차 배정액	2차 배정액	3차 배정액
합 계	9,606,985	6,500,000	5,861,274	51,500	587,226
종 로	25,000	492,000	492,000 (도심명소 467,000)	-	-
중 구	25,000	87,000	87,000 (도심명소 467,000)	-	-
용 산	800,000	600,000	600,000	-	-
성 동	114,000	114,000	114,000	-	-
광 진	153,400	153,400	153,400	-	-
동대문	2,000,000	1,068,482	564,000	-	504,482 (시범사업)
중 랑	1,982,150	600,000	600,000	-	-
성 북	22,500	22,500	22,500	-	-
강 북	33,750	33,750	33,750	-	-
도 봉	622,900	450,200	450,200	-	-
노 원	67,375	67,375	67,375	-	-
은 평	44,000	42,000	42,000	-	-
서대문	51,500	51,500	-	51,500	-
마 포	40,500	40,500	40,500	-	-
양 천	14,000	14,000	14,000	-	-
강 서	321,000	321,000	321,000	-	-
구 로	30,000	30,000	30,000	-	-
금 천	16,290	16,490	16,490	-	-
영등포	500,000	370,000	370,000	-	-
동 작	351,100	358,100	358,100	-	-
관 악	379,520	379,520	379,520	-	-
서 초	1,592,000	600,000	600,000	-	-
강 남	122,000	122,000	122,000	-	-
송 파	242,000	242,000	242,000	-	-
강 동	57,000	57,000	57,000	-	-
서울시		167,183	84,439 (악취조사 용역)	-	82,744 (배정잔액)