공  사  설  명  서

1. 공   사   명 : 2021년 산림내 배수로 및 토사유출지 정비공사

2. 위        치 : 서울특별시 강북구 우이동 산46-14번지 등 7개소

3. 목        적 : 토사 및 낙석이 발생하는 주택가 및 산림 내 비탈면에 대하여 사면 안정 및 유출방지 시설을 설치함으로써 안전

사고를 사전에 예방코자 함.

4. 공 사  기 간 : 착공일로부터 60일간

5. 설 계  개 요 :

1. 철거공
① 포장절단 5.9m	② 구조물헐기 164.2㎥	③ PP마대헐기 4㎡	④ 조경석헐기 25.8㎡
⑤ 메쉬휀스철거 1경간	⑥ 휀스철거 및 재설치 2경간	⑦ 석축헐기 2.4㎡	⑧ 수목제거 2본
⑨ 잡관목제거 60㎡
2. 구조물공
① 목재흙막이 10m	② 운반성토 및 다짐 1㎥	③ 제형돌수로 12m	④ 집수정 1개소
⑤ 콘크리트수로관 1본	⑥ 스틸그레이팅 2개	⑦ 콘크리트포장A 1,071㎡	⑧ 침사지보수 1개소
⑨ 조경석쌓기A 24㎡	⑩ 조경석쌓기B 12㎡	⑪ 깬돌기슭막이 13㎡	⑫ 기초 및 천단 17m
⑬ 식생토낭쌓기 14.4㎡
3. 운반공
① 자재소운반(인력) 31.1ton	② 자재소운반(경운기) 25.5ton	③ 레미콘소운반 4.5㎥	④ 폐기물소운반(인력) 2.4ton
⑤ 임목폐기물소운반(경운기) 0.5ton
4. 식재공
① 개나리식재 140주
5. 부대공
① 폐기물상차 170.2㎥	② 공사안내판 1ea	③ 공사현수막 3ea
6. 관급자재
① 레미콘 223㎥	② 목재난간 12m

6. 본 공사의 설계적용 기준은 다음과 같다.

가) 환        율 : 2021년 4월 외환은행 고시 환율 ￦1,132.60원으로 선정

나) 자 재  시 세 : 2021년 4월 조달청 가격정보 및 시중 물가자료, 물가정보, 유통물가, 거래가격지에 의거 산정하였음.

다) 노임 및 품셈 : 2021년 상반기 시중노임단가(대한건설 협회 2021. 1.),

서울형 사방시설 설계 및 시공기준(서울시, 2016. 8),

사방표준품셈(산림청고시 제2014-23호),

건설공사표준품셈(한국건설기술연구원, 2021.)

라) 유   류   대 : 2021년 4월 석유공사 전국 주유소 평균가 적용

휘발유 – 1,395원/ℓ, 경유 – 1,212원/ℓ