문서번호	방재시설부-9342
결재일자	2021. 7. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
홍민철		김태중	07/15 박홍봉
협 조
	주무관			박진석

『국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계)

감독 권한대행 등 건설사업관리용역(장기계속)』

설계변경(4차1회) 검토보고

2021.  7.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계)

감독 권한대행 등 건설사업관리용역(장기계속)』

설계변경(4차1회) 검토보고

『국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계) 감독 권한대행 등 건설사업관리용역』의 원활한 업무수행을 위하여 물가변동(ES반영) 및 우당기념관 건설사업관리기술인(비상주) 투입과 4차분 기간연장에 따른 설계변경(4차1회) 코자 함.

[관련공문 : 이산 2021-4112호(2021.07.14.)]

Ⅰ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계) 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(장기계속)

○ 용역기간 : ’16.  10. 04. ~ ’22. 02. 03. (전체분)

’21.  01. 01. ~ ’21. 7. 27. (4차분)

○ 용 역 비 : 3,586백만원(4차 : 500백만원)

○ 건설사업관리단 : ㈜이산, ㈜동일기술공사, ㈜수성엔지니어링, ㈜한맥기술

Ⅱ		감리단 보고내용

□ 설계변경 사유

○ 2021년 물가상승비 반영

- 관련문서 : 물가변동에 의한 계약금액 조정 승인(도기본-21-4579,‘21.04.29)

○ 우당기념관 건설사업관리기술인 투입(전기, 정보통신, 소방설비)

- 우당기념관 건설사업관리기술인 투입 요청(도기본-21-701,‘21.01.21)

○ 4차분 용역기간 변경

- 감리비 부족분 추경예산 반영

□ 설계변경 주요내용

○ 용역비 및 용역기간 변경 현황

구 분		당 초	변 경	증∙감
총차	용역기간	2016. 10. 04. ～ 2022. 02. 03.	2016. 10. 04. ～ 2022. 02. 03.	-
	용역금액	3,585,980,000	3,653,760,000	증)67,760,000
4차	용역기간	2021. 01. 01. ～ 2021. 07. 27.	2021. 01. 01. ～ 2021. 12. 31.	증)5.1개월
	용역금액	500,000,000	926,200,000	증) 59,730,000

○ 4차분 용역비 및 용역기간 변경 현황

구 분	1차분			비고
	당 초	변 경	증⦁감
1. 용 역 비	500,000,000원	926,200,000원	증)426,200,000원
-물가변동비	-	26,053,500원	증) 26,053,500원
-우당기념관	-	15,950,000원	증) 15,950,000원
-기간연장	-	384,196,500원	증)384,196,500원
2. 용역기간	‘21.01.01~’21.07.27	‘21.01.01~’21.12.31	증) 5.1개월

○ 4차분 건설사업관리기술자 실투입일 반영 조정 현황

구분	당초	변경	증⦁감	비고
특급기술자(책임)	6.73개월	11.86개월	5.14개월
고급기술자(토목)	6.68개월	11.86개월	5.18개월
고급기술자(안전)	6.68개월	11.86개월	5.18개월
중급기술자(토목)	6.73개월	11.86개월	5.14개월
기술지원기술자	6.73개월	11.86개월	5.14개월
우당기념관(비상주)	-	주1회, 총10회	주1회, 총10회

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 상기와 같이 건설사업관리용역(전체분, 4차분) 설계변경 사유는 물가변동(ES반영) 반영 및 우당기념관 건설사업관리기술인(비상주) 투입과 4차분 기간연장에 따른 것으로 계약변경을 추진코자 함.

Ⅲ		보고자 의견

○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제22조 규정에 따라 물가 변동으로 인한 계약금액을 조정·반영하고,

○ 남산예장자락 공사관련 추진한 『우당 이회영 기념관 전시인테리어 설치공사』의 설비분야 협조사항에 대한 건설사업관리기술인 투입 및 감리비 부족분에 대한 추경예산 반영하는 설계변경(4차1회)을 시행하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함

붙 임 : 건설사업관리용역 설계변경 요청 문서 1부.  끝.