투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서부공원녹지사업소장(공원운영과장)
(경유)
제목	신월IC 가속차로 관련 허가 기간연장 요청

1. 신월IC 가속차로 공사수행과 관련하여 폭염 등 계절적 요인을 감안하여 식생시기를 활착이 용이한 시기에 공원내 조경 식재를 진행하고자 서서울호수공원 임시 점용허가 기간연장을 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 허가기간 요청내용

1) 당초 : 2020.11.20. ~ 2021.07.31

2) 변경 : 2020.11.20. ~ 2021.10.31

붙임 : 관련문서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	홍민철		방재시설과장	김태중		방재시설부장	07/22 박홍봉
협조자	주무관	박진석
시행	방재시설부-9719	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	02-3708-8765	/전송	02-3708-8756	/	mchong@seoul.go.kr	/	부분공개(5)