투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰 [새로운광화문광장 조성 옥외 전기공사-제2회]

우리 본부에서 시행 중인「새로운광화문광장 조성 옥외 전기공사」와 관련하여 아래와 같이 준공기한을 연기코자 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 새로운 광화문광장 조성 옥외 전기공사(제2회)

나. 계 약 자 : ㈜ 프라임기전  대표 장공식 / ㈜ 동광디테크 최외식

다. 계약변경 내용

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	2020.12.01. ~ 2021.07.31.	2020.12.01. ~ 2021.10.31.	92일 (증)
도 급 비	1,072,736,750원	변 경 없 음

라. 예산과목 : 도시재생실 광화문광장추진단, 광화문일대 역사성 장소성 회복, (도시개발특별회계)시민중심대표공간조성, 광화문시민광장 조성, 시설비 및 부대비.

마. 변경사유 : 의뢰부서(광화문추진단)에서 추가요청한 세종대로 사거리 등 선행 토목공정이 순연됨에 따라 후속 전기공사 기간도 연장(92일)

붙임   1. 공사연기 보고서 1부.

2. 합의서 및 공사예정공정표  각 1부  끝.

	설비부장
주무관	백남진		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	07/23 김호성
협조자
시행	설비부-10521	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8626	/전송	02-3708-8659	/		/	부분공개(5)