문서번호	시설과-4962
결재일자	2014.8.20.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장
문한성		08/20 공헌구
협 조
	주무관			이상국

서울대공원 조절저수지 정밀안전진단 용역 현장실정보고에 따른 설계변경 검토보고

2014. 8

서울대공원

(시설과)

서울대공원 조절저수지 정밀안전진단 용역 실정보고에 따른 설계변경 검토보고

조절저수지 정밀안전진단 용역과 관련 계약상대자로부터 과업물량 증·감에 대한 실정보고가 있어 설계변경에 대하여 검토하고 조치계획을 보고 드림

□ 용역개요

❍ 계약건명 : 서울대공원 조절저수지 정밀안전진단 용역

❍ 계약상대자 : ㈜한국시설안전연구원, ㈜유원이엔씨 컨소시엄

❍ 계약금액 : 175,560,000원

❍ 용역기간 : ‘14. 1. 7 ~ 8.31

□ 실정보고 사항

❍ 과업내용 변경

- 당초 용역 계약 시 지반조사(전기비저항 탐사, 표면파 탐사) 수량이 각 0.8km 이었으나 현장조사 결과 조사수량 감소

- 조절저수지 퇴사량 조사에 따른 수중측량(수중초음파탐사) 추가조사 필요

❍ 설계내용 변경

- 설계변경 세부내역

공종	당초		변경		금액 증·감
	수량	금액	수량	금액
2차원 전기비저항 탐사	0.8km	12,612,420원	0.4km	6,306,210원	감) 6,306,210원
2차원 표면파 탐사	0.8km	10,777,575원	0.1km	1,347,196원	감) 9,430,379원
수중(수중초음파탐사)측량	-	-	18,256㎡	15,736,589원	증) 15,736,589원
계					0

❍ 용역비 증·감

- 총 용역비 : 175,560,000원 (증·감 없음)

구분	변경 전	변경 후	비 고
공 급 가 액	159,600,000원	159,600,000원
부가가치세	15,960,000원	15,960,000원
합계	175,560,000원	175,560,000원

□ 검토내용

❍ 과업내용 변경사항

- 과업내용서 특별과업내용 중 저수지내 퇴사량을 조사토록 되어 있으나, 조절저수지 담수 상태에서 퇴사량 조사는 수중측량이 필요하여 선택과업 반영 필요 ⇒ 변경승인

❍ 설계내용 변경사항

- 전기비저항 탐사 및 표면파 탐사의 수량 감소로 인한 감액과 수중측량 추가비용 산정시 낙찰율 적용 금액 반영 ⇒ 변경승인

❍ 계약금액 증·감사항 : 변경사항 없음

□ 조치의견

❍ 현장여건 및 과업내용서 조사항목을 반영하기 위한 과업물량 증·감사항으로 설계변경 및 계약변경 처리코자 함

□ 행정사항

❍ 계약부서에 계약변경 조치 의뢰 (시설과 → 재무과)

붙임  1. 계약상대자 현장실정보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.