투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경 의뢰(서울대공원 조절저수지 정밀안전진단 용역)

1. 재무과 –30858호(2014. 7. 4) 및 시설과-4962호(2014. 8.20)와 관련입니다.

2. 우리 대공원에서 시행중인 정밀안전진단 용역과 관련하여 아래와 같이 설계변경을  의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울대공원 조절저수지 정밀안전진단 용역

나. 계 약 자 : ㈜한국시설안전연구원(안평기), ㈜유원이엔씨(황광철) 컨소시엄

다. 용역기간 : 2014. 1. 7 ~ 2014. 8.31

라. 계약금액 : 175,560,000원

마. 예산과목 : 도시안전실 하천관리과, 치수및하천관리, 치수사업, 재난예방(재난관리기금  재난계정), 시설비(401-01)

바. 설계변경 : 용역기간, 계약금액 변경없는 과업물량 변경

- 사유 : 현장여건 및 조사항목 반영하기 위한 과업물량 증·감

붙임  1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 현장실정보고서 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	서울대공원장
주무관	문한성		시설과장	08/21 공헌구
협조자	주무관	이상국		계약1팀장	김점선
시행	시설과-5018	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 막계동 서울대공원 대공원광장로102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7414	/전송	02-507-7230	/	moon29@seoul.go.kr	/	부분공개