투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	신림선 설비(시스템)분야 8월 공정회의 결과 알림

1. 도시철도설비부-7542(2021. 8. 12)호와 관련입니다.

2. 신림선 건설공사의 신속한 추진을 위해 실시한 “신림선 설비(시스템)분야 통합공정회의”결과 논의된 사항이 이행될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

가. 회의결과

1) 소방공사 완성검사 필증(2021. 10. 29) 관련

- 소방공사 완성검사를 받기 위해 소방설비의 동작시험, 성능테스트, 풍량 및 유량시험 및 조정과 평가를 위해 각 정거장 구조물(천정, 벽체, 바닥 마감) 공사를 늦어도 추석 전까지 완료 요청

- 102 정거장의 환승통로에 소방설비(스프링쿨러, 유도등, 자탐설비) 등이 설치되어야 할 사항으로 ‘21. 9. 30까지 구조물 및 천정마감 완료 요청

- 108 정거장의 시수 인입을 위해 외부 되메우기 공사를 ‘21. 9. 30까지 완료 요청.   끝.

	도시철도설비부장
수신자	도시철도사업부장,도시철도건축부장
주무관	박상규		설비계획과장	배광희		도시철도설비부장	08/13 代전계목
협조자
시행	도시철도설비부-7593	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 8층 하천관리과 (서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	2133-3868	/전송	2133-1044	/	sk890@seoul.go.kr	/	대시민공개