문서번호	도로보수과-7855
결재일자	2021. 8. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
맹우재		윤옥광	08/19 김영철
협 조
	주무관			이이용

2021년 도로부속시설물 설치사업 등 4개사업 무단횡단금지시설 설치계획 보고

2021. 08.

서부도로사업소

도로보수과

2021년 도로부속시설물 설치사업 등 4개사업

무단횡단금지시설 설치계획 보고

2021년 도로부속물 설치사업 등 4개 사업에 대한 무단횡단금지시설을 설치하여 시민들의 안전사고(교통사고) 예방에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 2021년 도로부속물(중앙분리대, 미끄럼방지)예산 재배정 알림

○ 도로관리과-3245(2021.02.24.),  예산액 : 200백만원

□ 2021년 무단횡단 금지시설 설치구간 및 예산 재배정 알림

○ 교통운영과-4688(2021.03.29.), 예산액 : 489백만원

Ⅱ		사업개요

□ 사 업 명 : 2021년 무단횡단금지시설 설치 등 4개사업

□ 사업기간 : 2021.08월 ~ 12월

□ 위    치 : 증가로(북가좌사거리~증산2교)외 14개소

□ 사업내용 : 무단횡단 금지시설(간이 중앙분리대) 설치

□ 사업규모 : 3,492경간 (6,856m)

□ 소요예산 : 689백만원

Ⅲ		관련규정

□ 물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리 기준

○ 조달청 고시 제2018-16호(‘18.11.12.)

□ 서울시 특정기술 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한조례(’19.11.17.)

○ 특정제품의 제조․구매 금액의 합계가 2천만원(부가세 제외금액) 이상

Ⅳ		추진계획

□ 노후 무단횡단 금지시설 교체

○ 위치 : 은평로 외 4개소

도로명	위 치	연 장 (m)	소요예산 (천원)	구매방법
은 평 로	은평로 198~은평로 210	210	19,500	조달구매
가 좌 로	응암오거리~가좌로 195	210	19,600	조달구매
마포대로 수 색 로	마포대로 163~공덕오거리 수색로 276~수색로 205	850	79,200	특정제품
한강대로	서울역 14번 출구 ~ 숙대입구 교차로사천교	880	81,700	특정제품
계		2,150	200,000

○ 기    간 : 2021. 8. ~ 2021. 12.

○ 내    용 : 노후 무단횡단 금지시설 교체 (L=2,150m)

○ 소요예산 : 200,000천원

□ 2021년 무단횡단 금지시설 설치 사업

○ 사 업 명 : 교통사망사고 줄이기 사업

- 위    치 : 증가로 외 1개소

도로명	위 치	연 장 (m)	소요예산 (천원)	구매방법
증 가 로	북가좌사거리~증산2교	250	28,000	조달구매
백 범 로	백범로 202~백범로 212	140	16,000	조달구매
계		264	44,000

- 기    간 : 2021. 8. ~ 2021. 12.

- 내    용 : 무단횡단 금지시설 설치 (L=264m)

- 소요예산 : 44,000천원

- 특이사항

ㆍ백범로 규제심의 미완료 (규제심의 결과에 따라 재검토)

○ 사 업 명 : 시민참여 예산 사업

- 위    치 : 서오릉로 외 4개소

도로명	위 치	연 장 (m)	소요예산 (천원)	구매방법
서오릉로	연서로 143~서오릉로 280	1,380	138,000	2단계
칠 패 로	상공회의소~염천교 앞	131	13,000	조달구매
소 공 로	덕수궁앞~프라자호텔 앞 녹지대	56	6,000
증 산 로	증산로 475~증산로 463 증산로 429~증산로 363	830 (200)	83,000 (20,000)	조달구매
월드컵북로	월드컵북로 137~ 양화로 133	865	87,000	특정제품
계		3,262	327,000

- 기    간 : 2021. 8. ~ 2021. 12.

- 내    용 : 무단횡단 금지시설 설치 (L=3,262m)

- 소요예산 : 327,000천원

- 특이사항

ㆍ서오릉로 규제 재심의중 (규제심의 결과에 따라 재검토)

ㆍ증산로 429~ 증산로 363간 차로폭이 나오지 않아 추후 제검토 필요증산로 475~증산로 463간 설치가능(당초:특정제품, 변경:조달구매)

○ 사 업 명 : 중앙버스전용차로 흐름개선 사업

- 위    치 : 통일로 외 2개소

도로명	위 치	연 장 (m)	소요예산 (천원)	구매방법
통 일 로	통일로 415 ~ 통일로 427-1	200	20,000	조달구매
수 색 로	사천교 ~ 성공타워	380	38,000	조달구매
한강대로	남영동 128~한강대로 198	600	60,000	특정제품
계		1,180	118,000

- 기    간 : 2021. 8. ~ 2021. 12.

- 내    용 : 무단횡단 금지시설 설치 (L=1,180m)

- 소요예산 : 118,000천원

- 특이사항

ㆍ통일로 규제 재심의중

ㆍ한강대로 규제심의 미완료

ㆍ규제심의 결과에 따라 재검토

□ 구매방법 (2단계 1개소, 특정업체 5개소, 조달구매 9개소)

구매방법	위 치	소요예산 (천원)	비 고
2단계 경쟁	연서로 148 ~ 서오릉로 280	138,000	규제 재심의중
특정업체	마포대로 163 ~ 공덕오거리 수색로 276 ~ 수색로 205	79,200
	서울역 14번출구 ~ 숙대입구 교차로	81,700
	증산로 429 ~ 증산로 363	63,000	규제재심의 필요
	월드컵북로 137 ~ 양화로 133	87,000
	남영동 128 ~ 한강대로 198	60,000	규제심의 미완료
조달구매	은평로 198 ~ 은평로 210	19,500
	응암오거리 ~ 가좌로 195	19,600
	북가좌사거리 ~ 증산2교	28,000
	백범로 202 ~ 백범로 212	16,000	규제심의 미완료
	상공회의소 ~ 염천교 앞	13,000
	덕수궁앞 교차로 ~ 프라자호텔 앞 녹지대	6,000
	증산로 475 ~ 증산로 463	20,000
	사천교 ~ 성공타워	38,000
	통일로 415 ~ 통일로 427-1	20,000	규제 재심의중

□ 소요예산

○ 노후 무단횡단금지시설 교체 예산 (200백만원, 도로관리과)

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속시설물관리, 노후 포장도로 정비, 시설비

○ 무단횡단금지시설 설치사업 예산 (489백만원, 교통운영과)

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리강화, 교통사망줄이기, 시설비 (44백만원)

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리강화, 무단횡단 금지시설 설치, 시설비 (327백만원)

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리강화, 중앙버스전용차로 흐름개선, 시설비 (118백만원)

Ⅴ		조치계획

□ 구매방법 현황에의거 무단횡단금지시설물을 구매ㆍ설치

○ 2단계 경쟁 : 1억원 이상

○ 특정업체 선정심사위원회 심의 : 1억원 미만

- 공 사 수 반 : 1억 미만 ~5천만원 이상(부가가치세 제외)

- 공사 미수반 : 1억 미만 ~2천만원 이상(부가가치세 제외)

○ 조달구매 : 2단계 경쟁 및 특정업체 심의대상 외

□ 규제심의 미완료 및 재심의 대상 노선은 그 결과에 따라  재검토(구매방법, 구간변경 등)하여 사업시행 여부 결정.

□ 노면표시 재조정이 필요한 구간에 대하여는 “교통안전 (노면표시) 유지보수공사”에 작업지시하여 시행.

Ⅵ		향후계획

□ ‘21.08월~9월초 : 특정제품 심사위원회 개최 및 관급자재 구매

□ ’21.09월~11월 : 무단횡단금지시설 설치

□ ’21.12월        : 사업완료(준공)

별첨 1. 사업예산 재배정 공문 2부.

2. 위치도 및 현황사진 1부.  끝.