문서번호	치수과-15297
결재일자	2021.9.7.
공개여부	비공개
방침번호

주무관		하수계획팀장		치수과장		안전건설교통국장
김한성		김경원		민병기		09/07 최연우
협조
	재무과장		송경택
	계약팀장		이은술
	치수팀장		문철

★ ◉

「왕십리로 280 주변 하수관로 개량공사」

설계변경(정산) 검토보고

2021. 9.

성 동 구

(치수과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 ☑ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 ☑ ( 시비 재배정사업 ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

「왕십리로 280 주변 하수관로 개량공사」

설계변경(정산) 검토 보고

우리구에서 시행중인 『왕십리로 280 주변 하수관로 개량공사』의 건강보험료 등 제경비 정산 및 현장 여건에 따른 변경사항에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

▢ 사 업 명: 왕십리로 280 주변 하수관로 개량공사

▢ 사업기간: 2021. 3. 16. ~ 2021. 9. 17.

▢ 공사개요: 하수관로 개량 D1,000mm~D1,100mm, L=206m 등

▢ 도 급 자: 지금건설㈜ 대표 이봉구

▢ 도 급 비: 524,155,700원(시비)

Ⅱ		설계변경 내용

▢ 설계변경 사유

○ 공사현장실정보고 승인사항 반영

- 교통통제원 및 보행안전도우미 수량 추가 등[치수과-7650호(2021.5.3.)]

- 가로수 및 가로등 원상복구 관련 공정 추가 등[치수과-9025호(2021.5.25.)]

- 민원사항 검토 보고[치수과-9458호(2021.6.1.)]

- 하수관로 개량공사 공법 변경 등[치수과-10081호(2021.6.11.)]

- 지장물(소화전, 개인정화조 등) 이전설치 공정 추가 등[치수과-13216호(2021.7.30.)]

○ 건강, 연금 보험료 등 제경비 실비 정산

○ 기타 공사현장 여건을 반영한 공종별 시공물량 증·감

▢ 설계변경 내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총공사비	712,124,700	878,550,000	증 166,425,300
도 급 비	524,155,700	745,140,000	증 220,984,300
관급자재비	87,047,000	92,930,000	증 5,883,000
이 전 비	100,922,000	40,480,000	감 60,442,000

Ⅲ		조 치 계 획

○ 상기 내용과 같이 시공방법 및 물량 증·감 등에 대하여 첨부된 변경내역서와 같이 설계변경(정산)하고 준공처리코자 함.

○ 증액되는 공사비(167백만 원)는 아래 예산을 활용하여 집행코자 함

- 본 공사 이전비 및 낙찰차액: 68백만원

- 시비 집행잔액(낙찰차액 등): 99백만원

․고산자로 323 주변 하수관로 개량공사 집행잔액: 49백만원(당초 70백만원 → 49백만원)

․매봉길 2주변 하수관로 개량공사: 50백만원

붙임 1. 변경설계내역서 및 제비율 검증확인서 각 1부.

2. 계약심사 의견서 1부.

3. 실정보고서 및 관련 보고서 1부.

4. 건설사업관리용역사 설계변경 검토보고 1부.  끝.