“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	사회복지과-36013		주무관	장애인시설팀장		사회복지과장		복지생활국장
			김정남	신제욱		배경숙		전결 09/12 이호현
등록일자	2021.9.10.
결재일자	2021.9.12.
공개구분	부분공개(5)
			협조자

	공사장 안전사고 대비를 위한 - 장애인 스마트정류장 구축 공사감독 계획

사업내용 : 버스도착정보 안내시스템 구축(BIT설치) 사업위치 : 관내 무료셔틀버스 정류장 66개소 형태,소재 : 독립 지주형 정류장, LED전광판, 단면 표출 방식 공사기간 : 2021.9월~10월 추진내용 : 공사장 안전사고 방지를 위한 공사감독 철저 사업예산 : 602,380천원

2021.  9.

	강 남 구
(		사회복지과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 장애인 스마트정류장 구축 계획(사회복지과-18594호,2021.5.7.) • 구청장 요청사항<2021.9.3. 강남구재난안전대책회의> - 공사장 안전사고 대비 철저(청담동 공사장 가림막 붕괴 사고 관련)
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 장애인 스마트정류장 구축사업 추진 중 안전사고를 대비하기위한 공사감독을 실시하고자 함
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 근거 : 협상에 의한 계약체결기준 • 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 장애인, 노인, 임산부 및 그의 보호자 등
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( 0 ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( 0 ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( 0 ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( 0 ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 타 구 실태파악 결과 - 해당없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당없음

공사장 안전사고 대비를 위한 - 장애인 스마트정류장 구축 공사감독 계획

「장애인 스마트정류장 구축」 사업의 안전사고 대비 등을 위해 공사감독 계획을 수립하고 시행에 만전을 기하고자 함

1. 관련근거

지방자치단체를 당상자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조

지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 제5장(협상에 의한 계약체결기준)

장애인 스마트정류장 구축 계획(사회복지과-18594호,2021.5.7.)

구청장 요청사항<2021.9.3. 강남구재난안전대책회의>

❍ 공사장 안전사고 대비 철저(청담동 공사장 가림막 붕괴 사고 관련)

2. 사업개요

공사기간 : 2021년 9월 ~ 10월

공사내용 : 정류장 BIT설치

❍ 사업위치 : 관내 무료셔틀버스 정류장 66개소

❍ 동보장치(안심벨) 설치 및 운영시스템 구축

❍ 전기/ 통신/ 토목 공사 등 (원인자복구)

형태,소재 : 독립 지주형 정류장, LED전광판, 단면 표출 방식

계약형태 : 협상에 의한 계약

사업예산 : 602,380천원

추진일정

굴착신고 (서울시)	□	굴착신고 (경찰서)	□	굴착공사, 공사감독	□	준공, 준공검사	□	시범운영
2021.7월		2021.8월		2021.9월~10월		2021.10월		2021.11월

3. 세부추진계획

안전사고 대비 공사감독 추진

❍ 공사감독관 지정

- 정 : 도로관리과 굴착감리단

- 부 : 장애인시설팀장, 담당 주무관

❍ 매일 설치 작업 장소, 예정작업, 출력인원, 시공계획 등을 보고

- 작업일보 제출(굴착팀-감리)

- 설치 전, 설치 중, 설치 후 방문하여 공사현장 상황 점검

❍ 굴착시 준수여부 확인 철저

- 굴착토사는 현장에서의 즉시 반출 및 복구 후 인접 포장면에 부착된 토사는 물청소 실시로 제거

- 도로시설물인 측구, 보․차도경계블록(석), 가드레일, 가로등 및 가로수 등을 손상하지 않도록 주의

- 하수구가 메워지는 일이 없도록 가마니․모래주머니 등으로 보호 조치

- 비포장 구간은 추후 포장공사에 지장이 없도록 최소 1m 이상 깊이로 매설

- 공사 완료 후에는 주위를 청결히 정비

❍ 교통 통제시 준수여부 확인 철저

- 자재하역시에만 도로 점용

- 보행도우미 배치 및 교통시설 설치

- 차량·보행자 안전 유도

- 지시 표시등, 교통 안내판, 신호수 배치, 안전펜스 및 라바콘 설치

연번	일정	정류장ID	정류장명	주소	도종	폭	연장 (m)	면적 (㎡)
1	09월08일	006	일원2동주민센터	개포동 12	보도(콘가)	1.2	2	2.4
2	09월08일	044	구룡초교사거리	개포동 649	보도(콘가)	1.2	6	7.2
3	09월08일	063	구룡마을입구	개포동 647-11	보도(아스콘)	1.2	2	2.4
4	09월09일	043	개포주공1단지	개포동 659	보도(콘가)	1.2	5	6
5	09월09일	061	구룡초교사거리	개포동 654-1	보도(콘가)	1.2	10	12
6	09월09일	062	개포래미안포레스트	개포동 656-1	보도(콘가)	1.2	3	3.6
7	09월10일	033	세곡동사거리	세곡동 115-13	보도(콘가)	1.2	5	6
8	09월10일	034	신동아파밀리에	세곡동 510-1	보도(콘가)	1.2	2	2.4
9	09월10일	035	세곡커뮤니티센터	세곡동 523	보도(콘가)	1.2	2	2.4
10	09월11일	028	일원1동주민센터	일원동 643-5	보도(콘가)	1.2	2	2.4
11	09월11일	036	은곡마을	세곡동 580	보도(콘가)	1.2	2	2.4
12	09월11일	037	세곡푸르지오	세곡동 543	보도(콘가)	1.2	5	6
13	09월13일	004	일원1동주민센터	일원동 712-3	보도(콘가)	1.2	5	6
14	09월13일	005	대청역	일원동 700-9	보도(콘가)	1.2	2	2.4
15	09월13일	026	하상장애인복지관	일원동 700-3	보도(콘가)	1.2	3	3.6
16	09월14일	027	대청역	일원동 700-4	보도(콘가)	1.2	5	6
17	09월14일	038	LH3단지(세곡중)	자곡동 627	보도(콘가)	1.2	5	6
18	09월14일	039	래미안강남힐즈	자곡동 639	보도(콘가)	1.2	5	6
19	09월15일	040	못골마을	자곡동 650	보도(콘가)	1.2	7	8.4
20	09월15일	031	래미안포레	자곡동 661	보도(콘가)	1.2	10	12
21	09월15일	032	세곡동주민센터	율현동 283	보도(콘가)	1.2	10	12
22	09월16일	066	래미안포레(힐스테이트에코)	자곡동 658	보도(콘가)	1.2	5	6
23	09월16일	001	미미위강남세움센터	수서동 224-6	보도(콘가)	1.2	2	2.4
24	09월16일	003	수서역(세종고)	수서동 707-4	보도(콘가)	1.2	6	7.2
25	09월17일	030	수서역 6번출구	수서동 443-9	보도(콘가)	1.2	9	10.8
26	09월17일	002	수서동주민센터	수서동 716	보도(콘가)	1.2	8	9.6
27	09월17일	041	태화기독교사회복지관	수서동 741	보도(콘가)	1.2	3	3.6
28	09월23일	065	태화기독교사회복지관	수서동 800	보도(콘가)	1.2	5	6
29	09월23일	007	대치역(은마아파트)	대치동 317-1	보도(콘가)	1.2	5	6
30	09월23일	009	삼성역 2번출구	대치동 995-8	보도(콘가)	1.2	3	3.6
31	09월24일	024	푸드마켓 대치점	대치동 912-24	보도(콘가)	1.2	2	2.4
32	09월24일	010	봉은사	삼성동 77-23	보도(콘가)	1.2	2	2.4
33	09월24일	021	강남시니어플라자	삼성동 112-2	보도(콘가)	1.2	15	18
34	09월25일	060	강남세브란스병원	도곡동 540	보도(콘가)	1.2	5	6
35	09월25일	045	강남세브란스병원	역삼동 785-13	보도(콘가)	1.2	4	4.8
36	09월25일	046	역삼노인복지센터	역삼동 776-14	보도(콘가)	1.2	5	6
37	09월27일	048	충현복지관	역삼동 668-1	보도(콘가)	1.2	3	3.6
38	09월27일	012	강남구청	청담동 45	보도(콘가)	1.2	4	4.8
39	09월27일	017	압구정동주민센터	신사동 639-2	보도(콘가)	1.2	3	3.6
40	09월28일	054	강남구청	삼성동 16-1	보도(콘가)	1.2	5	6
41	09월28일	011	강남노인복지관	삼성동 66	보도(콘가)	1.2	5	6
42	09월28일	053	강남구청역(강남구보건소)	삼성동 2	보도(콘가)	1.2	5	6
43	09월29일	055	강남노인복지관	삼성동 21	보도(콘가)	1.2	7	8.4
44	09월29일	049	언주역(삼정호텔)	논현동 206-1	보도(콘가)	1.2	3	3.6
45	09월29일	050	신논현역	논현동 201-16	보도(콘가)	1.2	5	6
46	10월05일	056	선정릉역 강남시니어플라자	논현동 278-19	보도(콘가)	1.2	2	2.4
47	10월05일	014	학동역	논현동 86-1	보도(콘가)	1.2	5	6
48	10월05일	051	논현노인복지관	논현동 125-1	보도(콘가)	1.2	5	6
49	10월06일	052	학동역	논현동 208	보도(콘가)	1.2	3	3.6
50	10월06일	015	강남을지병원	논현동 59	보도(콘가)	1.2	2	2.4
51	10월06일	020	강남구보건소	논현동 242-30	보도(콘가)	1.2	5	6
52	10월07일	013	강남구청역	논현동 118-16	보도(판석)	1.2	6	7.2
53	10월07일	016	압구정역	신사동 610-5	보도(판석)	1.2	2	2.4
54	10월07일	018	압구정로데오역	신사동 664	보도(판석)	1.2	5	6
55	10월08일	019	압구정노인복지센터	신사동 665-6	보도(판석)	1.2	2	2.4
56	10월08일	025	대치역 6번출구	대치동 509-1	보도(판석)	1.2	2	2.4
57	10월08일	042	일원역(삼성병원)	일원동 717	보도(판석)	1.2	5	6
58	10월09일	064	일원역(삼성병원)	일원동 735	보도(판석)	1.2	2	2.4
59	10월09일	008	푸드마켓 대치점	대치동 962-1	보도(판석)	1.2	5	6
60	10월09일	022	봉은사	삼성동 111-86	보도(판석)	1.2	2	2.4
61	10월12일	023	삼성역 3번출구	대치동 947-3	보도(판석)	1.2	10	12
62	10월12일	047	역삼역	역삼동 679-1	보도(판석)	1.2	2	2.4
63	10월12일	058	충현복지관	역삼동 628-14	보도(판석)	1.2	2	2.4
64	10월13일	059	미미위역삼발달장애인평생교육센터	역삼동 642-6	보도(판석)	1.2	2	2.4
65	10월13일	029	수서역 5번출구	수서동 719	보도(판석)	1.2	2	2.4
66	10월13일	057	차병원	역삼동 606-28	보도(콘가)	1.2	5	6

정류장별 공사 일정

행정사항

❍ 소요예산 : 없음

❍ 공사장 안전사고 예방 철저 : *********

❍ 공사현장 관리감독 철저 : 도로관리과, 사회복지과

*