문서번호	시설관리과-17737
결재일자	2021. 9. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장
오영진	이승영	09/15 고신석
협 조

현장실정보고서 접수에따른 검토보고

(사토장 변경)

2021. 9.

남부수도사업소

(시설관리과)

현장실정보고서 접수에 따른 검토보고

(사토장 변경)

『2020년-2차 동작, 영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사』의 감리업체인 ********으로부터 현장실정보고서가 제출됨에  따라 검토 후 결과를 보고드림

□ 공사현황

○ 공 사 명: 2020년-2차 동작, 영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사

○ 공사위치: 동작, 영등포구 관내

○ 시공업체:*************

○ 감리업체:*****************

○ 공사개요 : 제수변정비 100개소, 변실정비 75개소

□ 실정보고 내용

○ 현황 및 문제점

□ 수도권매립지 토사반입불가하여 발생토처리 불가하여 발생토처리가 가능한 대체 사토장 선정 처리가 요구됨.

○ 대책 및 보고자 의견

□ 공사에의해 발생되는 토사에 대한 사토장 선정

∙ *****************************

□ 사토장 변경에 따른 운반거리 변경

∙ 변경거리 : **************************

□ 사토장 운영조건(개발행위허가공문, 토사반입동의)

□ 계약단가 : 기존단가 적용

□ 조치의견

○ 위 현장실정 내용과 같이 수도권매립지에서 토사반입 불가로 개발행위허가 및 토사반입 동의를 취득한 *********************************************************************************** 판단되며,

○ 공사장 안전관리 및 적법한 사토처리가 될 수 있도록 ****************에 회신하여 향후 지연처리 없이 철저한 감독업무에 임하도록 통보하고자 함.

붙 임 : 공사현장 실정보고서 관련공문 1부.  끝.