【별지 제7호서식】

설계변경 심사요청(잠실수중보 보수보강공사)

부분공개(5)

시 행	치수과-6108
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접수번호
접수일자

주무관		치수과장				결재
박지수		09/16 최연호
협 조

공 사 명	잠실수중보 보수보강공사	요청기관			한강사업본부 (치 수 과)
공사위치	서울특별시 광진구 자양동 307 주변(잠실대교 주변)
공사기간	2021.3.2.~2022.6.30.		입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)			-
계약금액 (최초계약 금액)	************************************
예산내역	세부 사업명			예산과목		예산액(천원)
	치수및하천관리,하천복원및정비, 국가하천유지보수,시설비(국비)			시설비		***********
공사개요	세굴방지공 설치 4,244㎡, 콘크리트 단면복구 3,839㎡ 외
설 계 자	****************************************************** *****************************************
발 주 자	․담 당 자 : 박지수 (전화번호 : 3780-0696)
◦ 설계변경 사유(실정보고 3건 참조) - 점검시설 및 노후 안전난간 설치 계획 변경 - 남단 옹벽 보강계획 변경 - 설계도서 누락‧오류 사항 정정 ‣ 고소작업차, 교통안전대책 등 누락사항 반영 ‣ 오탁방지망 규격 변경 ‣ 수중균열보수 공법 변경 ‣ 콘크리트단면보수 시공방법 변경 및 물량 정정
◦ 첨부서류 1. 설계변경 내역서 각1부. 2. 실정보고 검토보고서 각 1부.

	서울특별시한강사업본부장