1.부대토목시방서

목        차

제 1 장  총   칙	1

1. 공사일반	1

2. 관리 및 행정	3

3. 자재관리	9

4. 품질관리	10

5. 안전 및 보건관리	12

6. 환경관리	16

7. 시공관리	18

제 2 장  토 공 사	22

1. 준비공	22

2. 구조물, 지장물의 철거 및 이설	22

3. 땅깍기	24

4. 흙쌓기	25

5. 다 짐	27

6. 터파기 및 되메우기	29

7. 토공의 마무리	31

제 3 장  하 수 도 공 사	33

1. 적용기준	33

2. 하 수 관	33

3. 토공	33

4. 관 부 설	34

5. PE 이중벽관 및 연결자재	36

6. 기타공사	39

제 4 장  철근콘크리트공사	48

1. 일반사항	48

2. 재 료	49

3. 콘크리트 시공	49

4. 철근	51

5. 거푸집 및 동바리	56

6. 품질관리	58

총   칙

공사일반

일반사항

적용

적용범위

본 시방서는 북한산 생태공원 내 주민공동시설 신축공사.

본 시방서 중 당해 공사와 관계없는 사항은 이를 적용하지 아니한다.

본 시방서 명시사항 이외의 기타사항은 표준시방서를 적용한다.

적용순서

모든 설계서는 상호 일관성 있게 구성되어야 하나, 제출된 설계서의 내용이 서로 상이한 경우 아래와 같은 우선순위에 따라 평가되어야 한다.

현장설명서 및 질의응답서

공사시방서 및 설계도면

내역서

본 시방서의 총칙은 각 분야별 시방에 적용하되, 본 시방서에서 총칙과 총칙 이외의 시방 내용간에 상호모순이 있을 경우에는 총칙 이외의 시방에 명시된 내용을 우선 적용한다.

용어의 정의

설계서

이 시방서에서“설계서”라 함은“공사계약일반조건 제2조 제4호”의“설계서”를 말한다.

감독관

이 시방서에서“감독관”이라 함은“공사계약일반조건 제2조 제3호”의“공사감독관”을 말한다.

수급인

이 시방서에서“수급인”이라 함은“공사계약일반조건 제2조 제2호”의“계약상대자”를말한다.

현장대리인

이 시방서에서“현장대리인”이라 함은“공사계약특수조건 제2조 제7호”의“공사현장대리인”을 말한다.

승인

이 시방서에서“승인”이라 함은 수급인으로부터 제출 등의 방법으로 요청받은 어떤 사항에 대하여 감독관이 서면으로 동의한 것을 말한다.

지시

이 시방서에서“지시”라 함은 감독관이 수급인에 대하여 필요한 사항을 구두 또는 서면으로 알려주고 실시토록 하는 것을 말한다.

검사

이 시방서에서 “검사”라 함은 공사계약문서에 나타난 시공 등의 단계 및 납품된 공사재료에 대해서 완성품의 품질을 확보하기 위해 수급인의 확인검사에 근거하여 검사자가 기성부분 또는 완성품의 품질, 규격, 수량 등을 확인하는 것을 말한다.

확인

이 시방서에서 “확인”이라 함은 공사를 공사계약문서대로 실시하고 있는지의 여부 또는 지시, 조정, 승인, 검사 이후 실행한 결과에 대하여 원래의 의도와 규정대로 시행되었는지를 점검하는 것을 말한다.

용어의 해석

이 시방서에 사용된 용어의 해석은 아래 우선순위에 따라서, 그에 명시된 용어정의 또는 사용된 의미에 준하여 해석한다.

계약문서(이 시방서를 포함한다)

건설기술관리법, 동시행령 및 동시행규칙

기타 건설관련법규

공사 종류별 용어사전

국어사전

법령 우선 준수

수급인은 본 시방서를 포함한 설계서의 내용이 대한민국 관련법규의 규정과 상호 모순될 경우(건설공사 중에 관련법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함한다)에는 대한민국 관련법규의 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

수급인 책무

현장확인 및 설계서의 검토

수급인은 공사착공과 동시에 설계서의 내용과 현장을 확인하여 이상 유무를 즉시 발주자에게 보고하여야 한다. 특히 주요 구조물의 공법, 구조해석, 철근배근 및 수량 등을 검토하여 설계상의 누락, 오류, 구조적 안전성 등의 이상 유무를 확인하여 그 결과를 발주자에게 보고하여야 한다.

수급인은 설계서 검토결과 하자 발생이 우려되는 경우가 있을 때에는 검토의견서를 발주자에게 제출하고 발주자의 해석 또는 지시를 받은 후에 공사를 시행하여야 한다.

법령의 준수

수급인은 공사와 관계되는 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규 등을 항상 숙지하고, 이를 준수하여야 한다.

수급인은 자신이나 그의 고용인이 상기의 법률, 시행령과 시행규칙, 훈령 및 예규를 위반함으로써 민원이나 책임문제가 야기되었을 경우에는 그에 대한 책임을 진다.

관리 및 행정

공사관리 및 조정

일반사항

현장대리인 등의 현장상주

수급인이 해당공사를 위하여 지정․ 배치한 현장대리인, 현장요원, 안전관리자 등은 현장에 상주하여야 한다. 다만, 당해 공사의 전부 또는 일부가 발주자측의 사유로 인하여 착공이 지연되는 기간 동안의 현장상주 여부 및 그 인원수 등에 대하여, 발주자의 승인을 받았을 경우에는 그러하지 아니하다.

공사수행

수급인은 계약문서에 위배됨이 없이 공사를 이행하여야 하며, 이에 따른 이행과정에서 계약문서에 위배된 사항에 대한 발주자의 시정요구 또는 이행 촉구지시가 있을 때에는 즉시 이에 따라야 한다. 또한, 계약문서에 정해진 것에 대하여는 발주자의 승인, 검사 또는 확인 등을 받아야 한다.

수급인은 설계서에 명시되지 아니한 사항 중에 마무리, 맞춤 등의 관계로 구조상 또는 외관상 당연히 시공을 요하는 부분은 발주자에게 통보하여 승인을 받고 이행하여야 하며, 발주자는 추가 투입에 대하여 확인하여야 한다. 설계변경이 필요한 경우에는 사전에 감독관의 승인을 받아 설계변경 할 수 있다.

발주자는 관련법령 및 계약문서에 의하여 자재 등의 품질 및 시공이 적정하지 못하다고 인정되는 경우에는 재시공 등의 지시를 할 수 있으며, 수급인은 이에 따라야 한다.

수급인은 건설공사와 관련하여 정부 또는 발주자가 시행하는 감사, 검사 수감 및 이에 따른 시정 지시를 즉시 이행하여야 하며, 발주자의 특별한 과실이 없는 한 이를 이유로 공사기한 연기 또는 추가 공사비를 요구할 수 없다.

건설 목적물인 모든 구조물과 시설물은 사용자, 특히 아동 또는 노약자가 사용하거나 활동 중에 찔림, 긁힘, 눌림, 찢김, 베임, 꺾임, 미끄러짐, 떨어짐 및 끼임 등의 위해가 발생되지 않도록 시공되어야 한다.

책임 한계

수급인은 현장대리인 등 수급인이 당해 공사를 위하여 임명ㆍ지정ㆍ고용한 자 및 수급인과 납품계약 또는 하도급계약을 체결한 자의 해당 공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 책임을 진다.

수급인이 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 수급인이 손해배상 등 책임을 진다.

응급조치

수급인은 시공기간 중 재해방지를 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 사전에 감독관의 의견을 들어 필요한 조치를 취하여야 한다.

동절기 공사

동절기 공사 중 단기간에는 적절한 보양조치를 실시하여 시공품질확보를 하여야 한다.

하도급

하수급인의 선정

수급인이 공사일부를 하도급 하는 경우에는 공사를 시행하기에 적합한 자격 및 기술 및 능력을 가진 자를 하수급인으로 선정하여야 한다.

하도급 계약체결

수급인은 해당 공사 착수예정일 7일 전까지 하도급 계약을 체결하여야 한다.

하수급인에의 주지

수급인은 발주자의 지시, 승인, 협의로 결정된 사항 및 안전의 확보에 관련한 사항에 대하여 하수급인에게 철저히 주지시켜야 한다.

지중 발굴물 등

수급인은 당해 건설공사장 안의 지상 및 지하에 있는 물건, 시설물, 구조물, 문화재 등을 발주자의 승인 없이 임의로 철거, 운반, 처분 또는 사용하여서는 안 된다.

공사협의 및 조정

수급인은 당해 공사와 관련된 다른 공사의 수급인들과 상호간의 마찰을 방지하고, 전체 공사가 계획대로 완성될 수 있도록 관련공사와의 접속부위의 적합성, 공사한계, 시공순서, 공사착수시기, 공사 진행속도, 공사 준비, 공사 시설물 보호 및 가설 시설 등의 적합성에 대하여 모든 공사의 관련자들과 면밀히 협의ㆍ조정하여 공사전체의 진행에 지장이 없도록 협력하고 최선의 방안을 도출한 후에 공사를 시행하여야 한다.

종합공정관리 협조

수급인은 착공부터 준공까지 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 조경공사는 물론 급배수, 도시가스, 전기 통신관로 등 관련공사 전체의 원활한 추진을 위하여 감독관이 행하는 종합공정관리계획의 수립 및 운영에 협조하여야 한다.

공무행정 및 제출물

일반사항

비치 및 제출

수급인은 공사의 진행을 위하여 공무행정에 관한 서류를 사실과 그 증빙자료에 의거하여 작성하여야 한다.

수급인은 공무행정서류 중 상시 비치를 요하는 서류는 건설공사 중에 발주자가 수시로 열람할 수 있도록 현장사무소 또는 현장시험실에 항상 비치하여야 한다.

수급인은 공무행정서류 중 제출을 요하는 서류를 지정된 제출시기에 지정된 부수를 발주자에게 제출하여야 한다.

제출절차 등

작성 및 확인

수급인이 제출하는 각 제출물은 설계서의 내용 및 현장조건에 대하여 검토한 결과를 반영하여 작성하여야 하며, 또한 타수급인, 자재납품업자(지급자재납품자를 포함한다), 작업자, 관련기관과 협의, 조정한 내용을 포함하여 작성하여야 한다.

수급인은 각 제출물에 대하여 계약문서와의 일치여부를 확인한 후, 제출물에 서명 또는 날인하여 감독관에게 제출하여야 한다.

규격 등

서류의 규격은 정부 또는 발주자의 지정양식을 제외하고는 수급인이 내용의 성격에 따라 감독관과 협의, 작성하여 제출한다.

제출서류는 건별로 제출일자 및 각 면마다 일련번호를 명기하며, 비치서류는 건별로 작성일자 및 각 면마다 일련번호를 명기한다.

내용 변경

수급인은 모든 제출물에 대하여 그것의 주요한 내용의 변경을 수반하는 사유가 발생되었을 경우에는 지체없이 관련되는 제출물을 재작성하여 제출하여야 한다.

공사관련자에의 전파교육

수급인은 감독관이 확인한 제출물에 대하여 필요한 사항은 작업자 등 공사관련자에게 전파교육을 시행하여 공사 시행상의 오류를 방지하여야 한다.

착공서류

착공신고서 제출

수급인은 공사에 관한 계약을 체결하였을 때에는 계약체결일로부터 7일 이내에 착공하고 착공신고서를 제출하여야 한다. 다만, 발주자가 착공시기를 별도로 지정하는 경우에는 이에 따라야 한다.

첨부서류

수급인은 공사착공 시 다음의 서류를 제출하여야 하며, 제출서류부수 및 형식은 발주자와 협의하여야 한다.

공사 중 단위공정별 세부공사설계서 및 시공계획서와 시험계획서 등 승인을 요하는 서류

착공 전 현장사진

현장기술자 지정신고서(현장관리조직, 현장대리인, 안전관리자, 품질관리시험요원)

건설공사 공정예정표

품질보증계획서 또는 품질시험계획

공사도급 계약서 사본 및 산출내역서

안전관리계획서

현장기술자 경력사항 확인서 및 자격증 사본

노무동원 및 장비투입 계획서

가설공사 계획서

각종 공사용 표지판의 위치계획

공사예정공정표

PERT/CPM 공정표

수급인은 공사예정공정표를 PERT/CPM 방식으로 작성하여 제출하여야 한다.

수급인이 제출하는 공사예정공정표에는 다음 사항이 명시되거나 첨부되어야 한다.

공종별 및 공종 내 주요공정단계별(Activity) 착수시점, 완료시점

공종별 및 공종 내 주요공정단계별 선･후･동시시행 등의 연관관계

주공정선(Critical Path) 또는 주공정 공사의 목록

기타 이 시방서 각 절에 명시되어 있는 사항

시공계획서

수급인은 단위공종별 공사실시에 앞서 감독관의 요구에 따라 공사시행의 순서, 방법, 주요재료의 반입계획, 주요 기계설비의 반입과 배치 및 사용계획, 노무계획, 안전대책(유해위험 방지계획) 및 환경대책 등에 대하여 상세한 실시계획을 작성한 시공계획서를 감독관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

시공상세도면

제출 및 승인

수급인(하수급인, 자재나 제품제조자를 포함한다)은 설계서 및 현장조건과의 적합성 여부를 확인하여 공사 수행상의 잘못 또는 부분공사의 누락을 예방하고, 타공사 수급인, 지급자재 납품자, 관련기관 및 주변에 거주하는 주민과의 마찰로 인한 공사의 지연을 예방하기 위하여 시공상세도면을 작성하여야 한다.

작성방법

시공상세도면은 설계서(공사시방서, 설계도면, 현장설명서 등)의 요구사항을 종합하여 작성하여야 하며, 부위별 재료명과 시공 또는 설치 방법 및 마감상태를 명확히 표기하여야 하고, 정확한 치수, 축척, 도면제목, 관련 도면번호 등의 식별정보를 명시하여야 한다.

공사 사진

비치 및 제출

수급인은 공사시공 중 매몰 또는 은폐되어 나타나지 않는 부분 또는 준공 후 해체되는 가설물 등에 대하여 수시로 부분 또는 전경을 분명히 나타내는 천연색 사진을 상시 현장에 비치하여야 한다.

촬영방법

수급인은 공사시공 중 매몰 또는 은폐되는 주요부위에 대해서 기술적 판단자료로 활용할수 있도록 시공상태가 분명히 나타나게 주요부위의 상세 및 주변을 포함한 전경을 촬영 하여야 한다.

품질시험ㆍ검사 및 자재 관련서류

자재 선정검토 요청서

공사용 자재(지급자재를 제외한다) 선정을 위하여 제출하며, 이 요청서에는 해당제품에 대한“제품자료”를 첨부하여야 한다.

제출시기 및 부수

자재의 사용 또는 설치 전까지 2부를 제출해야 한다. 감독관의 승인기간은 접수받은 날로 즉시 검토하여 공사에 지장이 없도록 한다. 다만, 건설기술관리법 시행규칙 별표“건설공사 품질시험기준에 명시된 자재일 경우에는 그 자재의 시험ㆍ검사에 소요되는 기간을 추가로 감안하여 제출하여야 한다.

제품자료

자재 개요(모델명, 제조자명, 연락처)

당해 자재가 설계서에 명시한 기준 등에 적합한 품질임을 나타내는 다음과 같은 증빙서류중 하나

품질검사전문기관이 발급한 시험성적서

산업표준화법에 의한 한국산업규격표시품임을 나타내는 서류

주택건설촉진법 등 관계법령에 의하여 품질검사를 받았거나 품질을 인증 받은 자재임을 나타내는 서류라. 위 가.항 내지 다.항에 해당하지 않는 자재는 자재ㆍ제품 제조자가 작성한 품질관련 기술자료

자재 제조자의 시공 또는 설치시방서

설계서 및 현장여건이 제품설치 등에 적합함을 나타내는 서류. 적합하지 않을 경우는 자재의 설치 등을 위하여 필요한 설계서 및 현장여건의 조정 요구사항

기타 이 시방서 각 절에 명시 되어 있는 사항

증빙서류가 사본일 경우는 현장대리인의 원본대조필 서명･;날인이 있어야 한다.

품질시험ㆍ검사대장

수급인은 공사용 자재(지급자재를 제외한다)에 대한 품질시험ㆍ검사 결과에 대하여 시험사 및 현장대리인이 날인하고, 감독관의 확인을 받아 상시 비치하여야 한다.

품질시험･;검사성과 총괄표

기성검사원, 준공검사원에 첨부하여 제출하고, 예비준공검사 신청 시 제출한다.

주요자재 검수부

공사용 주요자재(지급자재를 제외한다) 반입시마다 승인된 제출자료 및 견본과 일치하는지 여부를 확인한 후, 품질시험․검사를 실시하고, 그 결과를 품목별로 종합기록하여 비치한다.

품질시험ㆍ검사 불합격자재 조치표

수급인은 불합격되어 장외 반출된 자재에 대하여는 불합격자재 조치표를 작성하여 비치하여야 한다.

안전관리서류

안전일지

수급인이 자체관리하며, 안전점검, 안전진단, 건설재해전문기관의 지도, 안전검사, 안전보건교육 등에 관한 사항을 기록하여 상시 비치하여야 한다.

안전점검표

수급인은 안전점검표에 의거하여 안전점검을 시행하고, 그 결과를 감독관이 확인할 수 있도록 상시 비치하여야 한다.

정기안전점검 결과

수급인이 안전전문기관에 의뢰하여 정기안전점검을 시행하였을 경우에는 점검결과 사본을 발주자에게 제출하여야 한다.

자재관리

일반사항

적용기준

사용자재

수급인은 공사에 사용하는 자재 중에서 이 시방서를 포함한 설계서에 품질기준이 명시되어 있는 품목은 그 품질기준에 적합한 신품(가설시설물용 자재를 제외한다)을 사용하여야한다. 다만, 해당 설계서에 품질기준이 명시되어 있지 않은 품목은 아래 기준에 따라 적합한 자재를 사용한다.

다음 각호의 1에 적합한 자재(이하 이 시방서에서“한국산업규격에 적합한 제품 등”이라한다)를 사용한다.

“산업표준화법”에 의한 한국산업규격 표시품(이하 "KS 표시품"이라 한다)으로서“환경기술개발 및 지원에 관한 법률”에 의한 환경표시품ㆍ자원재활용촉진에 관한 법률에 의한 GR마크(우수재활용제품)

KS 표시품

“건설기술관리법”에 의한 품질검사전문기관 또는 공인시험기관에서“산업표준화법”에 의한 한국산업규격에 따라 품질시험을 실시하여 동등 이상의 성능이 있다고 확인된 것 위 (1)항에 적합한 자재가 없을 경우에는 다른 것과 균형이 유지되는 것으로써 품질 및 성능이 우수한 시중제품으로 사용하여야 한다.

개정된 한국산업규격의 적용은 해당 단위공종의 계약일을 기준으로 한다.

사용제한

품질시험을 시행한 결과 불합격률이 높다고 인정되는 생산업체의 자재에 대하여 감독관은 수급인에 사용제한을 지시할 수 있으며, 수급인은 이에 따라야 한다.

건축물에 사용되는 구조재, 마감자재, 설비자재 등의 모든 자재는 석면 등의 인체에 유해한 물질이 포함된 자재를 사용하지 않아야 한다.

자재 선정 및 사용

수급인은 공사에 사용할 예정인 자재(지급자재를 제외한다)에 대하여“자재 선정검토 요청서”를 감독관에게 제출한다.

단일규격자재 사용

수급인은 하자발생시의 교체 및 유지관리의 용이성을 감안하여 단일 제조업체의 단일규격의 자재를 사용하여야 한다.

친환경 인증 자재 사용

수급인은 공사에 사용하는 자재 중 실내에 사용하는 자재는 친환경인증을 받은 제품을 사용하여야 한다.

자재반입

수급인은 공사에 사용할 예정인 자재는 당해 공사의 진행에 지장이 없도록 공사예정표상의 사용예정일 이전에 현장에 반입하여야 한다.

자재의 보관, 운반, 취급

품질변화 방지조치

반입자재는 그 품질과 공사의 적합성이 보장되도록 보관하여야 한다. 수급인은 자재를 보관하거나 반출할 때는 자재를 손상하지 않도록 하여야 하며, 이물질이 혼입되거나 자재가 섞이지 않는 방법과 장비를 사용하여야 한다.

자재는 변질, 손상, 오염, 뒤틀림, 변색 등 품질에 일체의 변화가 생기지 않도록 보관, 운반, 취급하여야 한다.

화기위험자재의 분리보관

수급인은 화기위험이 있는 자재를 다른 자재와 분리하여 보관하고 화재 예방대책을 수립하여 취급하여야 한다.

품질관리

일반사항

적용범위

수급인은 건설공사의 시공 및 공사에 사용하는 자재에 대한 품질관리는 이 절에서 정하는 바에 따라 성실하게 수행하여야 한다.

품질관리계획

계획수립 및 제출

수급인은 건설공사의 품질확보를 위하여“건설기술관리법”의 품질보증계획 또는“건설기술관리법시행령”의 품질시험계획을 수립하고, 발주자에게 제출하여 확인을 득하여야 하고, 이에 따라 품질시험 및 검사를 실시하여야 한다.

공사는 수급인이 제출한 품질보증계획 또는 품질시험계획에 대한 내용을 검토하여 보완하여야 할 사항이 있는 경우 수급인에게 이를 보완하도록 요구할 수 있으며, 수급인은 이에따라야 한다.

계획이행 확인

수급인은 품질보증계획 또는 품질시험계획에 따라 건설공사의 품질관리를 이행하여야 하며, 발주자는 시공 및 사용재료에 대한 품질관리업무의 적정성을 확인 할 수 있다. 이 경우 수급인은 품질관리 적정성 확인에 입회하여야 한다.

발주자는 품질관리 적정성 확인 결과 시정이 필요하다고 인정하는 경우에는 수급인에게 이의 시정을 요구할 수 있으며, 시정을 요구받은 수급인은 지체없이 이를 시정한 후 그 결과를 발주자에게 통보하여야 한다.

품질시험ㆍ검사

품질시험기준

수급인은 건설기술관리법 및 동법 시행규칙에 의거하여 품질시험 및 검사를 실시하여야 한다.

구조물의 안전에 중요한 영향을 미치는 시험종목의 품질시험ㆍ검사를 실시할 때에는 감독관 입회하에 품질시험 검사를 시행 하여야 한다.

시험장소

품질시험 중 건설공사현장에서 실시함이 적절한 시험은 현장시험을 실시하여야 한다.

현장시험실에서 시행할 수 없는 자재 품질시험은 품질검사전문기관(국ㆍ공립시험기관 또는국토해양부장관이 지정한 자)에 의뢰하여 시행한다.

현장시험실 또는 품질검사전문기관에 의뢰하여 시험하는 것이 부적합한 자재는 제조 공장에서 품질시험ㆍ검사를 시행할 수 있다.

결과기록

수급인은 품질시험ㆍ검사의 결과를 기재하여 감독관의 확인을 받고 비치하여야 한다.

수급인은 품질시험 또는 검사를 완료한 때에 품질시험ㆍ검사성과총괄표를 작성하고 보관하여야 한다.

불합격 자재의 장외반출 등

수급인은 품질시험 및 검사결과가 설계서의 기준에 부적합한 경우(이하 본 시방서에서“불합격”이라 한다)에는 시험작업일지에 그 내용을 기재한 후 즉시 감독관에게 보고하고, 불합격된 자재를 지체없이 장외로 반출하여야 한다.

현장시험실

인력ㆍ장비기준

“4.1.3 품질 시험ㆍ검사”의 품질 시험ㆍ검사를 실시하기 위하여 수급인은“건설기술관리법시행규칙”에 따라 자격요건을 갖춘 시험ㆍ검사요원을 현장에 적정 배치하고, 시험실의규모를 정하여야 하며, 시험ㆍ검사 장비를 설치하여야 한다. 다만, 현장여건을 고려하여품질시험ㆍ검사를 실시하지 아니하는 경우에는 발주자의 별도지시에 따른다.

비치서류

현장시험실에는 품질시험ㆍ검사 관련서류를 비치하고 상시 기록ㆍ유지하여야 한다.

품질시험ㆍ검사 의뢰

의뢰절차

수급인은 품질검사전문기관에 시험ㆍ검사를 의뢰하고자 할 때에 미리 발주자에게 통보하여 확인을 받아야 하며, 품질시험 및 검사를 의뢰하기 위하여 시료를 채취한 때에는 발주자의 봉인을 받아야 한다.

안전 및 보건관리

일반사항

적용범위

건설공사의 안전 및 보건관리에 대하여 적용한다.

안전 및 보건관리 일반

관리 및 보상의 책임

수급인은 공사장 내의 수급인측 직원 및 작업인원 등의 통제, 안전, 보안, 위생 및 인사사고에 대하여 안전대책을 수립ㆍ시행하고, 사고 발생시는 즉시 필요한 모든 조치를 취해야한다.

수급인은 공사의 수행으로 인하여 인접한 주민은 물론 통행인과 제 공작물, 농작물 및 가축ㆍ양어류에 피해를 주지 않도록 필요한 조치를 하여야 한다.

수급인은 해당 공사수행의 직간접적인 영향으로 인한 인접지역 지반 변화를 방지하기 위하여 계측관리 등의 필요한 조치를 실시하여야 한다.

안전관리계획

수급인은 건설기술관리법, 동 법 시행령, 동 법 시행규칙에 의하여 안전관리계획을 수립하여 발주자에게 제출하고, 이 계획에 따라 성실하게 안전관리를 수행하여야 한다.

안전관리계획은 건설기술관리법 시행령 제46조의 3에 따라 작성한다.

안전관리계획 제출시기 및 부수 : 공사착공 전 및 계획 변경 시, 각각 2부

발주자는 수급인이 제출한 안전관리계획에 보완하여야 할 사항이 있는 경우에는 보완을 요구할 수 있으며, 수급인은 이에 따라야 한다.

인허가

수급인은 공사장 내에서 사용하는 화기, 폭발물 등에 대해서 관할기관의 인허가를 얻어야한다.

출입자 통제 등

수급인은 공사안전 및 보안유지를 위하여 공사장에 관련자 외의 사람이 출입하거나 불필요한 사진을 촬영하는 것을 통제하여야 한다.

안전한 작업환경 조성

수급인은 안전한 작업환경을 조성하기 위하여 다음 사항을 준수하여야 한다.

작업개시 전 작업장 안전에 대한 교육 실시

안전관리자 순찰활동 강화

개인보호구 착용여부 확인

물체 투하 시 감시인 배치

취중인 자 또는 허약자 작업 금지

응급처치용 구급품의 확보

비상구(탈출구)에 물건적치 금지

현장 정리정돈

기록유지

수급인은 안전점검 및 검사에 관한 사항, 안전에 관한 행사 및 안전보건교육에 관한 사

항, 기타 안전보건에 관한 사항에 대한 이행결과와 조치내용을 안전일지에 기록하여 유지하여야 한다.

안전관리자 등

안전관리자

안전관리자의 직무 등은 아래와 같다.

안전교육계획의 수립 및 실시

공사장 순회점검 및 조치

해빙기, 우기, 태풍기 및 건조기를 대비한 안전점검 및 조치의 건의

기타“산업안전보건법시행령 제13조”에 규정한 직무 등

안전담당자는 다음의 직무를 수행하며, 필요시 즉시 작업을 중단하고 적절한 조치를 취하여야 한다.

유해ㆍ위험기구 및 설비에 대한 자체검사

안전시설 환경 등의 점검 및 조치

안전한 작업방법의 결정 및 지휘감독

복장 및 보호구의 착용상황 감시

작업개시 전에 작업내용, 순서, 방법 및 위험요인을 작업자에게 충분히 주지시키고 2인이상의 작업조 편성

안전보호조치 사전 강구 및 작업 중 자세 불안자의 자세 교정

기타“산업안전보건법시행령 제11조 제2항 및 제3항”에 규정한 업무

화재예방관리자

수급인은 화재예방관리자를 임명하여 소화기 안전핀 부착 및 내용물 충전과 소방사, 소방수 비치상태를 점검ㆍ유지하고 기타 화재예방에 관한 업무를 이행케 하여야 한다.

안전 조치

수급인은 공사 중 안전사고의 사전 예방을 위하여 다음의 사항을 준수하여야 한다.

가설공사

낙하물방지 안전망 설치

위험부위 안전표지판 및 안전난간, 접근방지책 설치

비계다리 등 가설통로에 안전난간 및 미끄럼방지 시설설치

고소에서 물체투하 시 감시인 배치

강우ㆍ강풍 시 외부 가설공사 금지

켄틸레버 부위 동바리 존치기간 준수

전기사고 예방대책

주요시설물 일반인 출입금지

전선의 절연 피복상태 확인 후 손상된 부분은 즉시 교체

전기용량 초과 사용금지

옥외분전함의 덮개 및 빗물받이 차양설치

가설전선 침수방지 및 차량통과부위 절연피복 보호조치

고압선 통과부위 위험표지판 및 경고 안내문 설치

화재예방 대책

공동구, 지하피트, 변전실 등 지하시설물 점검

전기 무단사용금지

페인트 등 인화성물질 및 위험물 방지

하자보수용 자재보관 및 대기실 사용

각종 공사용 자재 방치

현장사무실, 창고, 숙소에 소방기구 비치

안전점검

수급인은 건설기술관리법 시행령 제26조 제2항 등의 규정에 의하여 작성한 안전관리계획서에 따라 공정별로 국토해양부령이 정하는 건설안전점검기관에 의뢰하여 정기안전점검을 실시 하여야한다.

안전검사

공사 재개 시 안전검사

수급인은 동절기 공사중단 및 기타의 사유로 공사를 중단한 후 일정기간이 경과하여 공사를 재개할 경우, 다음 사항에 대한 안전검사를 시행하고, 그 검사결과에 상응하는 조치를취한 다음에 공사에 임하여야 한다.

거푸집의 휨, 손상 및 조립상태

각종 긴결재, 긴결철물의 고정 및 부식상태

비계다리, 발판의 손괴, 탈락유무

콘크리트 타워의 이상유무

호이스트, 리프트카, 원치 등 인양기의 케이블 연결 및 접지상태

공사용 전선, 개폐기, 분전반의 이상유무

안전보호망의 이상유무

콘크리트를 타설할 부위의 토사유입 여부

안전관리상태 점검

발주자는 건설공사의 안전한 수행을 위하여 정기 또는 수시로 수급인의 안전에 관한 제반의 관리상태를 점검 또는 진단하여 미흡하거나 잘못된 사항에 대한 시정 및 해당공사의일시중단을 요구할 수 있으며, 이와 같은 요구가 있을 때에 수급인은 즉시 시정조치하거나 해당공사를 일시 중단하여야 한다.

안전보건교육

수급인은 산업안전보건법 시행규칙 제33조에 의하여 당해 사업장의 근로자에 대하여 교육을 실시하여야 한다.

안전일지

수급인이 자체관리하며, 안전점검, 안전진단, 건설재해전문기관의 지도, 안전검사, 안전보건교육 등에 관한 사항을 기록하여 상시 비치하여야 한다.

환경관리

일반사항

적용 범위

건설공사의 환경관리에 대하여 적용한다.

환경관리 일반

관리 및 보상의 책임

수급인은 공사의 수행과정에서 환경피해가 최소화되도록 환경관리계획을 수립 하여야 하며, 이의 미흡 또는 법정환경기준의 잘못 적용 등으로 인한 환경피해의 처리와 보상 등은수급인이 부담하여야 한다.

환경관리계획

수급인은 다음 사항을 포함하는 환경관리계획을 작성하여 제출하여야 한다.

인근 가옥 등 공작물 피해대책

소음, 진동대책

통행소통대책

악취, 위생대책

건설폐자재대책

토양오염방지 대책

폐기물 처리대책

기타

환경관리계획 제출 시기 및 부수 : 공사 착공 전 및 계획 변경 시, 각각 2부

자연환경 보전

지하수 보호

수급인은 지하수법에 따른 절차를 이행하여 지하수 오염을 방지토록 하여야 한다.

수급인은 공사현장의 지하수 이용실태를 조사하고 지하수 고갈에 따른 대책을 수립하여 민원발생이 되지 않도록 하여야 한다.

토양

수급인은 공사용 장비에서 발생하는 폐유 등의 무단투기를 방지하기 위하여 환경부 고시(폐기물 회수 및 처리방법에 관한 규정)에 따라 작업장내에 폐유 회수통을 비치하고, 발생폐유를 회수하여 적법한 절차에 따라 처분하여야 하며, 그 결과를 기록, 관리하여야 한다.

생활환경 보전

수급인은 국민의 건강을 보호하고 공사장주변의 쾌적한 환경을 조성하기 위해 환경 정책기본법 시행령 제2조 별표 1의 환경기준이 유지되도록 하여야 한다.

수질

수급인이 공사현장에서 폐수배출시설을 설치하고자 할 때에는 수질환경보전법에 의한 신고또는 인ㆍ허가에 대한 승인을 받은 후 설치ㆍ운영하여야 한다.

교량기초 공사시 또는 강우시 하천의 수질 오염을 방지하기 위하여 가배수로, 저류조, 오탁방지망 등 수질오염 방지시설을 설치하여 수질오염을 방지하여야 한다.

소음ㆍ진동

수급인이 소음ㆍ진동배출 시설을 설치하고자 할 때에는 소음ㆍ진동규제법에 의한 신고 또는 인ㆍ허가에 대한 승인을 받은 후 설치ㆍ운영하여야 한다.

수급인이 건설소음ㆍ진동 규제지역 안에서 공사를 시행하고자 할 때에는 소음ㆍ진동규제법에 의한 신고 또는 인ㆍ허가에 대한 승인을 받은 후 시행할 수 있으며 해당 행정기관의 지시에 따라야 한다.

생활환경지역내에서는 공사차량 운행으로 인한 소음의 영향을 저감하기 위하여 차량의 운행속도를 제한하여야 하며, 작업장내에서는 사용장비의 작업시간 조정, 소음기 설치 등 소음저감대책을 수립하여 소음을 방지하여야 한다.

폐기물 처리 및 재활용

수급인은 공사 시행과정에서 발생되는 건설폐기물은“환경부 예규 277호”의“건설폐기물처리기준 및 방법 등에 관한 업무처리지침”에 적합하고, 종류별(특정폐기물, 일반폐기물), 처리형태별로 분리수거하여 처리 및 재활용을 촉진하여야 한다.

분진방지

수급인은“대기환경보전법”등에 의거 현장여건에 맞게 비산분진 발생방지 시설을 설치한후 시ㆍ도지사에게 신고하여야 한다.

수급인은 공사현장분진 저감을 위하여 다음의 사항을 이행하여야 한다.

공사현장 차량출입구에 시설기준에 적합한 세륜시설 설치 및 운영

공사현장 차량출입구에 환경미화원을 상시 배치하여 낙석, 낙토의 수시 제거 및 물청소실시, 세륜시설 통과차량에 대한 세륜상태 확인

공사현장 내 차량통행로는 수시 살수

건물건설공사장 폐자재 및 쓰레기는 분리수거하여 지정용역업체로 하여금 적치장까지 운반처리

분진발생 가능한 골재, 토사 등의 운반차량은 방진덮개를 덮고 차량운행(적재물은 적재함상단의 5㎝ 이하까지만 적재)

도시 간선도로와 접한 부분은 가림막 설치

작업장에는 항시 정리 정돈하여 청결유지하고, 도로 토사 유입방지

공사현장에는 관리인을 두어 상기 사항을 체크리스트화하여 일일점검하고 종사자 및 출입차량 운전자에게 수시 교육 실시

수급인은 건설폐기물 발생억제를 위하여 자재 포장재의 최소화, 적소에 적정량 운반 및자재의 정리정돈을 적극 시행하여야 한다.

건설현장의 작업자 등에 의한 신문, 빈병, 음식쓰레기 등 생활쓰레기의 발생을 억제하고,재활용품을 분리수거 및 관리한다.

시공관리

일반사항

적용 범위

시공은 계약문서, 설계도서, 감독관의 승인을 받은 공정표, 시공상세도, 시공계획서에 의거하여 이를 준수하면서 시공한다.

수급인은 현장 여건을 고려하여 이 공사의 정해진 공기 내의 준공을 위하여 최적의 방안을 수립하여 공사하여야 할 책임이 있다.

공사기간

수급인은 따로 정한 경우를 제외하고 계약문서 상에 명시된 기간 내에 공사를 착공하여지체없이 계획대로 공사를 추진하여 계약공기 내에 완료하여야 한다.

선행공정 완료 직후 후속공정에 착수하면 품질에 나쁜 영향을 줄 수 있는 공정에 대하여는 충분한 공사기간을 고려하여야 한다.

전체 공사의 완료 전에 특정 부분에 대한 공사의 완료 또는 시공순서변경에 대하여 감독관의 요구가 있을 때에는 시공자는 품질에 위해한 영향이 없는 한 이를 최대한 수용하여반영해야 한다.

작업시간의 조정

공사 시행의 편의상 작업시간을 연장 또는 단축하거나, 야간 또는 휴일에 작업을 할 때에는 미리 감독관의 승인을 득해야 한다.

공정 계획상 작업 시간의 연장 또는 단축, 야간 또는 휴일 작업의 필요가 있다고 감독관이 인정할 때는 품질 확보에 지장이 없는 한 수급인은 이를 최대한 수용하고 반영하여야하며 이로 인한 추가 비용으로 계약금액의 조정을 요구할 수 없다. 다만, 계약상 정해진공기를 단축하거나 발주자의 부득이한 사유로 인하여 휴일 또는 야간작업을 지시하였을때에는 공사계약일반조건의 관련 규정에 따른다.

수량의 단위 및 계산

공사수량의 단위 및 계산은 원칙적으로 정부시설공사 표준품셈의 수량계산 규정에 따른다.

공정표와 그 관리

공정표

수급인은 설계도서에 따라서 공사전반에 대한 상세한 계획을 세우고 소정양식의 공정표를제출하여야 한다.

공정표에 변경이 생긴 경우에는 변경공정표를 지체없이 작성하고 담당원의 승인을 받는다

계약 이외의 공사와의 관련사항이 있는 경우에는 감독관의 지시를 받아 조정한다.

공정관리

수급인은 감독관이 지시하는 방법과 요령에 따라 공사의 공정을 철저하게 관리하고 성과자료와 보고서를 제출하여야 한다.

공사 중 공사 예정 공정표에 의한 공사 추진이 부진할 경우 감독관은 공기 만회대책 수립을 지시할 수 있으며, 이에 따라 시공자는 공사부진 사유서와 수정 공정표를 포함한 공기만회 계획을 작성하여 감독관에게 제출하여야 한다.

시공계획서

시공계획서는 본 시방서의“1-2-2 공무행정 및 제출물 / 1.5 시공계획서”에 따른다.

치수

설계도서 등에 표시되어 있는 마감 치수는 마무리 치수로 한다.

측량

측량일반

수급인은 이 공사의 모든 부분에 대한 표고, 위치, 치수의 정확도에 대하여 측량을 실시하여야 하고 이에 대한 책임을 진다.

시공 측량에 종사하는 자는 국가기술자격법에 의한 측량에 관한 적절한 자격을 갖춘 자로하며 감독관이 이 공사의 측량에 충분한 능력을 갖추고 있다고 인정해야 한다.

측량 기준점

수급인은 삼각점, 도근점, 수준점 등의 측량기준점을 감독관과 협의하여 위치, 방법 및 수량대로 설치해야하며 이동이나 손상시키지 않도록 하며 이동이 필요할 경우에는 감독관과협의한다. 각 측량기준점 관리 및 검측결과에 대해 감독관에게 서면으로 제출한다.

측량기준점은 위치나 높이가 변동이 되지 않도록 적절하게 보호되어야 하며 공사진행에 따라 존치하지 못할 경우에는 감독관과 협의한다.

측량기준점 중 중심말뚝, 교점, 곡선시점, 곡선 종점 및 하천이나 도로의 거리표 등의 이에 있어서는 정해진 위치를 찾아낼 수 있는 보조말뚝을 설치한다.

시공 측량

수급인은 착공과 동시에 설계서와 실제 현장 조건의 상이여부를 확인하는 측량을 시행하여야 한다.

수급인은 측량 후 설계내용과 측량결과가 현저히 상이할 때에는 감독관의 확인을 득한 후감독관에게 그 결과를 보고한 후 지시를 받아 시공에 착수한다.

모든 시설물의 설치 기준점은 설치 요령서 및 감독관의 지시에 따라 설정하되 준공 후 유지 보수를 고려하려 사후 관리가 가능한 위치에 설정하여야 한다.

규준틀

수급인은 구조물의 위치, 고저, 시공 범위 방향 등을 표시하는 규준틀을 바르고 튼튼하게설치하고 시공 전에 감독관의 확인검사를 받아야 한다.

중요한 규준틀은 준공 시까지 잘 보호하여야 하고 파손되어 복구가 필요하거나, 이설이필요한 경우에는 감독관의 지시에 따라야 한다.

원척도․ 시공상세도․ 견본

원척도, 시공상세도, 견본 등은 지체없이 작성하여 감독돤에게 제출하여 승인을 받는다. 다만, 작성 및 제출의 필요성이 적다고 판단되는 것은 감독관의 승인을 받아 생략할 수 있다.

입회 및 자료제출

수중, 지하 또는 건조물 내부에 매몰되는 부분 및 재료의 배합, 강도, 기타 시공 후의 검사가 곤란한 시공부분에 대하여는 감독관의 입회하에 모양, 치수, 강도, 품질 등을 확인하고 그 기록, 기타 필요한 자료(검사보고서, 기록사진, 품질시험 성적서 등)을 제출하여야 한다.

기계기구

중요한 기계기구는 현장 반입 이전과 사용하기 이전에 성능 및 규격 등에 관해서 감독관의 검사 및 승인을 받아야 하며 계약문서 및 관련 법규상의 요건과 감독관의 지시에 상응한 것으로 한다.

폭발물 등의 취급

폭발물 등 기타 위험물의 운반, 보관 및 취급 등의 사용은 관계법규에 따라 확실하고 안전하게 하여야 한다.

노무관리

수급인은 공사가 원활히 진행될 수 있도록 각 공종별로 현장 동원 인력 관리에 만전을 기하여야 한다.

근로자에 대한 고용 및 관리 책임은 모두 수급인에게 있다.

감독관은 시공자가 고용하는 근로자가 공사 시행 또는 관리상 부적당하다고 인정될 때에는 수급인에게 그의 교체를 요구할 수 있다.

공사 보고

수급인은 계약문서 및 설계서에서 지정한 것, 공사의 진척, 작업원의 투입, 재료의 반입, 기후, 측량 및 정밀도 검측결과 등 감독관이 필요하다고 인정하여 지시한 각종 보고를 지정한 기일 내에 상황과 결과를 나타낸 서류를 구비하여 보고하여야 한다.

수급인은 각종 보고의 서식, 제출방법, 시기 등에 대해서는 감독관의 지시에 따른다.

토 공 사

준비공

적용범위

땅깍기, 흙쌓기, 구조물 터파기 작업 등을 위하여 설계도서 및 감독원의 지시에 따라 규준틀 설치 및 준비배수를 수행하는 작업에 적용한다.

규준틀 설치

규준틀은 비탈면의 위치와 기울기, 도로의 폭 등을 나타내는 토공의 기준이 되는 것이므로 정확하고 견고하게 설치하여야 한다.

규준틀의 설치간격은 설계도서 또는 감독원의 지시에 따라야 하며 다음을 표준으로 한다.

규준틀의 표준 설치간격

설치장소의 조건	설치간격
직 선 부 곡선반경 300 m 이상 곡선반경 300 m 이하 지형이복잡한 장소	20 m 20 m 10 m 10 m 이하

시공 중 손상되거나 망실된 규준틀은 계약자 부담으로 신속하게 재설치 하여야 한다.

준비배수

공사 착수 이전에 공사시 배수계획을 수립하고 감독원의 승인을 받은 후 배수 대책을 시행 하여야 한다.

시공에 앞서서 절토 장소 또는 성토 원지반에 고인 물을 배제하여야하며 시공 중에도 필요에 따라 가배수로 등을 설치하여 절토장소의 배수를 양호한 상태로 유지하여야 한다.

절토중에 용수 또는 지하수 등을 발견하면 감독원의 지시에 따라 배수시설을 설치하여야 한다.

구조물, 지장물의 철거 및 이설

적용범위

설계도서 및 감독원의 지시에 따라 각종 구조물 및 공사에 장애가 되는 지장물을 철거하거나 이설하는 작업에 적용한다.

시공

계약자는 설계도서 및 감독원의 지시에 따라 구조물이나 지장물의 철거 및 이설작업을 수행하여야 한다.

사용 중인 배수시설 등은 적당한 대체시설을 설치하여 통행 및 이용에 불편이 없도록 조치한 후에 철거하여야 한다.

콘크리트 및 돌쌓기 구조물

콘크리트 및 돌쌓기 구조물의 철거는 발파 또는 파쇄로 시행하나 돌쌓기 구조물의 일부를 공사 시공물로 유용하는 경우에는 발파에 의한 철거를 할 수 없다.최종 도로면 또는 마무리면 밑에 있는 콘크리트 및 돌쌓기 구조물의 부분은 감독자가 공사 시공에 지장이 없다고 판단할 때에는 철거할 필요가 없으나 도로의 마무리 면에서 1m 이내의 깊이에 있는 모든 구조물은 완전히 철거하여야 하며, 그 구조물에 사용된 철근은 콘크리트 전단면에서 완전히 절단 제거하여야 한다.

사업 중인 교량, 암거 및 기타 배수시설은 적당한 대체시설을 실시하기 전에 제거하여서는 안 된다.

구조물의 하부구조는 유수부에서는 하상면 까지 제거하여야 하며 지표면에서는 최소 30cm 깊이까지 제거하여야 한다.

제거작업에 발파가 필요할 시는 영향권 내의 신 구조물을 설치하기 전에 발파작업을 완료하여야 한다.

최종 마무리 면에서 2m 깊이 이내에는 어떠한 구조물의 일부라도 잔존하지 않도록 파쇄 하여야 한다.

지하수로 등의 지하구조물은 공극이 생기지 않도록 철거 파쇄한 후 소정의 기준에 따라다져야 한다.

철거작업 시 발생한 콘크리트는 감독원의 승인을 받은 후에 소요규격으로 부수어 흙쌓기나 기타 공종의 재료로 사용할 수 있다.

철거 잔재물은 설계도서 및 감독원의 지시에 따라 지정된 장소에 지정된 방법으로 처리하여야 한다.

땅깍기

적용범위

설계도서 및 감독원의 지시에 의해 확정된 선형, 기울기. 치수에 부합되도록 땅을 깍는 작업에 적용한다.

용어의 정의

「땅깍기」는 땅깍기 및 원지반의 부적합한 재료 제거 및 추후 타목적에 사용하기 위하여 감독원이 별도 지시한 재료의 깍기작업을 말한다.

「순성토」는 흙쌓기 및 되메우기에 필요한 재료를 외부에서 반입하는 작업을 말한다.

시공

일반사항

기존구조물 및 지장물의 철거, 규준틀의 설치, 외부 유입수의 차단 등이 완전히 이루어진 후에 땅깍기를 시행하여야 한다.

땅깍기에 앞서 흙쌓기에 유해한 원지반면의 불순물은 완전히 제거하여 절토된 흙에 섞이지 않도록 하여야한다.

땅깍기 작업 및 흙 운반은 타 공정에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 적절한 순서로 원활하게 시행될 수 있는 작업계획을 수립하여 감독원의 승인을 받은 후에 시행하여야 한다.

땅깍기 하는 장소에는 지표수 및 용출수가 고이지 않도록배수시켜야 한다.

정상적인 방법으로 제거할 수 없는 암석이 나타나면 감독원에게 보고하고 지시에 따라 파쇄 하여야 한다.

재료의 활용

땅깍기에서 발생되는 재료가 흙깍기에 부적합하다고 판단될 경우에는 즉시 감독원에게 보고하고 지시에 따라야 한다.

땅깍기에서 발생한 재료 중에서 흙쌓기에 사용할 재료는 직접 사용할 장소에 운반하여 활용하여야 한다.

여굴

설계도서에 명시되어 있거나 감독원이 지시한 선형, 기울기 및 범위를 초과하여 땅깍기를 하였을 경우, 계약자는 자기부담으로 감독원이 지시에 따라 승인된 재료로서 되메우고 시방규정에 따라 다져야 한다.

흙깍기의 토질과 허용오차

토 사 : 점토, 모래, 자갈 또는 작은 돌에 섞인 흙으로서 보통 불도져 또는 스크레이퍼로 유효하게 땅깍기를 할 수 있는 것. 허용오차 ± 10 cm

리 핑 암 : 유압식 백호우를 사용하여 유효하게 땅깍기를 할 수 있는 암, 또는 전석 썩은 토사.허용오차 ± 15 cm

발 파 암 : 단단하고 조직이 치밀한 암류로서 도로와 근접해서 시공을 하여야하므로 유압식 백호우+대형 브레이커를 사용하여 절취한다. 허용오차 ± 20 cm

마무리

비탈면에 노출되어 있는 돌 부스러기, 기타 폐기물은 제거하여야 한다.

토공사의 모든 표면은 설계도면에 표시되어 있거나 감독원이 지시한 선과 기울기가 일치 하도록 말끔히 정돈 되어야한다.

완성된 구간은 말끔히 정리하여 감독원이 검측할 수 있는 상태로 유지하여 감독원의 검사를 받아야 한다.

흙쌓기

적용범위

땅깍기, 구조물터파기 등에서 발생한 재료를 사용하여 설계도서 및 감독원의 지시한 선형 기울기, 높이에 일치되도록 부지를 완성시키는 작업에 적용한다.

재 료

일반사항

초목, 나무뿌리, 쓰레기, 유기질토 등의 유해물질이 함유하지 않은 흙쌓기에 적합한 토사류를 사용하여야 한다.

재료가 동결되었을 때와 성토한 시공 면이 동결되었거나 눈으로 덮여 있을 때는 다 녹거나 동결된 부분을 제거하기 전에 성토작업을 시행해서는 안 된다.

주거용지 및 준주거용지의 구배는 4% 이내로 결정하고 공동주택용지의 계획은 2% 이내로 하며 미성토를 감안하여 계획고를 결정하여야 한다.

절토지역에는 미성토 계획고만큼 절토를 덜하고 성토지역은 미성토고 만큼 단지계획에서 제외하고 성토를 하여야 한다. 단, 계획고에서 미성토고 만큼 성․절토가 아니 될 때에는 원지반으로 처리하여야 한다.

노체재료

노체부분에 흙쌓기 할 재료는 다음 규정에 적합한 것이어야 한다.

최대치수 : 150 mm 이하

다짐후의 건조밀도 : 1.5 t/㎥ 이상

쇄석을 성토재료로 사용하는 경우에는 그 품질과 배합은 감독원의 승인을 받아야 한다.

노상재료

노상은 포장 밑에 위치하는 흙쌓기 또는 땅깍기의 최상부 1m 부분으로 포장과 일체가 되어 교통하중을 지지하는 중요한 역할을 함으로 노상재료는 다음 규정에 적합한 것이어야 한다.

최대치수 : 100 mm

80 mm 체통과량 : 25 ~ 100 %

0.08 mm 체통과량 : 0 ~ 25 %

소성지수 : 10 이하

시방다짐을 실시한 흙의 수정 CBR : 10 이상

시 공

일반사항

규준틀 설치, 준비배수, 구조물 및 지장물 철거 등이 완전히 이루어진 후에 흙쌓기 작업을 시행 하여야 한다.

깔기

흙쌓기 재료는 소정의 두께로 균일하게 깔아야 하며, 사용 장비는 사전에 감독원의 승인을 받아야 한다.

점성질토, 사질토와 같이 그 특성이 다른 재료는 교대로 층을 이루도록 깔아야 한다. 다만 감독원이 작업에 유리하고 배수가 잘된다 판단할 때에는 혼합해서 사용하도록 지시할 수 있다.

시공 중 배수

흙쌓기 작업 중 계약자는 항상 배수에 유의하여 표면에 물이 고이지 않도록 하여야 한다.

흙쌓기 면에는 4%이상의 횡단기울기를 두며, 작업 종료 시에는 표면을 평탄하게 마무리하도록 하여야 한다.

다 짐

적용범위

설계도서 및 감독관의 지시에 따라 흙쌓기 재료를 소정의 두께로 깐 후에 로울링, 태핑 또는 이 두 가지의 혼합방식으로 소요밀도를 얻을 때까지 흙을 다지는 작업에 적용한다.

본 작업은 땅깎기 노상 및 흙쌓기부의 원지반을 다지는 것도 포함된다.

시공

일반사항

흙쌓기의 시공에 있어서는 균일하고 효율적인 다짐을 위하여 그레이더 등으로 땅고르기를 하고 함수비를 최적함수비 상태로 조절한 후에 다져야 한다.

계약자는 공정계획에 따라 다짐작업을 할 장비의 종류, 대수, 장비조합 등에 대한 계획서를 제출하여 감독관의 승인을 받은 후에 작업을 수행하여야 한다.

함수량 조절

현장여건상 부득이 함수비가 높은 재료를 흙쌓기에 사용할 경우에는 흙을 깐 후 건조시켜 최적함수비 상태에서 다짐작업을 하여야 한다.

함수비가 낮은 재료를 흙쌓기 재료로 사용할 경우에는 물을 뿌려 함수량을 조절한 후 다짐작업을 하여야 한다.

함수량 조절이 불가능한 우기나 결빙이 되는 동절기에는 흙쌓기 작업을 중지하여야 한다.

다짐의 범위

흙쌓기 작업시 에는 차도 부는 물론, 길 어깨 및 흙쌓기 비탈면도 소정의 다짐도에 도달할 때 까지 고르게 다져야 한다.

다짐의 기준

노체

1층의 다짐 완료후 두께 : 30cm 이하

흙의 실내다짐방법(KSF231: A, B 방법

다짐율은 실내에서 다진 최대 건조 밀도의 90%이상

평판재하시험 방법으로 다짐관리시 : 0.25cm 침하시 [eqn: K_30 = 15kg / cm^3 이상]

암버럭으로 흙쌓기 작업시 지지력 : 0.125cm 침하시 [eqn: K_30 = 20kg / cm^3 이상]

노 상

1층의 다짐 완료 후 두께 20cm 이하

흙의 실내다짐방법(KSF231: C.D.E 방법

다짐율 : 실내에서 다진 최대 건조밀도의 95% 이상

감독자가 하부노상 재료를 별도로 승인하였을 경우 하부노상은 최대 건조 밀도의 90% 이상

평판재하시험 방법으로 다짐관리시 0.25cm 침하시 [eqn: K_30 = 20kg / cm^3 이상]

암버럭으로 흙쌓기 작업시 지지력 : 0.125cm 침하시 [eqn: K_30 = 20kg / cm^3 이상]

절토부 노상

흙깍기 구간의 노상부 토질이 다짐 작업으로서 소요밀도를 얻기가 불가능 할 경우에 는 노상 면에서 15cm 깊이 까지 긁어 일으킨 후 승인된 다짐 장비를 사용해서 KSF2312(흙의 다짐시험방법)의 C.D.E 방법에 의해 구하여진 최대 건조밀도의 95% 이상의 밀도가 되도록 균등하게 다져야 한다.

구조물 주변

옹벽, 날개벽 등과 같이 한쪽만 흙쌓기 시공을 하는 경우에는 구조물에 과도한 압력을 가해 구조물에 손상을 일으킬 가능성이 있으므로 다짐작업시 특별한 주의를 하여야 한다. 박스형 구조물의 경우와 같이 양쪽에 흙쌓기를 할 때는 양쪽이 같은 높이가 되도록 포설하고 다짐작업을 시행하여야 한다.

다짐장비

흙쌓기 다짐장비는 감독관의 승인을 받은 장비를 이용하여야 한다.

구조물에 인접한 부분과 같이 면적이 좁아 로울러를 사용할 수 있는 장소에는 램머 및 진동식 다짐장비, 기타 감독관의 승인을 받은 소형 다짐 장비를 사용하여 균일하게 다져야 한다.

프루프 로울링

노상의 최종 마무리를 하기 전에 노상 표면 전체에 대하여 감독관의 승인을 받은 타이어 롤러 또는 덤프트럭으로 3회 이상 프루프 로울링을 실시하여야 한다.

프루프 로울링에 사용되는 타이어 로울러의 복륜하중은 5t이상, 타이어 접지압은 5.6 ㎏/㎠이상이어야 한다.

타이어로울러 또는 덤프트럭을 주행시켜서 육안식별로 노상면의 변형이 확인되는 곳은 석회 등으로 표시하여 다짐이 부족한 부분은 다시 다짐을 실시하고, 재료가 불량한 부위에는 재료를 치환하여 재시공하여야 한다.

터파기 및 되메우기

적용범위

설계도서 및 감독원의 지시에 따라 구조물의 기초를 시공하는데 필요한 터파기와 발생한 재료의 처리 및 구조물이 완성된 후에 터파기 자리에 되메우기와 뒤채움 작업에 적용한다.

시공

일반사항

터파기 작업은 설계도서 또는 감독원이 지시하는 폭과 기울기, 깊이에 부합되도록 터파기 하여야 한다.

터파기가 더 된 경우에는 감독원의 지시에 따라 비압축성 재료로 기초 바닥 계획고까지 되메운 후에 다져야 한다.

기초 터파기가 완료되면 계약자는 감독원에게 그 결과를 통보하고 터파기의 깊이, 기초지반의 지층특성, 기초 터파기면의 정리 상태 등에 대하여 감독원의 승인을 받은 후에 기초공사를 하여야 한다.

설계도서에 표시된 토질상태와 터파기에 의하여 노출된 토질상태가 상이하여 변경이 필요 하다고 판단될 경우, 감독원에게 보고하여 감독원의 승인을 받아 변경할 수 있다.

터파기

구조물의 축조에 지장이 없도록 소정의 깊이와 폭으로 굴착한 다음 바닥을 고르고 감독원의 검사를 받아야 한다.

터파기 시공에는 시공방법, 장비계획 등 작업 계획을 세워 감독원의 승인을 받아야 한다.

터파기는 지반의 토질 및 지하수의 상태 또는 터파기 주변의 변화를 관찰하고, 주위의 원지반을 이완시키지 않도록 시공하여야 한다.

터파기 지점 가까이에 붕괴, 파손의 위험이 있는 구조물 또는 지하매설물 등이 있을 경우에는, 시공에 특히 주의하고, 이들에게 나쁜 영향을 미치지 않도록 주의한다.

터파기의 시공기면은 터파기로 인하여 원지반이 흐트러져서는 안 되며, 소정의 기초 바닥면보다 깊게 파지 않도록 하여야 한다.

터파기시 지하수 또는 고인 물은 양수기 또는 배수구를 설치하여 배제하여야 하며, 터파기 바닥면이 유실되지 않도록 조치하여야 한다.

되메우기 할 구조물 뒷면의 지반이 비탈진 경우에는 층따기를 하여야한다.

터파기 바닥이 암반일 경우에는 암석 부스러기를 제거하고, 터파기한 부분에는 콘크리트로 채워서 평탄하게 마무리하여야 한다.

터파기 바닥이 토사로써 거칠어 졌을 경우에는 잡석 등을 깔고 램머 등으로 소요의 밀도가 되도록 다져야 한다.

터파기한 흙은 감독원과 협의하여 되메우기에 유용할 흙은 별도로 저장하고, 되메우기에 사용하지 않을 잔토는 즉시 터파기 장소 밖으로 운반 처리하여야 한다.

되메우기할 재료의 저장장소는 배수가 잘되도록 하여 재료의 함수비 증가를 방지하여야 하고, 이물질이 혼입되지 않도록 보호하여야 한다.

되메우기

1층의 다짐 완료후 두께가 20 cm이하이어야 하며, 각 층마다 흙의 다짐시험(KSF 2312)C, D또는 E 방법에 의하여 정해진 최대건조밀도의 95% 이상의 밀도가 되도록 균일하게 다져야하며 평판재하 시험으로 다짐관리시 : 0.25㎝ 침하시 [eqn: K_30 = 30kg / cm^3] 이상이어야 한다.

되메우기는 지하구조물에 손상을 주지 않도록 콘크리트 강도를 고려하여 시공시기를 결정 하여야 한다. 콘크리트 강도가 175 kg/㎠ 이상 또는 28일 이상 양생한 후에 되메우기 작업을 시행한다.

되메우기는 동결 지반에 시공하여서는 안 되며, 동결된 재료를 되메우기 재료로 사용해서는 안 된다.

되메우기한 지반위에 구조물을 설치할 경우 장래 침하의 위험이 있으면 되메우기한 위에 빈배합 콘크리트를 치거나 그라우팅, 시멘트안정처리 등을 시행하여 침하를 최소화해야 한다.

구조물 되메우기에 사용되는 재료는 다음 규정에 합격한 것이어야 한다.

최대치수:100 mm

80 mm 체 통과량:25 ~100 %

0.08 mm 체 통과량:15 % 이하

소성지수 : 10 이하

수침 CBR (%) : 10 이상

뒤채움 재료

구조물 뒤채움에 사용되는 재료는 보조기층재료 SB-1의 품질기준에 적합한 재료이어야 한다. 단, SB-2의 재료를 사용할 시는 감독자의 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

입도번호	통과중량 백분율(%)								비고
	75㎜	53㎜	37.5㎜	19㎜	4.75㎜	2.00㎜	425㎛	75㎛
SB-1	100	-	70-100	50-90	30-65	20-55	5-25	2-10
SB-2	-	100	80-100	55-100	30-70	20-55	5-30	2-10

구조물의 뒤채움 재료로 경제성 등을 고려하여 현지 재료의 활용을 하고자 할 때 다음 규정을 만족하여야 한다.

최대치수	: 100㎜ 이하

4.75㎜ 통과량	: 25~100%

75㎛ 체 통과량	: 15% 이하

소성지수	: 10 이하

시방다짐을 실시한 흙의 수정 C.B.R	: 10 이상

품질관리 기준 및 검사

종 별	시험종목	시험빈도	비 고
되메우기	다짐	토질변화시 마다	되메우기 및 뒤채움 작업시 콘크리트의 압축강도가 175kg/㎠이상 또는 28일 양생 후 실시 하여야 한다.
	현장밀도	독립구조물 : 개소별 3층 마다 연속구조물 : 3층마다, 50m 마다 관로매설물 : 3층 마다, 100m 마다
	함수량	현장밀도 시험의 빈도
뒤 채 움	평판재하	독립구조물 : 개소별 3층 마다 연속구조물 : 3층마다, 50m 마다 관로매설물 : 3층 마다, 100m 마다

토공의 마무리

적용범위

설계도서 및 감독원이 지시한 선형, 기울기, 횡단면에 따라 균일한 형상이 되도록 토공부를 마지막으로 다듬고 정리하는 작업에 적용한다.

본 작업은 토공이 실질적으로 완료되고 인접한 배수시설과 구조물의 시공이 종료되어 뒤채움이 끝난 후에 실시하여야 한다.

시 공

정지 마무리면

정지 마무리면의 최요부(最凹部) 깊이가 2.5 cm 이하이어야 한다.

마무리 면에 대한 허용시공 오차의 범위는 ±3cm이며, 프루프 로울링시 최대 변형 량이 5mm 이하이어야 한다.

마무리 면에 대한 최종 점검 후, 보조기층 재료를 깔기 전에 비가 온 경우에는 마무리 다짐 및 점검을 다시 실시하여야 한다.

비탈면

모든 비탈면은 설계도서에 명시되어 있거나 감독원이 지시하는 선형, 기울기에 따라 깨끗이 마무리하여야 한다.

비탈면에 떼를 심거나 수목을 식재할 경우에는 최대크기 6cm이상의 돌덩어리는 전부 제거 하여야 한다.

완성면의 보호

마무리 면은 상부 층을 시공할 때까지 보호하여야 하며 차량이나 장비가 통행하여 교란 되거나 표면이 이완되었을 경우에는 보완하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

토공 마무리 면은 돌 부스러기나 오물 등을 깨끗이 청소하고 배수가 잘 되도록 해두어야 한다.

품질관리기준 및 검사

종별	시험종목	시험빈도	비고
성토용 흙(노체)	다 짐	토질변화시마다
	함 수 량	층별 포설 후 다짐전 2천㎥마다
	현 장 밀 도	층별 다짐완료 후 450m 마다
성토용 흙(노상)	다 짐	토질변화시마다
	함 수 량	층별 포설 후 다짐전 1천㎥마다
	현 장 밀 도	층별 다짐완료 후 400m 마다

하 수 도 공 사

적용기준

KS M 3600 하수도용  경질염화비닐 이중벽 주름관 , KS F 4403의 원심력철근콘크리트에 적합한 제품

하 수 관

적용 범위

우수 :  PE이중벽관

오수 :  PE이중벽관

관의 종류

관은 1종(PS 4.0Kgf/㎠이상. KS F 4403의 A형(소켓관) 규정에 적합한 제품

관의 재료

하수관은 대표적인 5개 제품 및 접합방식을 적용하여 설계하였으며, 시공시 수밀성, 시공성을 감안하여 시험시공 등을 통하여 가장우수하고 경제적인 관종을 선정하여 우리공사의 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

토공

터파기

굴착 폭은 설계도서에서 정해진 폭보다 적어서는 안 된다.

터파기는 설계도서에 정해진 깊이보다 깊지 않도록 하고 작업 중 빗물이나 용수가 고이지 않게 하며 기설구조물에 근접한 장소에서는 기설구조물 보호 대책을 수립 시행하여야 한다.

지하매설물이 있는 경우는 줄파기를 한다.

터파기한 흙 중 잔토는 인접지역으로 반출하고 되메움으로 사용할 흙은 터파기 법면 끝에서 60cm 이상 떨어진 위치에 쌓아야 한다.

관경에 따라 굴토 폭 및 작업공정이 다르나 굴토 치수는 토압의 크기 및 분산에 많은 영향을 주므로 가능한 현장 여건 및 토질의 상태를 고려한 후 굴토 폭을 최소로 좁게 파서 외압으로부터 영향을 줄여야 한다.

물푸기공

물푸기공은 지하수 유출량, 지질상태, 양정 등을 고려하여 충분히 배수할 수 있는 공법을 선정 한다.

물푸기한 물을 방류할 때에는 감독관과 협의하여야 하며, 지하수위 저하로 인한 지반변동에 유의 하여야 한다.

물푸기 시행 시에는 시공사항등을 기록, 유지하여야 한다.

되메우기

되메우기에 사용되는 흙은 이토, 점질토 덩어리, 불순물 및 유해물 등이 혼입되지 않은 모래 등 양질토로서 토질이 소유 기준치 이내이어야 하며, 기준에 미달할 경우 외부로 부터 반입 하여 사용하여야 한다.

되메우기시 최적함수비 상태에서 시행하며 한 층의 전압두께가 20 cm 이하로 충분히 펴서 다져 차도에서는 다짐도 95%이상, 보도부에서는 다짐도 90% 이상이 유지되도록 하고 다짐시 매설된 관거가 파손되지 않도록 주의한다.

관거상단까지의 되메우기는 덤프트럭 등으로 직접 부어서는 안 되며 판이 움직이지 않게 관로 양쪽에서 같은 높이로 번갈아 채워가며 전압 해야 한다.

되메우기는 관부설후 감독관의 경사검사 및 외관검사 후 지시에 따라 되메움 하여야 한다.

관 부 설

관의 설치

관은 설계도에 표시된 모양과 치수의 것을 소정의 구배에 맞추어 하류측 또는 낮은 쪽에서 부터 설치해 가야하며 맨홀 과 맨홀사이는 설계도면에 따라 관중심선이 직선이 되도록 배관 하여야 한다.

관을 부설하기 전에 관 체의 외관을 검사하여 균열이나 기타 결함이 없는가를 확인한다.

소켓이 구거의 상류쪽 또는 높은 쪽으로 향하도록 설치하여야 한다.

관은 바닥면과 밀착되게 하고 관 안벽면이 어긋나지 않도록 주의하여 연결하며 관 내부는 매끄럽게 마무리해야 한다.

관 바닥의 기초상태를 확인하고 중심선과 높낮이를 조정, 정확하게 설치한다. 또 관 체의 표시, 기호를 확인함과 동시에 관 체에 표시되어 있는 지름, 제작년도 등의 기호가 위로 향하도록 한다.

관을 배열할 때에는 관의 양쪽에 목재나 모래주머니 기타 적절한 방법으로 받침을 하여 관이 구르지 않도록 한다.

되메우기전에 관의 설치 적부, 침하의 유무, 손상여부 등에 대하여 감독관의 검사를 받아야 하며 이상이 있을 때는 감독관의 지시에 따라 다시 설치하거나 교체하여야 한다.

관부설후 접합상태, 구배, 수밀시험 등에 대한 감독관의 검사를 반드시 받아야 하며, 감독관의 검사 후 지시에 따라 되메움 하여야 한다.

우천 등으로 인하여 관부설이 일시 중단될 경우 개구부를 합판 등으로 폐쇄하여 토사 등이 관내로 유입되지 않도록 조치한 후 감독관의 검사를 받은 후 중단해야 한다.

관주변의 되메움 흙의 상태에 따라 매설관의 내하력에 크게 영향을 미치므로 매설토의재료는 압축성이 작은 양질토를 사용해야 한다. 또한 관에 손상을 줄 수 있는 호박돌이나, 날카로운 암석과, 부등침하의 원인이 될 수 있는 유기물이 함유된 흙 등은 매설재료로서 부적합하다.

관의 절단

관을 절단하고자 할 때에는 관의 절단 길이 및 절단개소를 정확히 정하고 절단선의 표선을 관 둘레 전체에 표시한다.

관의 절단은 관축에 대하여 직각으로 해야 한다.

관의 절단은 절단기로 하는 것을 원칙으로 하며 이형관은 절단하지 않는다.

기초공

모래기초

모래기초는 1차로 도면에 명시된 두께(h2)와 폭 및 경사로 관로하단 부분까지 균일 하게 포설하여 다진 다음, 관을 설치하고 2차 모래(h1)를 포설한다.

터파기한 바닥면의 최대넓이가 기초 폭보다 크게 시공된 경우, 건설업자은 설계폭 에 관계없이 터파기면까지 모래기초를 포설해야 하며, 이러한 작업은 발주자측에 추가비용 요구 없이 건설업자 부담으로 이루어져야 한다.

콘크리트 기초

콘크리트 기초는 1차로 관하단 부분까지 도면에 명시된 두께(h2)와 폭 및 경사로 균일하고 평탄하게 포설한 다음, 충분한 양생기간을 거친 후 소정의 위치에 관을 설치하고 2차 콘크리트(h1)를 타설한다.

관로내 정리

관로매설이 완료되면 관로내의 이물질을 제거하고 청소를 실시하여 항시 배수가 가능하도록 유지하여야 한다.

PE 이중벽관 및 연결자재

일반사항

본 시방서는 하수도배관용으로 사용되는 고강성 PVC 이중벽관과 관의연결 부속자재인 밴드 및 이음관의 품질 및 제작과 제품의 일반적인 관리에 관한 사항을 규정한다.

규격 및 수량

품명	규격	적용	수량	비고
PE 이중벽관		KS M 3600

품질

인용규격

다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 구성한다

KS A 0021 수치 맺음법

KS B 5202 외측 마이크로미터

KS B 5203 버니어 캘리퍼스

KS M 3600 하수도용 고강성 경질염화비닐 이중벽 주름관

KS M 6613 수도용 밴드

ASTM-D-2412  PE 관의 외압 강도 특성 결정을 위한 시험방법

ASTM-D-2444  PE관의 낙추에 의한 충격저항 시험방법(ASTM D 2564, 2855 삭제)

ASTM-F- 949  매끄러운 내벽과 주름진 이중벽을 갖는 하수도용 고강성 경질염화비닐관 규격

PE 이중벽관

품질기준과 시험방법은 KSM 3600-98(하수도용 고강성 경질염화비닐 이중벽 주름관)에 따르며, 한국염화비닐관공업협동조합의 단체표준에 의한 제품을 우선사용한다.

관의 종류

종 류	강 성	호칭지름	용 도	비고
1종	8.0 ㎏/㎠ 이상	100~600mm	고강성용

치수 및 색

관의 길이는 6.0M를 표준으로 하고 사용자의 요구가 있을 시에는 길이를 조정할 수 있다.

관의 규격은 KSM 3600에 의한 다음 그림 및 표와 같다.

이중벽 주름관의 색상은 회색을 표준으로 하고 오․우수 분류표시에 의한 색상을 지정하였을 시에는 사용자의 요구에 따른다.

관의 성능

시험 항목	성 능	시험온도	비 고
강성시험	․ 1종 : 8.0㎏/㎠ (고강성용)	23±2℃
아 세 톤 침지시험	․ 시험편 내. 외면 및 중간층의 갈라짐, ․ 돌출 및 시험편이 조각으로 떨어져 나가서는 안 된다	23±2℃
편평시험	․ 시험편을 최초 안지름의40%가 될 때 까지 압축하였을 때, 관의 파열, 균열기공 및 층간의 박리가 없어야 한다.	23±2℃
낙추시험	․ 10개 시험편중 9개가 깨지지 않아야 한다.	상 온
수압 시험	․ 누수 및 그 밖의 결점이 없을 것 (수압 0.75 ㎏/㎠ 압력에서 1분간)	상 온	단 자연 유하식으로 수압이 발생하지 않는 위치는 수압시험을 생략할 수 있다

보호캡(Protection Cap)

이음관 작업의 품질을 향상을 위해 이물질로부터의 오염을 방지하기 위해 직관 양 끝단에 보호를 씌워 운반 및 보호를 하고 시공 시 이를 탈거하여 시공한다.

품질시험

PE 이중벽관

관의 겉모양, 모양, 치수, 강성 시험, 아세톤 침적 시험, 편평 시험, 낙추 충격 시험,수압 시험은 KSM 3600-98에 따라 시험하고 모든 시료는 규정에 합격 하여야 한다.

밴드 (RUBBER RING)

밴드 시험은 인수 인도 당사자 간의 협의에 의해 스프링 경도와 인장강도 시험 만 할 수 있다.

이 음 관

이음관은 겉모양, 모양, 치수, 편평 시험, 수압 시험을 실시하고 모든 시료는 규정에 합격 하여야 한다.

취급 보관 보존 및 운반

취급 보관 보존

관을 적재보관 할 때는 돌이나 날카로운 물체를 제거하고 바닥면을 수평으로 정리한 후 폭이 넓은 받침을 놓고 적재하며, 적재높이는 2.5m를 넘지 않도록 하여야 한다.

고강성PVC 이중벽관은 열에 약하므로 열원으로부터 떨어진 곳에 보관한다.

장기간 직사광선에 노출되는 것을 방지하기 위하여 실내 또는 천막을 덮어서 보관한다.

운반한 관 및 부속은 매설위치에 던져서는 안되며 관내에 이물질이 들어가지 않도록 유의해야 한다.

관을 취급, 운반, 설치할 때는 뾰족한 쇄석이나 돌기된 철편 등의 충격을 받지 않도록 유의하여야 한다.

운반

운반시 관이 서로 부딪혀 파손이 되지 않도록 신중히 취급하여야 하며, 품질에 영향을 미치는 손상결함이 있는 것은 사용해서는 안 된다.

관을 적재할 때 굴러 떨어지지 않도록 쐐기 등으로 고이고 로프로 단단히 묶어 운반하고 사용로프는 PP밴드나 직물로 된 폭이 넓은 것을 사용한다.

기타공사

집수정

집수정은 연결부위가 수밀성이 있어야 한다.

집수정이 설치 위치는 설계도면을 기준으로 하되 현장여건을 감안하여 실제 우수가 고일 수 있는 지점으로 조정 설치하여야 하며 이때는 사전에 감독관에게 보고를 하여야 한다.

집수정의 뚜껑은 주철 및 스틸그레이팅을 사용하여 한다.

우수받이 및 연결관

우수받이의 종류, 형상 및 연결방법은 설계도에 정해진 대로 정확하게 하며 연결부위가 수밀성이 있어야 한다.

관의 연결부는 반드시 이중벽PE관을 사용하여 연결관이 관 내부로 돌출되지 않도록 하여야 한다.

미리 분기관을 매설할 경우 되메움 전에 매설위치를 트랜싯을 이용하여 좌표로서 기록 유지하여 추후공사 완료 후 설계도에 분기관의 종류, 직경, 위치를 정확히 표시하고 지상에도 분기관의 위치를 표시한다.

우수받이설치 위치는 설계도면을 기준으로 하되 현장여건을 감안하여 실제 우수가 모이는 곳, 건물 내 오수가 발생하는 지점으로 조정 설치하여야 하며 이때는 사전에 감독관에게 보고를 하여야 한다.

U형플륨관

바닥은 평활하게 고르고 로울러나 램머, 진동다짐기 등에 의하여 충분히 다져야 한다.

콘크리트 타설후 마무리면은 천단의 표면이 도로 종단구배에 맞추어 시공하여야 한다.

콘크리트 측구 끝부분을 기존 횡단배구관이나 맨홀등에 연결시키던지 현지 지형에 맞추어 적절한 조치를 취하여야 한다.

오수맨홀

맨홀은 연결부위가 수밀성이 있어야 한다.

맨홀 설치 위치는 설계도면을 기준으로 하되 현장여건을 감안하여 실제 우수가 고일 수 있는 지점으로 조정 설치하여야 하며 이때는 사전에 감독관에게 보고를 하여야 한다.

맨홀의 뚜껑은 주철을 사용하고 수밀성이 보장 되어야 한다.

뚜껑의 내․외면은 실용적인 정원이여야 하고 그 축에 대하여 직각이어야 한다.

성능

시험항목	성 능(N/㎟)	시험온도
정 하 중	200이상	1
인장강도	450이상	1
내력시험	280이상	1

규격 및 모양

형 태	뚜껑 규격(m/m)	용 도
원형 맨홀뚜껑	Ø684	오수맨홀

지하매설물 보호 및 복구공

시공일반

지하매설물 보호는 감독관이 승인한 설계도서에 의하여 시공해야 하며 필요에 따라 감 독관 또는 관리자의 입회하에 시공하여야 한다.

현장에 전담직원을 두고 감독관의 지시사항을 준수할 것이며 항상 점검 및 보수를 하여야한다. 특히, 관류의 이음부, 분기관, 단관부등의 취약 지점은 중점적으로 점검하고 보호공의 보수 및 보강에 유의하여야 한다.

만일 매설물에 이상이 발생하였을 때는 즉시 감독관이나 관리자에게 연락하고 조속히 보수 하거나 관리자가 시행하는 수리에 적극 협력하여야 한다.

특히, 수도관, 하수관, 가스등의 사고에서 2차 재해의 우려가 있을 때는 조속히 교통의 차단, 보행자 및 주변 주거자의 대피유도, 부근의 화기금지 등 필요한 조치를 강구함과 동시에 감독관과 관리자, 관련부서 등에 신속히 보고하여야 한다.

상기사항을 소홀히 하여 발생한 사고는 수급자 부담으로 복구 또는 변상하여야 한다.

대가의 지급은 지장물 보호공 및 복구에 대한 모든 비용을 포함한다.

지장물 이설은 시공 상에서 부득이 이설을 하여야 하는 시설에 대하여 감독원과 협의하고 승인을 득한 후 시행하여야 한다.

그레이팅

그레이팅(25cm)

주 부 재 :ㄷ-형강 ( ㄷ25*75*2t)

보조부재 :평철 (F-25*6t)

간 격 :8.6mm (간격 내경)

ㄷ-형강	평 철	간격(PITCH)

그레이팅(32cm)

주 부 재 :ㄷ-형강 (ㄷ32*75*3t)

보조부재 :평철 (F-32*6t)

간 격 :8.6mm (간격 내경)

ㄷ-형강	평 철	간격(PITCH)

그레이팅(44cm)

주 부 재 :ㄷ-형강 (ㄷ-44*75*3t)

보조부재 :평철 (F-44*4.5t)

간 격 :8.6mm (간격 내경)

ㄷ-형강	평 철	간격(PITCH)

그레이팅(50cm)

주 부 재 :ㄷ-형강 (ㄷ-50*75*3t)

보조부재 :평철 (F-50*6t)

간 격 :8.6mm (간격 내경)

ㄷ-형강	평 철	간격(PITCH)

제작과정 및 제작방법

제작방법은 그레이팅의 작업 방법에 준하며 내구성과 양호한 도금상태를  위하여 CO2 용접으로 제작한다.

배수로 내부의 지저분한 것이 보이지 않도록 그레이팅의 주부재를ㄷ-형상으로 가공하여 작업한다.

그레이팅 주부재 간의 간격은 보행시의 편의와 작은 바퀴도 빠지지 않도록 안전을 위하여 내경 9mm 이내가 되도록 제작한다.(단, 많은 배수량을 요할 시 등 필요에 따라 내경 20mm이내까지 변형이 가능하다)

그레이팅의 상부는 미관과 미끄럼방지를 한다.

ㄷ-형강과 평철이 맞닿는 부분에는 도면과 같은 반타원형의 홈을 내어 측면부위의 배수가 이루어지도록 한다.

그레이팅 주부재의 강도 보강을 위하여 주부재 상부는 도면과 같은 굴곡을 주어 휘어짐을 방지한다.

그레이팅이 소음이 발생하지 않도록 한다.

그레이팅 작업시 작업부위가 깨끗하여야 하며 녹 방지를 위하여 아연용융도금으로 마감한다.

그레이팅은배수가 원활하도록 제작한다.

재료

그레이팅의 사용강재는 SS400으로 하며 KS D 3503에 준하는 재질이어야 한다.

그레이팅의 표면은 방청을 위하여 아연용융도금을 하여야 하며 KS D 8308에 준한다.

재료의 시편은 50평철의 시험으로 대체 할 수 있다.

외형규격

외형규격

뚜껑 및 받침의 외형규격의 허용오차는 ±4mm로 한다.

직각도

뚜껑 및 받침의 대각선 길이의 허용오차는±5mm 한다.

시공 및 설치

그레이팅의 시공방법에 준한다.

받침 받침앵글은 콘크리트 구조물에 단단하게 고정되도록 한다.

받침 받침앵글 양 평면의 수평은 높이가 서로 일정하도록 시공한다.

그레이팅과 받침 앵글의 간격은 한쪽이 5mm이내가 되도록 한다.

그레이팅 설치시 받침 앵글 내부에 묻어있는 이물질을 제거한 후 그레이팅을 설치한다.

그레이팅이 받침 후레임과 단단하게 결합되도록 하여 그레이팅으로부터 발생되는 소음을 방지한다.

모든 공정은 감독관과 협의하여 시행하며, 미리 정해지지 않은 사항의 문제가 발생, 또는 공사내용의 변경 시에는 즉시 협의하여 감독관의 지시에 의하여 시행한다.

그레이팅의 시공이 끝난 후 설치장소 주변을 정리정돈하고 잔재 및 부속물은 깨끗이 청소한다.

공사시방

지하매설물 보호는 굴착에 앞서 선행하여 시행한다.

줄파기

굴착에 앞서 관로 횡방향으로 관로매설 폭만큼 20m 간격으로 줄파기를 하여 지하매설물의 위치 등을 확인하고 이에 따른 대책을 감독관의 지시에 따라 시공하여야 한다.

하수관로

관로 및 맨홀의 누수부분 또는 누수 될 우려가 있는 곳은 미리 굴착하여 사전에 보강조치를 한 다음 공사를 하여야 한다.

오수관 경고테이프 설치

자재

오수관의 색깔은 흑갈색으로 한다.

오수관은 색깔로 구분되도록 하되, 오수관은 상수도, 중수도, 온수 및 가스관과 구별이 되는 흑갈색(5YR 0245)으로 한다. N7 및 5YR 0245등의 색깔은 “실용한국색표집”에 의한다.

시공

오수관에는 관경에 따라 폭 10cm의 갈색테이프 등을 관의 종방향으로 관의 상단에 1줄을 부착 또는 표시한다.

우‧오수관의 식별을 위해서는 근본적으로 흑갈색 오수관을 생산하여 사용함이 바람직하다. 흑갈색 오수관을 사용할 수 없는 경우에는 폭 10cm의 흑갈색(5YR 024비닐테이프 또는 페인트로 관의 상단에 종방향으로 부착하거나 칠한다. 이 때, 관경이 800m/m이상인 관은 관의 좌‧우측 중앙에 1줄씩을 더 표시하여 오수관의 식별이 용이하도록 한다.

관접합

관거의 관경이 변화하는 경우, 또는 2개의 관거가 합류하는 경우의 접합방법은 수면접합 또는 관정 접합으로 한다.

지표구배가 급한 경우는 관경변화에 관계없이 지표구배에 따라 단차접합 또는 계단접합으로 한다.

관을 일직선이 되도록 배열한 후, 관이음부가 정중앙에 위치하도록 설치하여야 한다.

항목	작 업 순 서	설명도
접 합	1) 연결하고자 하는 파이프의 밑에 침목을 댄다.
	2) 고무링을 2번째 골에 끼운다 3) 소켓 내부면과 고무링 부위를 윤활제로 바른다
	4) 소켓을 파이프와 파이프 사이에 고정시킨다.
	5) 연결된 로프에 조임 치구를 장착한다. 6) 파이프와 소켓이 완전히 밀착할 수 있도록 치구로서 조인다. 7) 조립된 파이프 밑의 침목을 제거하고, 바닥에 기초모래를 고르게 포설한 후 매설한다.

시공 검사

경사검사

관거를 부설한 후 되메우기하기전에 매 10 m마다 관거상단을 수준측량 (허용오차 ±3cm)을 하고, 그 결과를 준공검사 서류에 첨부하여야 한다. 아울러 암거 및 800mm 이상 관로에 대해서는 기성 신청 시 내부전경사진을 첨부하여야 한다.

수밀검사

수밀검사를 위한 누수시험은 다음 절차에 의하여 관경별로 50 % 이상에 대하여 실시한다.

관로의 낮은쪽 끝에 마개를 끼우고 버팀목을 설치한다.

높은 쪽의 끝에도 마개나 버팀목을 설치하되 호스나 수직파이프를 용이하게 세울 수 있도록 한다.

기포가 차지 않도록 물로 채운다.

수직시험관에 필요수위까지 물을 채운다.

관로가 포화될 때까지 최소한 30분 동안 방치한다.

30분후 다시 수직시험관의 수두가 1.0m를 유지하도록 물을 채운 후 10분 이상에 걸쳐 수직시험관의 수두 1.0m를 유지 하는데 필요한 물의 양을 측정한다. 수직시험관은 5분 간격으로 꼭대기까지 차야 한다.

관경별 누수 허용수량

관 경(mm)	300	400	450	500	600	700	800	1000
허 용 량 (ℓ/m)	0.05	0.067	0.075	0.083	0.100	0.117	0.133	0.167
검 사 시 간 (분)	10

누수시험결과 합격수준에 미치지 못한 구간은 누수지점을 찾아내어 보수하거나 재시공을 한다.

누수시험구간은 감독관이 선정하되 어느 한 곳에 국한하지 말고 전 지역에 대하여 골고루 실시하여야 한다.

접합 및 내부검사

CCTV 촬영검사

하수관거는 되메우기후 아스팔트포장 시공직전에 전체공사물량에 대하여 육안 또는 CCTV에 대하여 내부검사를 하여야 한다.

1200 mm 이상관은 관내를 육안 검사하여 접합 불량, 오접, 균열 및 누수 등에 대하여 확인하여야 하며, 육안검사가 불가능한 1200mm 미만관의 전량을 CCTV로 검사한다.

CCTV 촬영전 CCTV촬영계획을 수립, 감독관의 승인을 득하여야 하며, 촬영계획대로 시행될 수 있도록 하여야한다.

CCTV 촬영 시행결과를 보고하고 종료 시 TV카메라 (CCTV) 관로조사 보고서를 작성제출 하여야 한다.

보고서 작성 시에는 아래사항을 포함하여 하수도 시공관리 지침의 보고서 작성기준에 의거 작성하여야 한다.

관로이음상태

관로누수상태

관 파손상태

관로침하 및 구배상태

연결관 돌출상태

시공된 관로의 품질상태

관로내 토사 퇴적상태

연결관 연결위치표시 (약도포함)

기타

테이프 내용에서는 다음 사항이 포함되어야 한다.

① 촬영일시 및 구간

② 촬영대상 관경, 관로 및 맨홀번호

③ 촬영연장

당일 촬영한 필름에 대하여 당일 촬영 종료 후 반드시 감독관에게 필름을 제출하여야 하며, 보고서 작성 등을 위하여 화면재생 등이 필요한 경우 감독관에게 필름을 대여받아 시행하되 반드시 감독관 입회하에 화면을 재생하여야 한다.

CCTV 촬영 과오나 준비미비, 고의적 조사누락 등으로 인하여 문제가 발생되지 않도록 철저히 조사하여야 한다.

450 mm 이상관로 촬영 시에는 측시촬영이 가능한 카메라를 사용하여야 하며 불량시공부분이 나타나면 화면분석이 가능하도록 일시정시 촬영을 하여야 하며, 촬영도중 화면이 선명치 못하거나 화면분석이 불가능한 부분에 대하여는 감독관의 승인을 얻어 화면분석이 가능하도록 재촬영 하여야 한다.

CCTV 촬영 후 제출된 테이프와 재시공 또는 보수하여야 할 구간을 도면에 표시하여 감독관에게 제출하여야 하며, 감독관의 확인 후 재시공하거나 보수 하여야 하며, 재시공 또는 보수 후 재촬영 하여 감독관에게 제출하여야 한다.

CCTV 촬영시 화면분석이 불가능하거나 관로시공부실로 인하여 재시공 또는 보수 후 재촬영한 구간의 CCTV 촬영비용은 원인자가 부담하여야 한다.

철근콘크리트공사

일반사항

적용범위

이 시방서는 철근 및 무근콘크리트 구조물공사에 적용한다.

적용규준

KS D 3504철근콘크리트용 봉강

KS D 7017용접철망

KS F 2405콘크리트의 압축강도 시험방법

KS F 2519석재의 압축강도 시험방법

KS F 2526콘크리트용 골재

KS F 2527콘크리트용 부순 자갈

KS F 2530석재

KS F 3110콘크리트 거푸집용 합판

KS F 4009레디믹스트 콘크리트

KS L 5201포틀랜드 시멘트

운반ㆍ보관 및 취급

모든 자재는 운반․보관 및 취급 중 충격이나 과적재로 인한 변형이나 손상이 발생하지 않도록 하여야 하며, 통풍이 잘되고 비나 눈을 피할 수 있는 곳에 자재별로 구분하여 보관하여야한다.

시멘트

시멘트는 방습적인 구조로 된 창고에 품종에 따라 구분하여 보관하여야 한다.

포대시멘트인 경우 지상 30㎝ 이상이 되는 마루에 쌓아 올리되, 13포대 이상 쌓아 올려서는 안 되며, 검사나 반출에 편리하도록 보관하고, 그 사용 순서는 입하순서에 따라야 한다.

보관 중에 약간이라도 굳은 시멘트를 공사에 사용해서는 안 된다. 3개월 이상 창고에 보관한 시멘트는 사용하기에 앞서 시험하여 그 품질을 확인하여야 한다.

시멘트의 온도가 너무 높을 경우에는 그 온도를 낮추어서 사용하여야 한다.

골재

잔골재와 굵은골재 및 종류와 입도가 다른 골재는 각각 구분하여 보관하여야 한다.

골재의 받아들이기, 보관 및 취급에 있어서는 대소의 알이 분리되지 않도록 하고, 먼지나 잡물 등이 혼입하지 않도록 하여야 하며, 굵은골재의 경우에는 골재 알이 부서지 않도록 설비를 정비하고 취급에 주의하여야 한다.

골재 보관 장소에는 적당한 배수시설을 설치하여 표면수가 균일한 골재를 이용할 수 있도록 하여야 한다.

골재는 겨울에 동결되거나 빙설이 혼입되지 않도록 하고, 여름에 일광의 직사를 피할 수 있는 대책을 강구하여야 한다.

재 료

물

물은 깨끗하고 마실 수 있는 물이라야 하며, 기름, 산, 유기불순물, 혼탁물등 콘크리트나 강재의 품질에 나쁜 영향을 미치는 물질의 유해량을 함유해서는 아니 된다.

시멘트

보통포틀랜드 시멘트는 KSL5201에 적합한 것이라야 하며, 공사에 사용되는 시멘트는 단 하나의 상표만을 사용하여야 한다.

골 재

굵은 골재는 KSF 2526, KSF 2527 또는 KSF 2544에 합치하고 깨끗해야하며, 5 mm부터 규정된 최대 크기까지 균일한 입도를 가져야 한다. 최대 크기가 규정되지 않은 경우에는 최대 크기를 20 mm로 한다.

잔골재는 KSF 2526, KSF 2527 또는 KSF 2559에 합치하고 깨끗하며, 6 mm부터 미세한 크기까지 균일한 입도를 가져야 한다.

레디믹스트 콘크리트

본 공사에 사용하는 콘크리트의 종류와 슬럼프 치는 아래 기준을 준수하여야 한다.

강도	굵은골재최대치수 (㎜)	슬 럼 프 치 (m)	슬럼프허용범위 (㎝)	비고
24	25	15	± 2.5
21	25	15	"
21	25	8	"
21	40	8	"
18	40	8	"
10	40	8	"

본 공사에 사용되는 콘크리트는 보통 콘크리트로서 공기량은 4.5 %를 기준으로 하여 허용차는 ±1.5% 이내로 한다.

콘크리트 타설시 타설방법과 기온에 따라 슬럼프 치를 달리한 배합설계를 실시하여야 하며 그 결과를 감독원에게 보고 하여야 한다.

콘크리트 타설시 물타기 행위를 절대로 하여서는 아니 되며 물타기 행위가 적발될시 당해 구조물은 철거 후 재시공 하여야 한다.

레디믹스트 콘크리트를 사용할 경우에는 KS F 4009에 따라야 한다.

공장의 선정

공장은 KS표시 허가공장으로서 재료시험기사 자격을 가진 기술자 혹은 이와 동등이상의 지식, 경험이 있는 기술자가 상주하는 공장을 선정하여야 한다.

공장의 선정에 있어서는 현장까지의 운반시간, 배출시간, 콘크리트의 제조능력, 운반차의 수, 공장의 제조설비, 품질관리상태 등을 고려하여야 한다.

품질에 대한 지정

호칭강도와 슬럼프의 조합

시멘트의 종류

골재의 종류

굵은골재의 최대치수

받아들이기

레디믹스트 콘크리트를 사용할 때에는 콘크리트를 치는데 지장이 없도록 납품일시, 콘크리트의 종류, 수량, 배출장소, 납품속도 등을 생산자와 사전에 의논하고 감독원의 지시를 받아야 한다.

레디믹스트 콘크리트는 치기가 끝낸 콘크리트에 해를 끼치지 않도록 운반하여야 한다.

콘크리트를 부릴 장소는 운반차가 안전하고 원활하게 출입할 수 있으며, 배출하는 작업이 쉽게 될 수 있는 장소라야 한다.

콘크리트 치기 중에도 생산자와 긴밀하게 연락을 취하여 콘크리트 치기가 중단되는 일이 없도록 해야 한다.

레디믹스트 콘크리트를 부릴 때는 재료 분리가 생기지 않도록 하여야 하며, 재료 분리가 생긴 레디믹스트 콘크리트는 치기 전에 거듭 비비기를 하여 사용하여야 한다.

동절기 및 하절기에는 레미콘의 타설 전 온도기준에 유의하여 보온, 방열설비를 하여 운반되도록 조치하여야 한다.

현장타설 콘크리트

본 공사의 사용되는 콘크리트의 강도기준은 다음과 같다.

설계기준강도	골재의 최대치수	시멘트량 (kg)	잔골재량 (㎥)	굵은골재량 (㎥)
fck=21 ㎏/㎠ fck=18 ㎏/㎠	40 40	346 323	0.502 0.470	0.595 0.648

사용골재조건에 따라 현장 배합설계를 실시한 후 감독원의 승인을 받아 배합을 실시한다.

감독원의 지시에 따라 슬럼프 및 공기량 시험을 실시하여야 하며 압축강도는 재령 28일 강도를 기준으로 한다.

철 근

철근은 KSD 3504에 적합한 것이어야 한다.

재료의 저장

시멘트

시멘트는 지상에서 30 cm이상 되는 마루를 가진 방습된 창고에 저장하여 감독원의 검사에 편리하게 배치하고 그 사용은 입하의 순서에 따라야 한다.

포대시멘트는 13포대 이상 쌓아 올려서는 안 된다.

저장 중에 약간이라도 굳은 시멘트는 공사에 사용하여서는 안 된다. 3개월 이상 창고에 저장한 포대 시멘트나 습기를 받을 우려가 있다고 생각되는 시멘트는 사용하기 전에 다시 시험을 하여 그 품질을 확인하여야 한다.

시멘트의 온도가 너무 높을 때에는 그 온도를 낮추어서 사용해야 한다.

골재

잔골재와 굵은골재 및 종류와 입도가 다른 골재를 각각 구분하여 따로 저장하고 먼지, 잡물 등의 혼입을 방지하여야 한다.

중요한 공사에 사용되는 골재는 재료의 분리가 일어나지 않도록 치수에 따라 나누어 저장 하여야 한다.

골재는 표면수가 될 수 있는 대로 일정하도록 저장하여야 한다.

굵은골재를 취급할 때는 크고 작은 것이 분리되지 않도록 하여야 한다.

골재는 빙설의 혼입 또는 동결을 받지 않도록 하여야 한다.

골재는 여름에 직사광선을 받지 않도록 하여야 한다.

철근

철근의 저장은 직접 땅에 닿지 않도록 적절한 보관시설을 하고 창고 안이나 덮개를 하여 녹이 슬지 않도록 저장하여야 한다.

콘크리트 시공

치기준비

콘크리트를 치기 전에 철근, 거푸집, 기타에 관해서 설계도에 정해진 대로 배치되었는지를 확인해야 한다.

콘크리트를 치기 전에 운반장치의 내부에 붙어있는 콘크리트 및 잡물은 깨끗이 제거하여야한다.

콘크리트를 치기 전에 치는 장소를 청소하고, 모든 잡물을 제거하고, 거푸집널판을 충분히 물로 적셔서 감독원의 검사를 받아야 한다.

콘크리트를 칠 때에는 먼저 콘크리트 속의 모르터와 동일한 정도로 배합된 모르터를 바닥면에 깔아야 한다.

터파기속의 물은 콘크리트를 치기 전에 제거하고 터파기 속에 유입하는 물은 새로 친 콘크리트가 유실되지 않도록 제거하여야 한다.

운반

비빈콘크리트는 재료 분리 및 손실이 적게 되는 방법으로 빨리 운반해야 하며 조금이라도 굳은 콘크리트는 사용 하여서는 안 된다.

콘크리트의 운반은 콘크리트 운반용 자동차, 콘크리트 펌프 및 슈트등 중에서 운반거리 및 현장조건에 따라 감독원의 승인을 받은 것을 사용해야 한다.

콘크리트 치기

콘크리트의 작업구획 및 작업구획 내에서 콘크리트를 치는 순서는 감독원의 지시에 따라야 한다.

콘크리트는 거푸집 안에 넣은 후 다시 이동할 필요가 없도록 치기를 하여야 하며 콘크리트는 그 표면이 한 작업 구획 안에서 수평이 되도록 치기를 하여야 한다.

버킷, 호퍼 등의 출구로부터 콘크리트 치기면 까지의 높이는 1.5m 이내로 해야 하며 거푸집의 높이가 높을 경우에는 재료 분리를 방지하고 또 쳐 넣고 있는 층의 상부에 있는 철근 및 거푸집에 콘크리트가 부착하여 경화하는 것을 막기 위하여 거푸집의 중간높이에 투입구를 설치하거나, 연직슈트등을 사용해서 콘크리트를 쳐야 한다.

치기 및 다지기를 할 때 콘크리트의 표면에 상승하는 물이 될 수 있는 대로 적게 되도록 재료의 배합 및 치기 속도를 조절하여야 하며, 기둥의 경우에는 관을 사용하든가 또는 다른 적당한 방법으로 기둥단면의 중앙부로 콘크리트를 치며, 치는 속도는 30분에 1~1.5m정도로 한다.

콘크리트를 치는 도중에 표면에 떠오르는 물은 제거하여야 한다.

한 작업구획내의 콘크리트는 치기를 완료할 때까지 연속하여 치기를 하여야 한다.

슬래브 또는 보의 콘크리트가 벽 또는 기둥의 콘크리트와 연속해 있는 경우에는 벽 또는 기둥의 콘크리트의 수축 및 침하에 대비하기 위하여 벽 또는 기둥의 콘크리트를 친후 2시간 이상 기다려서 슬래브 또는 보의 콘크리트를 치는 것으로 한다. 내민 부분을 가진 구조물의 경우에도 같다.

다지기

콘크리트는 치기 도중 및 치기직후 내부진동기로 충분히 다져서 콘크리트가 철근의 주위 또는 거푸집의 구석구석에 흘러 들어가도록 하여야 한다. 이 경우에 콘크리트가 충분히 흘러 들어가기 힘든 곳에는 치기 전에 콘크리트 속의 모르터와 같은 정도의 배합으로 된 모르터를 먼저 치거나 또는 적당한 방법으로 콘크리트가 확실히 흘러 들어가도록 하여야 한다.

엷은 벽 또는 거푸집의 구조상 내부진동기의 사용이 곤란한 경우 거푸집 진동기를 사용하든가 또는 치기 직후에 거푸집의 바깥부분을 가볍게 두들겨 콘크리트가 잘 가라앉도록 하여야 한다.

진동 다짐에 있어서는 진동기를 아래층의 콘크리트 중에 10 ㎝ 정도 찔러 넣어야 한다.진동기를 사용하여 콘크리트를 치는 경우에는 연직으로 60㎝이하의 일정한 간격으로 찔러 넣는다. 진동다지기는 충분히 하여야 하며, 진동기를 뺄 때 콘크리트로부터 천천히 뽑아서 구멍이 남지 않도록 하여야 한다.

진동기의 형식, 크기 및 수는 한번에 다질 수 있는 콘크리트 량을 충분히 진동 다짐할 수 있는 것이라야 한다.

양 생

콘크리트를 친 후에 고온 또는 저온, 급격한 온도변화, 건조, 하중, 충격 등의 유해한 영향을 받지 않도록 양생하여야 한다.

양생의 방법 및 기간에 관해서는 감독원의 지시를 받아야 한다.

콘크리트의 노출면은 보통포틀랜드 시멘트를 사용할 경우 콘크리트를 친후 5일 이상, 조강 포틀랜드 시멘트를 사용하는 경우에는 3일 이상 항상 습윤 상태를 유지하여야 한다.

거푸집 널판이 건조할 우려가 있을 때에는 거푸집널판에 살수하여야 한다.

막 양생을 할 경우에는 감독원의 지시를 받아야 한다.

표면의 마무리

노출면에서 균일한 외관을 얻고자 할 경우에는 재료, 배합, 콘크리트치기의 방법 등이 변동하지 않도록 하고 시공이음과 신축이음 사이의 콘크리트는 연속해서 치도록 특히 주의하여야 한다.

거푸집 널판에 접하는 면

노출면이 되는 콘크리트 표면은 완전히 모르터로 덥히도록 하여야 한다.

콘크리트 표면에 혹이나 줄이 생긴 경우에는 이들을 매끈하게 따내야 하고, 곰보와 흠이 생긴 경우에는 그 주변의 불완전한 부분을 쪼아내고 물로 적신 후 콘크리트 또는 모르터로 땜질을 하여 매끈하게 마무리 하여야 한다.

거푸집을 떼어낸 후 온도응력, 건조수축 등에 의해 표면에 발생한 균열은 감독원의 지시에 따라 보수하여야 한다.

거푸집 널판에 접하지 않는 면

다지기를 끝내고 소정의 높이와 모양으로 된 콘크리트의 표면은 스며 올라온 물이 없어진 후나 또는 표면의 물을 처리한 후 마무리하여야 한다. 이 경우에 마무리에는 나무흙손이나 마무리 기계를 사용하여야 한다.

마무리 작업 후 콘크리트가 굳기 시작할 때까지의 사이에 일어나는 균열은 탬핑 또는 재 마무리를 하여 제거하여야 한다.

마모를 받는 면

마모를 받는 면의 마무리에는 물-시멘트비와 슬럼프가 작은 콘크리트를 잘다져서 매끈하게 마무리한 후 감독원의 지시에 따라 양생기간을 연장하여야 한다.

마모에 대한 저항을 특히 크게 할 목적으로 특수한 마무리를 할 경우에는 감독원의 지시를 받아야 한다.

모르터 바르기의 마무리

모르터 바르기의 마무리를 하는 경우에는 콘크리트를 친후 1시간 내에 콘크리트 표면에 고르게 바르고 마무리 하여야 한다.

상당히 굳은 콘크리트 표면에 모르터 바르기의 마무리를 하는 경우에는 표면을 정 또는 적당한 공구로 거칠게 하고 물로 충분히 적신 다음에 시멘트 풀을 얇게 바르고, 즉시 모르터를 발라서 마무리하여야 한다.

이음

콘크리트의 이음은 설계도서에 정해져 있는 위치 및 구조를 엄수하여야 한다.

설계도서에 나타내지 않은 이음을 필요로 하는 경우에는 감독원의 지시에 따라 구조물의 강도 및 외관을 해치지 않도록 그 위치, 방향 및 시공방법을 정하고 필요에 따라 장부 또는 홈을 만들든지 또는 보강재를 접속 면에 매설해 두어야 한다.

굳은 콘크리트에 새로운 콘크리트를 쳐서 이을 때에는 치기 전에 거푸집을 다시 조여서 굳은 콘크리트의 표면을 감독원의 지시에 따라 처리하여야 하며, 느슨한 골재알맹이, 품질이 나쁜 콘크리트, 레이탄스 및 잡물 등을 완전히 제거하고 충분히 흡수시켜야 한다.

전항의 작업이 끝나면 즉시 콘크리트를 치고, 이어서 먼저 친 콘크리트와 밀착되도록 다지기를 하여야 한다.

철근

철근의 가공

철근은 설계도서에 표시된 모양과 치수에 일치하도록 재질을 해치지 않는 방법으로 가공 하여야 한다.

철근은 상온에서 가공하는 것을 원칙으로 한다. 할 수 없이 철근을 가열하여 가공하는 경우, 그 작업방법에 관하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

가공에 의해 곧게 할 수 없는 철근은 사용하여서는 안 된다.

철근 절단시 산소 용접기를 사용해서는 안 되며 쉬어컷터나 쇠톱 등의 기구를 사용하여 절단 하여야 한다.

철근의 조립

철근은 조립하기 전에 청소하고 들떠 있는 녹과 기타 철근과 콘크리트와의 부착을 해칠 우려가 있는 이물질은 제거하여야 한다.

철근은 정확한 위치에 고정하고, 콘크리트를 치기 전에 감독원의 검사를 받아야 한다.

철근의 교점(交點)은 0.9mm(20번선) 굵기 이상의 연철선 또는 클리프(clip)로 매어야 한다.

철근과 거푸집널판과의 간격은 모르터 블록, 매달기 철물, 철좌, 플라스틱재 등의 스페이서 (spacer)를 사용하여 정확하게 유지시켜야 한다.

철근을 조립한지 장시일이 경과한 경우에는, 콘크리트를 치기 전에 다시 감독원의 검사를받고 청소하여야 한다.

철근의 이음

인장철근의 이음은 될 수 있는 대로 피해야 한다.

설계도서에 표시되지 않은 철근의 이음을 하는 경우에는 이음의 위치 및 방법을 정하여감독원의 승인을 받아야 한다.

인장철근의 이음은 한 단면에 모이지 않도록 서로 어긋난 위치에 있게 하여야 한다.

철근의 겹이음은 소정의 길이로 겹쳐서 0.9 mm(20번선) 굵기 이상의 연 철선으로 몇 군데를 매어야 한다.

철근이음에 용접이음을 쓸 경우에는 철근의 종류, 지름 및 시공위치에 따라 시공방법을선택하여야 한다. 이음 용접에 종사하는 용접공의 기술검정은 KSB 0885에 따라야 한다.

장래 이음을 위하여 구조물로 부터 노출해 놓은 철근은 손상, 부식 등을 받지 않도록 보호 하여야 한다.

거푸집 및 동바리

거푸집 및 동바리의 조립

거푸집 및 동바리는 소정의 강도와 강성을 가지는 동시에 완성된 구조물의 위치, 모양 및 치수가 정확하게 확보되며, 만족스러운 콘크리트가 되도록 시공되어야 한다.

재료는 강도, 강성, 내구성, 작업성, 쳐 넣는 콘크리트에 대한 영향 및 경제성을 고려하여 선정하여야 한다.

거푸집은 쉽게 조립할 수 있고 안전하게 떼어낼 수 있게 하며, 거푸집널판 및 패늘(panel)의 이음은 가능한대로 부재 축에 직각 또는 평행하며 모르터가 새어나오지 않는 구조로 하고, 필요한 경우에는 거푸집 청소 검사 및 콘크리트 치기에 편리하도록 임시 개구(開口)를 만들어야 한다.

거푸집을 단단하게 죄는 데는 볼트 또는 강봉을 쓰며거푸집 널판의 내면에는 박리제를 발라야 한다.

동바리는 하중을 완전하게 기초에 전달하도록 해야 하며, 조립 및 떼어내기가 편리한 구조로서 이음이나 접속부에서 하중을 안전하게 전달할 수 있어야 한다.동바리 밑동은 침하나 부등침하가 일어나지 않도록 해야 한다.

동바리는 콘크리트를 친후 그 무게에 의하여 생기는 거푸집의 처짐을 추정하여 동바리에 필요에 따라 그만한 솟음을 두어야 한다.

특수 거푸집과 동바리를 사용하는 경우에는 감독원의 승인을 받아야 한다.

거푸집 및 동바리 검사

거푸집 및 동바리는 콘크리트를 치기 전에 감독원의 검사를 받아야 한다.

거푸집 및 동바리는 콘크리트를 치는 동안 그 상태를 확인하여야 하며 이상이 있을 때에는 감독원의 지시를 받아 조치하여야 한다.

거푸집 및 동바리 떼어내기

거푸집 및 동바리는 콘크리트가 그 자중 및 시공도중에 가해지는 하중을 받는데 필요한 강도에 도달할 때까지 떼어내서는 안 된다.

거푸집이나 동바리의 떼어내기는 구조물에 충격 및 진동을 주지 않도록 주의하여 실시하여야 한다.

거푸집이나 동바리의 떼어내기의 시기 및 순서에 관해서는 감독원의 승인을 받아야 한다.

품질관리

콘크리트의 품질관리

콘크리트의 품질검사

시험치에 의하여 콘크리트의 품질을 검사할 경우에는 감독원의 지시에 따라 시험된 전부의 시험치 및 부분적인 연속시험치를 한조로 하여 검토하여야 한다.

압축강도의 시험치는 재령 28일의 압축강도를 만족하여야 한다.

검사결과 콘크리트의 품질이 미흡한 경우에는 감독원의 지시에 따라 배합의 수정, 기계설비의 성능검정, 작업방법 개선 등 조치를 취하여야 하며, 이미 친 콘크리트가 소요의 목표에 달했는지 확인하고 필요에 따라 적절한 조치를 하여야 한다.

공사 개시전의시험

재료의 시험 및 콘크리트의 배합을 정하기 위한 시험은 공사개시 전에 감독원의 지시에 따라 야 하며 기계 및 설비의 성능도 확인, 검사하여야 한다.

공사 중의 시험

공사 중에는 감독원의 지시에 따라 다음의 시험을 하여야 한다.

골재시험

슬럼프 시험

공기량 시험

콘크리트 압축강도 시험

콘크리트 단위중량 시험

콘크리트 씻기분석 시험

기타 시험

양생의 적부와 거푸집의 제거시기, 재하 할 수 있는 시기를 확인하기 위해서는 현장콘크리트와 같은 상태로 양생한 공시체로서 강도시험을 하여야 한다. 다만, 이 시험결과의 강도가 표준 양생을 한 공시체 강도보다 현저하게 작은 경우에는 감독원의 지시에 따라 현장 콘크리트의 양생방법을 개선하여야 한다.

공사완공후의 시험

공사완 공후에 필요한 경우에는 감독원의 지시에 따라 다음과 같은 시험을 할 수도 있다.

콘크리트 비파괴 시험

구조물에서 잘라낸 콘크리트 코어의 시험

구조물의 재하시험

압축강도에 의한 콘크리트 관리

압축강도에 의한 콘크리트 관리는 일반적인 경우에 공시체의 재령 28일의 압축강도를 기준으로 한다. 이 경우에 공시체는 구조물의 콘크리트를 대표하도록 채취하여야 한다.

콘크리트의 관리를 위하여 사용하는 압축강도 시험치는 일반적인 경우에 한 배치에서 취한 3개 공시체의 압축강도의 평균치로 한다.

시험을 위해 재료를 채취하는 시기 및 횟수는 감독원의 지시에 따라야 한다.

시험치에 의하여 콘크리트의 품질을 관리할 경우에는 관리도 및 히스토그램을 사용한다.

공장제품의 시험 및 검사

공장제품의 균열하중, 파괴하중 및 기타의 필요한 성질에 대해서는 실물을 직접 시험하여 확인하는 것을 원칙으로 한다.

실물을 직접 시험하는 것이 곤란한 공장제품의 경우에는 소요의 품질이 판정될 수 있는 공시체를 써서 시험하여야 한다.

공장 제품에는 해로운 균열, 흠, 비틀림, 솟음 등이 있어서는 안 되고 공장 제품의 치수의오차는 소정의 값 이하로 되어야 한다.