문서번호	기반시설과-6366
결재일자	2021. 9. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	기반시설과장	시설부장
송하연	라철흠	09/24 박상보
협 조
	주무관			정창수

설계의견 및 공사현장 실정사항(8차) 검토보고

2021. 09.

한강사업본부

(기반시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

설계의견 및 공사현장 실정사항(8차) 검토보고

『한강변 보행네트워크 조성공사』연결거점 등 설계(시공) 보완에 대한 설계사 검토의견 수용과 8거점 조성 등 현장 여건과 부합하지 않는 공종을 공사 현장에 맞게 조정함으로서 본 공사 품질 향상에 기여코자 함.

1		추 진 배 경

◯ 연결거점 등 설계(시공)보완 요청회신(기반시설과-5804호, 2021.8.30.)

◯ 공사현장 실정보고(8차) 승인 요청(공사감독3처-9257호, 2021.9.17.)

2		공 사 개 요

◯ 건    명 : 한강변 보행네트워크 조성공사

◯ 위    치 : 여의나루역 ∼ 동작역 간 수변 보행로 일대

◯ 규    모 : 보행로 환경개선 6개구간 5.6km, 연결거점 조성 9개소

◯ 시행부서 : 한강사업본부(정책부서 도시공간개선단)

◯ 설 계 사 : 랩디에이치 조경설계사무소 대표 최영준

◯ 공사기간 : 2020. 12. 9. ~ 2021. 12. 31.

◯ 공사금액 : 5,757백만원(도급비 4,677백만원, 관급비 1,080백만원)

- 도급비 총차 4,677백만원(1차 3,000백만원, 2차 855백만원, 3차 822백만원)

◯ 도 급 자 : 에이스건설주식회사 대표 권보식 외 1

◯ 감 독 자 : 서울시설공단 공사감독3처

3		설계의견 검토

구 분	설계사 의견	검 토 결 과	비 고
시 설 물 및 식 재	1거점 연접 노후데크 보수방안 기존 노후데크 철거 후 콘크리트블럭 설치	한강 침수시 유속에 의한 유실 및 부패 방지와 관리가 용이토록 콘크리트 마감 노후 목재 철거 : 0 → 155.84㎡ 콘크리트 타설 : 0 → 155.84㎡
	전망휴게쉼터2·3간 동선 연결로 인한 식재 수량 변경	녹지면적 감소에 따른 식재 수량 변경 수크렁 : 45본 → 30본 낙상홍 : 50주 → 30주 줄사철 : 210본 → 0
	5거점 그늘막 설치 3개소	그늘막 설치시 구조검토 반영하여 보완 기초 고정 및 지붕재질 검토 PC콘크리트블럭 단차이 발생으로 편안한 휴식공간 활용도 검토	설계보완
	P4구간 노량대교 하부 계단보수 기존 합성목재 철거 후 석재마감	시공 상세도 및 자재공급 검토 사비석은 압축강도 저하로 제외 필요 포천석, 고흥석 등 관급자재 공급 검토 (관급자재 공급 불가시 사급자재 검토) 시공상세 설계도면 필요	설계보완
	P5구간 벽면 브라켓 구조보완 구조 보완 불필요	구조계산의 권고사항을 충족하는 구조임으로 추가 구조보강 불필요
	안전휀스 설치 관련 기반 검토 기반 보완 불필요	콘크리트두께 20cm 이상으로 기반 보완 불필요
	전망휴게쉼터1-1, 1-2 그늘막 캐노피 섳치 지붕을 덮지 않는 캐노피 구조 설치	캐노피 구조물 설치에 따른 구조검토 필요와 실효성 검토 구조검토 및 시공상세 필요 캐노피 기둥이 조망권 가려 포토존 곤란 전망데크는 동적인 공간으로 체류시간 최소화 하여 이용률(회전율) 높일 필요 지붕구조 설치 시 공작물로 볼 수 있어 위법(단, 의자 및 자전거거치대는 필요)	캐노피 설치제외, 의자 및 자전거거치대 필요
	P1구간 띠녹지 수종 변경 생육환경 고려 및 민원발생 최소화 필요	생육곤란 및 꽃가루날림목 수종 변경 및 사면보호 양버들 : 8주 → 0 귀롱나무 : 3주 → 0 이팝나무 : 0 → 15주 물억새 : 1104본 → 0 수크렁 : 1027본 → 1100본 털부처곷 : 1540본 → 0 석잠풀 : 957본 → 0 잔디(평떼) : 225.5㎡ → 568.43㎡ 잔디보호매트 : 0 → 568.43㎡	관급자재 (잔디보호매트) 발주
	P1∼P2구간 도막포장	불량 노면 아스콘 포장으로 인한 도막포장 필요 도막 : 0 → 2,505.78㎡
	노량대교 하부 보행자 벤치 설치 20개 설치	노량대교 하부 공지는 침수시 상수도사업본부 잔토야적장으로 활용되고 있고 침수 위험도 높아 설치 곤란	설치제외
	8거점 석재종류 변경 포천석 → 황등석	해당 규격의 포천석 공급지연으로 황등석으로 대체 포천석 : 110개소 → 0 황등석 : 0 → 110개소 포천석통석포장 : 10개소 → 0 황등석통석포장 : 0 → 10개소

4		실정보고 검토

구 분	현황 및 문제점	검 토 결 과	비 고
시 설 물 및 식 재	레인가든 사고석 수로 시공 통행 장애로 인한 민원 발생 우려	보행자(자전거) 통행에 지장을 주는 사고석 수로 제외 사고석수로A : 240.71m→185.71m
	노량대교 조류방지망 설치 점검 곤란 및 미관 저해	관리부서 등 의견 반영하여 조류방지망 제외 조류방지망 : 1485㎡ → 0	설치제외
	P2구간 아스콘포장경계 스틸엣지 재료분리 발생하지 않음	아스콘포장경계 곡선부 스틸엣지는 표층만 포장함으로 엣지 불필요 스틸엣지D : 283m → 0	설치제외
	P2구간 녹지대 초화류 조정 생육환경 및 유지관리 고려 필요	녹지에 적합한 수종 및 수량으로 변경 왕벚나무(B12) : 29주 → 0 왕벚나무(B10) : 0 → 29주 애란 : 1600본 → 0 삼색조팝 : 580본 → 0 맥문동 : 4760본 → 11800본
	P1∼P6구간 산책로 및 화장실 주변 스틸그레이팅 설치구간 보완 여성 하이힐 이용자 통행불편 초래	이용자 안전을 고려한 디자인그레이팅으로 변경 디자인그레이팅(400×50) : 0 → 10m 디자인그레이팅(300×50) : 0 → 6m 디자인그레이팅(200×25) : 0 → 13m
	P2구간 인조화강석 맨홀 교체 노후되어 안전사고 발생 우려	안전사고 예방을 위하여 노후 인조화강석 맨홀 덮개 교체 인조화강석 맨홀덮개 : 0 → 2개
	3거점 계단 옆면 옹벽 설치 계단 옆면 노출로 인한 토사유실	안전사고 예방과 토사유실 방지를 위한 옹벽 설치 옹벽2 : 0 → 13.3m
	7거점 운동시설 설치 민원 운동시설 설치 관련 민원 발생	민원 관련 녹지관리과 의견 반영에 따른 물량 조정 운동시설물 : 0 → 2개 현무암판석(잔디) : 0 → 30㎡ 털수염풀 : 918본 → 0 노루오줌 : 130본 → 0 호스타 : 61본 → 0 나무수국 : 20주 → 0 가막살나무 : 30주 → 0
	8거점 파고라 설치 민원 및 조성축소에 따른 물량 조정 기존 파고라 철거에 따른 민원 발생 및 조성면적 축소에 따른 식재물량 등 조정 필요	파고라 설치 민원 및 조성면적 축소에 따른 물량 조정 파고라 : 0 → 1개소 현무암판석(잔디) : 0 → 27㎡ 왕벚나무(B12) : 39주 → 0 왕벚나무(B10) : 0 → 5주 팽나무 : 5주 → 1주 소나무 이식 : 10주 → 0 조팝나무 : 0 → 200주 맥문동 : 0 → 1260본 잔디(평떼) : 0 → 45㎡ 잔디블럭 : 518.54㎡ → 35㎡
	8거점 안전휀스 타입 변경 기초부 현장여건에 맞지 않음	현장여건에 맞는 타입으로 변경 안전난간B : 19.5m → 0 난간 : 0 → 19.5m
	P2구간 벚꽃길 우배수시설 설치로 인한 노출사면 발생	경관 향상을 위해 잔디 식재 잔디(평떼) : 0 → 250㎡

5		개략공사비 반영

구 분	공 사 비(원)			증 감	비 고
	당 초	설계변경 금액	금 회(8차)
공 급 가 액	4,252,201,364	4,463,591,919	4,374,609,091	- 88,982,828
부 가 세	425,220,136	446,359,191	437,460,909	- 8,898,282
합 계	4,677,421,500	4,909,951,110	4,812,070,000	- 97,881,110
관 급 자 재	1,068,529,638	1,100,619,205	1,121,114,746	20,495,541
총 계	5,745,951,138	6,010,570,315	5,933,184,746	- 77,385,569

※ 상기 금액은 개략공사비로서 차후 설계변경 시 증(감) 등 변경 될 수 있음.

6		검 토 의 견

◯ 설계의견 검토

- 위 설계의견 중 5거점 그늘막 설치 및 P4구간 계단보수는 상세도면 등 보완하여 추진코자 하며, 노량대교 하부 보행자 벤치는 상습 침수구간임을 감안하여 설치 제외코자 함.

- 한강철교 전망휴게쉼터1-1, 1-2 그늘막 캐노피 설치는 일조 방향에 그늘이 설치되기 어렵고, 구조검토를 다시 고려해야 하는 문제를 감안하여 설치 제외코자 하나, 휴게쉼터 내 이용자를 고려한 의자 및 자전거거치대는 필요할 것으로 판단되며, 그 외 사항은 설계사 의견과 감독자 검토를 반영코자 함.

◯ 실정보고 검토

- 위 실정보고 검토내용 중 노량대교 조류방지망 설치 및 P2구간 아스콘포장경게 스틸엣지는 관리부서 의견과 현장여건을 고려하여 설치 제외코자 하며, 그 외 사항은 감독자 검토를 반영코자 함.

7		행 정 사 항

◯ 설계의견 및 실정보고(8차) 검토사항 설계반영 회신(서울시설공단)

붙임   1. 관련 공문서  1부.

2. 공사현장 실정보고  1부.

3. 개략공사비 산출내역  1부. 끝.