				★ ◎
문서번호	기계사업부-2962			부 원			기계사업부장				에너지기술사업처장
보존기간	20년											09/28
				이상모			박상현				허원
결재일자	2021.09.28
공개여부	비공개(5)			협조	부 원			황재성		부 원			박준용			전기사업부장			최용석
일상감사	대상아님
세곡2지구 도시형생활주택 소방공사
세곡2지구 도시형생활주택 소방공사 준공정산 보고
		서울주택도시공사
(건설사업본부 기계사업부)

세곡2지구 도시형생활주택 소방공사

준공정산 보고

우리 공사에서 시행한「세곡2지구 도시형생활주택 소방공사」와 관련, 관련법령에 따른 보험료, 고용개선지원비 및 물가변동 등 정산사항에 대하여 아래와 같이 보고 후 정산하고자 합니다.

1				관련근거

□ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제8절 보험료 사후정산 등

□ 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」제8조 목적 외 사용금액에 대한 감액 등

□  서울시 건설혁신과-8427(2020.06.29.) “고용개선지원비 공사원가 반영 및 집행 매뉴얼 시행 알림”

□  ‘세곡2지구 도시형생활주택 소방공사’ 준공정산 검토보고(세움 제2021-09-2호, 21.09.17.)

2				공사개요

구 분	세곡2지구 도시형생활주택 소방공사
위 치	강남구 율현동 167번지 일원
공사기간	2020.07.01.* ~ 2021.07.30. *실착공기준
공사규모	1개동 87세대(지하1층 ~ 지상5층)
시 공 사	㈜리더스신화
감 리 사 (비상주)	㈜세움이앤씨건축사사무소
공사금액	313,977,000원 (기계: 182,531,000원, 전기: 131,446,000원)

3				정산현황

○ 총괄 정산                                                         (단위 : 원)

구 분	소방공사(기계, 전기)				비 고
	당 초	변 경	증 감 금 액
직 접 공 사 비	206,186,216	206,186,216		-
간 접 비 등	100,303,784	80,208,462	감)	20,095,322
물 가 변 동	7,487,000	6,875,322	감)	611,678
합 계	313,977,000	293,270,000	감)	20,707,000

○ 간접비 등 정산                                                     (단위 : 원)

구 분	소방공사(기계, 전기)
	당 초	변 경	정 산 액		정산 확인서류
산업안전보건관리비	6,876,958	2,180,575	감)	4,696,383	기술지도 계약서 안전장구 구입비 거래명세서 등 실사용 내역 확인이 가능한 서류
퇴직공제 부금비	3,361,305	925,000	감)	2,436,305	건설근로자 공제회 공제부금 납부확인서 월별 피공제자별 근로일수 및 공제부금 납부내역서
국민건강 보험료	4,873,893	993,550	감)	3,880,343	국민건강보험공단 사업장 보험료 납부확인서 월별 보험료 납부확인서
노인장기요양 보험료	499,573	113,260	감)	386,313
국민연금 보험료	6,576,469	1,530,550	감)	5,045,919	국민건강보험공단 사업장 보험료 납부확인서 월별 국민연금보험료 결정내역서
고용개선 지원비	6,943,913	5,858,001	감)	1,085,912	서울시 One-pmis 시스템 출력 노무비 청구명세서 전자카드 근무 시스템 렌탈 계약서
기 타	71,171,673	68,607,526	감)	2,564,147	산재, 고용보험료의 경우 근로복지공단 가입 및 완납증명서로 가입여부 확인
총 계	100,303,784	80,208,462	감)	20,095,322
※ 기타 항목: 사후정산 대상 외 항목

○ 물가변동 정산                                                      (단위 : 원)

구 분	소방공사(기계, 전기)
	당 초	변 경	정 산 액
물 가 변 동(1회)	7,487,000	6,875,322	감)	611,678

4				검토의견

□ 준공정산내역을 검토한 결과, 관련규정 및 근거가 적정하여 상기와 같이 「세곡2지구 도시형생활주택 소방공사」의 준공 정산금액을 확정하고 계약부에 잔여 유보금 지급요청

※ 보험료 및 안전관리비 등 정산 자료일체(다운로드 비밀번호 1234) : 소방공사

붙임  1. '세곡2지구 도시형생활주택 소방공사' 준공정산 검토보고 1부

2. 준공정산내역서(세곡2지구 도시형생활주택 소방공사) 1부

3. 준공정산 합의서(세곡2도생 소방공사) 1부

4. 정산서류 합본(별첨) 1부.  끝.