등록번호

기후환경과-34307

주무관

녹색에너지팀장

기후환경과장

환경생활국장

등록일자

2021.10.5.

신여욱

김정화

석도현

10/06

이진구

결재일자

2021.10.6.

공개구분

부분공개(5)

협  조

의정팀장

권선상

주무관

왕태봉

주차관리팀장

유선환

주무관

강승균

2021년 신재생에너지 지역지원사업 공공건물 태양광발전시설 설치계획

서 대 문 구

기후환경과

2021년 공공건물 태양광발전시설 설치계획

공공건물에 친환경에너지원인 태양광 발전설비를 설치하여 증가하는 전력수요에 대응하고 온실가스 배출량을 저감하는 등 우리구 에너지자립률을 향상시키고 민간부문의 신재생에너지 보급을 활성화 하고자 함.

Ⅰ

추진 근거

2021년 공공시설 신재생에너지 지역지원사업 예산 교부 알림

.

(서울시 녹색에너지과-9101, 2021.04.12.)

❍ 2개소(30kW) 45,029천원 교부(국비 : 25,978천원, 시비 : 19,051천원)

Ⅱ

사업 개요

사  업  명  : 2021년 공공건물 태양광발전시설 설치계획

사업내용 : 공공건물에 태양광 발전시설을 설치하여 전력수요를

대체하고 온실가스 감축에 기여하고자 함

설치장소 : 서대문구의회, 남가좌2동제2공영주차장

사업규모 : 총 8천만원

Ⅲ

세부추진계획

사업기간 : 2021. 10월 ~ 2021. 12월

설치위치 및 용량 : 2개소 30kW 시설 설치

시 설 명	설치가능면적	설치용량	월평균 예상발전량	전기사용량 대비 절감률
서대문구의회 (연희로36길49)	200m2	20kW	1,837kWh	9%
남가좌2동 제2공영주차장 (명지대5길 10-8)	85m2	10kW	918kWh	25%

설치 위치 및 설치 시설 사진

❍ 서대문구의회

	<구의회 옥상>

❍ 남가좌2동제2공영주차장

사 업 비 : 80,730천원(국25,978, 시19,050, 구35,702) ※국‧시‧구 매칭사업

단위 : 천원

사 업 명	계	태양광 설치비				설계용역 및 구조안전진단	전기공사	전기감리 용역비
		소계	태양광 모듈	지지대	모니터링 설비
2021년 공공건물 태양광 발전시설 설치	80,730	66,000	51,000	10,000	5,000	3,730	6,000	5,000

세부추진일정

❍ 태양광 설계용역 및 구조안전진단 : 2021. 10월

- 용역범위 : 태양광 설계용역 및 발전시설 설치에 따른 구조물의 안전성 검토

- 용역비 : 3,730천원

- 계약방법 : 수의계약(지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제25조제1항제5호)

❍ 태양광 발전설비 물품 구매 : 2021. 10월

- 구매물품 : 태양광발전장치, 태양광발전장치 지지대, 모니터링 시스템

- 구매방법 : 조달구매(3자단가계약) 및 수의계약

- 선정기준 : 태양전지의 발전효율이 우수하고 부실시공 방지 및 사후관리를 위해 태양광 설비 제작이 가능하고 건물 경관을 고려한 디자인 시공경력이 있는 업체를 선정

※ 태양광 구조물 구조진단, 설치완료 신고(사용전 검사 등) 및 계통연계 포함

❍ 태양광 발전설비 설치공사 시행 : 2021. 10월

- 설치방법 : 물품조달 회사에 전기 공사용역 발주하여 설계, 시공(전기공사일체), 시운전, 사용전 검사 등 준공{기타 부대공사(방수) 등}까지 전 공정 책임시공 조건   ◇ 태양광 구조물 구조진단, 설치완료 신고 포함

- 감리업체 선정

◇ 용역범위 : 태양광 설치공사에 따른 전반적인 시공관리

(공정관리, 품질관리, 자재관리, 안전관리 등)

◇ 용 역 비 : 5,000천원

◇ 계약방법 : 수의계약(지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제25조제1항제5호)

❍ 태양광 발전설비 시운전 및 준공 : 2021. 11월

- 사용전 검사 : 시운전 종료 후 (한국전기안전공사)

- 준공 및 관리이전(서대문구의회, 교통관리과)

친환경에너지원을 공공부문에 적극 보급하여 민간부문 활성화 촉진

Ⅳ

기대효과

연간 약 33,069kW 전력생산으로 전기요금 절감

※ 30kW/h × 3.02h/day × 365day/year = 33,069kW/year

Ⅴ

행정사항

서대문구의회, 교통관리과

❍ 디자인 태양광 발전시설 설치 공사 시 설치 위치, 공사일정 등 협의

❍ 태양광 발전설비 설치완료 후 시설물 관리이전 및 유지관리 협조.  끝.