공 사 설 명 서

1. 공 사 명: 한천로166길 주변 등 2개소 노후하수관로 정비공사(비굴착)

2. 위    치: 한천로166길 주변

3. 목    적

○ 노후·불량한 하수관로를 정비하여 구조물의 내구성 및 안정성을 확보하고, 누수 및 불명수 유입을 예방함으로써 하수도 시설물로 인한 안전사고를 사전에 예방하고 원활한 배수체계를 재정비하여 침수피해 해소 및 관거수명을 연장하기 위함

4. 총공사비 : 금722,000,000원

5. 사업개요

○  사업기간: 2021. 10. ∼ 2022. 3.

○  사업규모: 비굴착 전체보수 D=450~750mm, L=820m

6. 설계변경 조건

- 본 공사는 조사 당시 수집된 자료에 의거 설계된 것인 바, 착공후 변경사항이 발생되었을 때에는 현장의 현황에 맞추어 변경할 수 있다.

1) 물량 변경이 있을 때

2) 공법 변경이 불가피할 때

3) 발주처의 형편상 설계변경을 필요로 할 때

4) 단가 변경이 있을 때

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 및 같은법 시행령 제73조, 제74조, 제75조에 의거

5) 기타 감독관이 필요하다고 인정할 때

- 설계변경 사유 발생시는 발주기관과 계약상대자가 상호협의하여 결정한다.

7. 공사기간 변경사항

- 본 공사 착공일은 계약일로부터 3일 이내로 하고 공사기간은 착공일로부터 180일이며  다음과 같은 경우에는 기간을 변경(연장)할 수 있다.

1) 공사시행 중 천재지변 또는 한파 등으로 인하여 작업이 불가능하였을 경우

2) 시행청의 지시에 의거 작업을 중단하였을 경우

3) 지장물 철거 ․ 이설 등으로 인하여 시공이 곤란한 경우

4) 민원발생 등으로 인하여 시공이 곤란한 경우

5) 기타 특수한 사정으로 인하여 공사기간 연장이 필요한 경우

8. 기타사항

- 하수관거 정비공사 품질관리자(품질관리자가 없는 경우 현장 참여기술자중 1인) 및 기능공(하수관거 부설 배관공) 전원은 한국상하수도협회에서 시행하는 하수관거 정비공사 시공 전문기술 교육과정을 이수하여야 하며, 착공시 이수증 사본을 제출하고 공사 시행시 이수증을 소지하여야 한다.

- 단, 교육기관 일정 등으로 착공전 교육이수가 불가능한 경우 교육이수 계획서를 제출하고 공사를 시행하여야 하며, 착공 후 3개월 이내에 교육을 이수하여야 한다.

9. 예정공정표

공 종	수량	착공후 30일			착공후 90일			착공후 180일			비고
비굴착보수공	1식
부 대 공	1식