문서번호	설비부-14422
결재일자	2021. 10. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	열빛총괄과장	설비부장
박성수	장병선	10/12 김호성

『마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 기계공사』

관급자재 빌딩자동제어장치 실정보고 검토보고

2021. 10.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 기계공사』

관급자재 빌딩자동제어장치 실정보고 검토보고

건설사업관리단이 제출한『마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 기계공사』관급자재 빌딩자동제어장치의 주관부서 요청사항에 의한 건축평면변경에 따른 실정보고 사항을 검토하고 보고드림.

□ 공사개요

○	사업명	:	마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 기계공사
○	공사규모	:	지하4층 ~ 지상8층, 연면적 21,628.58㎡
○	공사기간	:	’18.10.22. ~ ’21.10.20.
○	계약금액	:	11,446백만원(도급 7,994, 관급 3,317, 이설비135)
○	건설사업관리단	:	㈜토문엔지니어링건축사사무소, ㈜희림종합건축사사무소
○	계약내역

- 계약상대자 : 이에스콘트롤스(주)(대표 김영준, 조제근)

- 계 약 금 액 : 금828,887,200원(총차)

- 납 품 기 한 : 2021.10.20.

□ 관련근거

○ 관급자재 빌딩자동제어장치 실정보고[토희마CM-781(’21.10.8.)호]

□ 검토내용

○ 변경사유

- 주관부서요청사항[서남권사업과-5587(2020.6.22.)호]에 의한 건축평면변경에 따른 FCU 제어밸브 및 배관·배선 물량증감

▶ 지상 3층 업무공간 12개소→30개소, 지상 4층 업무공간 12개소→17개소 등 냉난방 제어 구획 세분화

○ 주요변경사항

구분	변경내용	금액증감 [단위 : 원]
*	*	**********
**** ****	************************ ************************ ***********************	**********
*** *******	*************************** ****************************************	**********
***** *******	***************************** *****************************	**********
*************	****************************** *****************************	**********
***** *****	******************************	**********

○ 계약변경 내역

[단위 : 원]

구분	변경전	변경후	증감	비고
총차	***********	***********	**********	**** *****
1차	**********	**********	*	*
2차	***********	***********	**********	*

○ 건설사업관리단 검토의견

- 관급자재 빌딩자동제어장치의 설계변경을 검토한 결과, 변경 사유 및 산출근거가 타당하고 증감물량의 단가는 계약단가를 적합하게 적용하였음.

□ 검토결과 및 조치사항

○ 건설사업관리단이 제출한 실정보고 사항을 검토한 결과 변경 사유 및 변경근거, 단가적용 등의 사항이 타당하므로 승인하고 총무부에 설계변경 요청하고자 함.

붙임  1. 검토의견서 및 합의각서 1부.
2. 주관부서 평면변경 의뢰 공문 1부.  끝.