코로나19바이러스 감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!

	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	사천 빗물펌프장 관련 서울시 하천관리과 공정회의 결과 보고

1. 우리 공사에서 시행 중에 있는 사천 빗물펌프장 건설과 관련, 서울시 하천관리과 공정회의 결과를 아래와 같이 보고합니다.

-  아    래  -

가. 회의개요

〇 일  시 : 2021.10.08.(금) 10:00 ~ 11:00

〇 장  소 : 서울특별시 하천관리과

〇 참석자 : 서울특별시 하천관리과 치수설비팀장 및 담당주무관

SH 단지토목부, 건축공사부, 기계사업부 담당자, 사천 빗물펌프장 토공사 감리단장 및 현장대리인

〇 안  건 : 사천 빗물펌프장 건설 관련 공정 회의

나. 회의내용

〇 하천관리과 질의사항

구분	하천관리과	SH	비고
1	토공사 시행시 겹침주열말뚝과 터파기를 동시에 시행 할 순 없는지? 겹침주열말뚝 시공 기간이 오래 걸리는 이유는 무엇인지?	공사현장이 매우 협소하여 겹침주열말뚝 및 터파기 장비(천공기, 굴삭기, 믹서기, 덤프차량 등)가 동시에 이동 및 시공 할 수 없는 현장 여건이며, 겹칩주열말뚝이 일반 CIP보다 시공효율 낮고, 부지내 폐립폐기물 발생 처리 등에 따라 공기가 더 소요되었으나, 조속히 토공사 추진 예정
2	2022년 우기철을 대비하려면 2022년 6월(인입관로 완료시기)까지 흡수정 완료하여 양수기 사용 등을 통해 강제 펌핑하는 방안(양수기 용량 등은 하천관리과에서 검토 가능)이 필요해 보이는데 건축에서 2022년 6월 흡수정 완료가 가능한지?	절대공기상 2022년 6월 흡수정 완료는 어려우며, 빨라야 2022년 9~10월 완료 가능할 것으로 보이나, 흡수정 사용시 구조물 침수에 대한 안정성 검토, 하자처리, 공사비 증가 등 여러 문제점 발생이 예상됨

구분	하천관리과	SH	비고
3	현재 사천 빗물펌프장 관련 공사가 여러모로 문제점이 발생되는 바, 건축공사 착공 이전이더라도 감리단 및 시공사에 도면 검토를 받아 실 공정에 지연이 없도록 조치 요청	착공 이전에 감리단 및 시공사에 도면 검토 지시는 민감한 사안으로 내부적으로 검토하여 처리 예정임
4	당초 목표인 2022년 6월말 빗물펌프장 가동 불가에 대한 내용을 SH에서 시장 보고하여 주시기 바라며, 보고 전 하천관리과와 일정 및 내용에 대하여 협의 후 진행하여 주시기 바람	당초 목표인 2022년 6월말 빗물펌프장 가동 불가에 대하여 시장 보고 시 하천관리과와 협의 후 보고하겠음
5	2022년도 예산 확보를 위해 공종별 발주 예정인 자재, 용역 및 공사비 등을 정리 및 협의하여 주시기 바라며, 향후 공정보고 시에는 공공주택과와 같이 할 예정으로써, 건축공사 마감(토목, 전기, 기계 포함)까지 포함하여 총괄 보고 하시기 바람	2022년 예산 및 사업비에 대하여 공공설계부에서 총괄로 작성 중에 있어 공정별 예산액을 포함하여 추후 협의 예정이며, 향후 공정보고시 총괄 보고하겠음

〇 SH 질의사항

구분	SH	하천관리과	비고
1	2022년 우기철 건축구조물 공사 품질확보와 조속 공정추진을 위해 인입관로를 통한 방류를 차단해 줄 수 있는가?	2022년 우기철은 건축구조물 공사가 완료되지 않은 시점으로 인입관로를 통한 방류를 기본적으로 하지 않을 것이나, 우기철 홍수 발생시 상류부의 빗물펌프장 부하가 걸린다면 방류가 불가피 함

다. 향후계획

〇 상기 회의 내용에 따라 토공사는 조속히 추진하고, 시장 보고 및 향후 공정보고 등은 내부 회의 및 하천관리과 협의를 통해 추진

붙임  사천 빗물펌프장 관련 공정 회의 자료 1부.  끝.

부 원						단지토목부장				건설사업처장			건설사업본부장	전결	10/13
		성준석						백용철			조대원			김영수
협조자	건축공사부장		이철규				기계사업부장	박상현

시행			단지토목부-3173				(2021.10.13)			접수				()
방침번호			본부장 방침 제251호
우	06336			서울시 강남구 개포로 621								/	www.i-sh.co.kr
전화		02-3410-8951			전송	02-3410-8944		/	illude00@i-sh.co.kr					/	비공개(5)