문서번호	설비부-14683
결재일자	2021. 10. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
표창구		代박희준	10/18 김호성
협조

「동북권 아동청소년 예술교육센터 및 강북구 종합체육센터 건립 기계설비공사」

관급자재(	지열시스템) 납품기한 연기 검토보고

2021. 10.

도시기반시설본부

(설비부)

「동북권 아동청소년 예술교육센터 및 강북구 종합체육센터 건립 기계설비공사」

관급자재(	지열시스템) 납품기한 연기 검토보고

우리부에서 추진중인「동북권 아동청소년 예술교육센터 및 강북구 종합체육센터 건립 기계설비공사」에 대한 관급자재(지열시스템)의 납품기한을 연기코자 보고드림.

1		관련근거

□ 관급자재 납품기한 연장 승인요청 : 동북권CM 제21-193호(2021.10.15.)

2		공사개요

□ 공 사 명 : 동북권 아동청소년 예술교육센터 및 강북구 종합체육센터 건립 설비공사

□ 공사기간 : 1차 2020.03.20.~2021.12.31(총차 2020.03.20.~2022.11.19.)

□ 도 급 비 : 1차 100,545,000원(총차 2,016,095,580원)

□ 시 공 사 : ㈜두형엔지니어링 외 1사

□ 감 리 사 : ㈜근정

3		검토내용

가. 납품기한 연기 사유

□ 선행 토목공사 지연에 따른 납품자재(설치)시기 미도래

나. 관급자재 계약현황 및 납품기한 연기내용

구분	계약번호	품 명	계약자	납품기한		비고
				당초	변경
*	***********	*****	*****	***********	***********	****
**				***********	****

※ 관급자재 수량 및 금액 변동 없음

□ 납품기한 연기 귀책소재 : 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

4		조치계획

□ 건설사업관리단의 의견과 같이 지열시스템(1차) 납품기한을 연기함이 타당하다고 판단되므로 총무부로 변경계약 의뢰하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙 임  관급자재 납품기한 연장 승인요청 문서 1부.  끝.