코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	강남구청장(치수과장)
(경유)
제목	서운로 일대 저지고지수로 정비사업 지장물 이설 관련 검토의견 회신

1. ****치수과-22429(2021.10.18.)호와 관련입니다.

2. 강남역 일대 침수피해 예방을 위해 시행중인 *****외 1개소 하수암거 신설공사*****」와 관련하여 지장물(송전선로) 이설비 과다 발생에 따른 추가 예산 확보 가능여부에 대한 검토의견을 회신하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 사업개요

○ 공사위치 : ******************

○ 사업규모 : 하수암거 개량 및 신설 □1.2~2.5×1.5~2.0m, L=678m

하수관로 개량 D900㎜, L=86m

○ 사업기간 : 2020. 3. ~ 2022. 6. 30.

○ 총사업비 : *********

○ 위 치 도

*********

나. 현안사항

○ *********** 횡단구간 지장물(한전송전선로) 이설 협의결과

- 이설비용 대폭 증가(당초 30.6억원 대비 약 100~120억원 추가 발생)

- 지장물 이설에 약 12~24개월이 소요되어 공사기간 연장 필요

- 지장물 관리기관에서는 송전선로 이설에 어려움이 있어 다른 방안 요청

○ 자치구 설계변경 검토 결과

- 송전선로를 이설하지 않을 경우 당초 설계된 ******** 적용 불가

· 현장확인 결과, 송전선로과 ***** 루프강관이 저촉되어 시공 불가

- 송전선로 이설 불가로 하수암거 단면 조정 및 설계변경(안) 검토

· (당초) 2.0m×2.0m×1련 → (변경) 2.8m×1.5m×1련

· (당초) BTR 추진공법(특허) → (변경) 현장 적용가능한 비굴착 범용공법

다. 검토의견

○ 당초 설계(안)와 달리 추가 비용(약 115~135억원)을 투입하여 지장물(한전송전선로)을 이설하고, 비굴착 추진공법********으로 하수암거를 매설하는 것으로 타당하지 않은 것으로 판단됨.

- 침수피해 예방을 조속히 사업을 완료하여야 하는 동 사업의 특성상 「송전선로 이설 후 하수암거 비굴착 추진********」은 많은 추가 비용과 시일이 소요되어 설계변경이 불가피할 것으로 사료됨.

○ 따라서, ************** 검토의견과 같이 지장물 이설을 최소화하고, 당 현장에 적용 가능한 비굴착공법(범용공법)을 검토·적용하여 사업을 신속하게 추진함이 타당함.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박영호		하수관리팀장	정한영		물재생계획과장	10/21 이임섭
협조자
시행	물재생계획과-13656	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2133-3792	/전송	02-2133-1042	/	2009029199@seoul.go.kr	/	부분공개(5)