문서번호	건축부-17409
결재일자	2021. 11. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
이랑		조영수	11/01 신명승
협조

『마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사』건설사업관리용역

배치변경(계약변경) 검토보고

2021. 11.

도시기반시설본부

(건축부)

『마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사』건설사업관리용역

배치변경(계약변경) 검토보고

「마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사」건설사업관리용역 관련 조경기술자 배치기간 연장에 따라 다음과 같이 변경계약 하고자 함.       ※증 6,657천원

1		공사개요

○ 용역명 : 마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사 건설사업관리용역

******************************************

○ 용역기간 : ‘17.09.01. ~ ‘21.11.30.(3차 : ‘21.02.10. ~ ‘21.11.30.)

○ 용역업체 : ㈜토문엔지니어링건축사사무소 외 1개사

○ 계약/착수일자 : ‘17.08.18. / ‘17.09.01

○ 총 완수일자 : ‘21.11.30.(3차 : ‘21.11.30.)

2		용역기간 연장 검토

○ 관련문서: 변경계약 요청의 건(토문 제2021-1345호(201.10.27)

○ 변경계약 사유: 조경기술자 배치기간 연장에 따른 변경계약

○ 변경계약 내용

***	****		****	***
****	**	**********************	****
	**	**********************	****
****	**	************	************	************
	**	**************	**************

**************************************************

3		처리의견

*******************************************************************************************.

붙임 : 변경계약 연장 요청(감리단) 1부.  끝.