문서번호	도시철도계획부-8767
결재일자	2021. 11. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		경전철관리과장	도시철도계획부장
이전근		안덕용	11/02 정대현
협조

도시철도 e-러닝 콘텐츠 제작 용역 추진현황(10월)

2021. 11.

도시철도계획부

도시철도 e-러닝 콘텐츠 제작 용역 추진현황(10월)

□ 용역개요

○ 용역명 및 도급자 : 도시철도 이론과 실무 e-러닝 콘텐츠 제작 / ㈜스톰미디어

○ 도급비 및 용역기간 : 130,500천원 / ’21.3.10.~12. 10.

○ 주요 과업내용 : 교육 콘텐츠 제작 및 인재개발원 e-러닝 탑재

- 4개 과정 총 23차시(차시당 20분 내외)

《과정별 교육내용》

과정 및 분야 (4개 과정 23차시)	계획(4차시)	토목(7차시)	건축/설비(8차시)	차량/열차제어(4차시)
	계획(3), 민간투자(1)	개착(3), 터널(2), 궤도(2)	건축(2), 기계(3), 전기(2), 통신(1)	차량(2), 열차제어(2)

□ 주요 추진실적(공정률 89%※10월31일 기준)

○ 용역 착수보고(`21.3.25.)

○ 원고 집필진 대상 원고 작성가이드 워크샵 시행(`21.4.8.~4.14.)

○ 강의계획서 제작 및 실무부서 검토 완료(`21.5.1.~6.15.)

○ 원고 제작 및 전문가․실무부서 검증(`21.5.~10.) :

- 완료(11개 분야), 개착 분야 원고 수급 지연으로 검토 지연

○ 스토리보드 제작 및 실무부서 검증(`21.5.15.~)

스토리보드 : 동영상 제작 전 내용과 구성을 사전에 그림과 글자의 문서로 구성한 세부 시나리오

- 완료 (7개 분야) : 민간투자, 궤도, 건축, 전기, 통신, 차량, 열차제어

- 실무부서 검토(2개분야) : 계획, 기계설비 - 제작 중(2개분야) : 개착, 터널

○ 프로토 영상 제작(`21.6.7.~)

프로토 영상 : 본영상 제작 전 내용과 구성을 검증하기 위해 시험제작 한 영상

- 완료 (7개 분야) : 계획, 민간투자, 궤도, 건축, 전기, 통신, 차량, 열차제어

- 제작 중(예정, 3개 분야) : 개착, 터널, 기계설비

작 성 자	도시철도계획부장 : 정대현 ☎ 772-7020 경전철관리과장 : 안덕용 ☎ 7052 담당 : 이전근 ☎ 7156

□ 과정별 추진현황

과정명 (총 23차시)	분야	차시	강의계획서	원고	스토리보드	프로토 영상	본 영상
계획 (4차시)	계획	3	완료	완료	완료/실무부서검토 중	완료/검토사항 반영 예정	-
	민간투자	1	완료	완료	완료	완료	-
토목 (7차시)	개착	3	완료	완료	제작 중 (2개 차시 完)	-	-
	터널	2	완료	완료	제작 중 (1개 차시 完)	-	-
	궤도	2	완료	완료	완료	완료	-
건축/설비 (8차시)	건축	2	완료	완료	완료	완료	-
	기계설비	3	완료	완료	실무부서 검토 중	제작 중 (2개 차시 完)	-
	전기	2	완료	완료	완료	완료/검토사항 반영 예정	-
	통신	1	완료	완료	완료	완료	-
차량/ 열차제어 (4차시)	차량	2	완료	완료	완료	완료	-
	열차제어	2	완료	완료	완료	완료	-

※ 제작 중(집필자 작성), 검증 중(실무부서 및 자문위원 검토), 완료(최종 수정 완료)

cf) 일정상 스토리보드 초안으로 先개발, 검토사항 後반영 중

□ 향후계획

○ ’21.10.~11. : 원고 및 스토리보드 작성 완료

○ ’21.11. : 프로토 영상 제작 및 검토(자문위원, 실무부서)

○ ’21.12. : 최종 콘텐츠 영상 검토 및 검수

인재개발원 교육운영시스템 탑재, 시범운영.   끝.

붙임1		콘텐츠 제작 세부내용

□ 과정별 세부내용(4개 과정 23차시)

과정명 (23차시)	분야	도서 분량	차시	주요내용
계획 (4차시)	계획	392P	3	도시철도 역사, 건설계획, 절차, 조사 사항, 망 구축계획 등
	민간투자	325P	1	관련법률, 사업계획 수립 및 절차, 사업평가와 협상, 실시협약 체결 등
토목 (7차시)	개착	730P	3	가시설 설계기준, 설계, 공법, 계측관리, 지하수 관리, 발파진동 등
	터널	407P	2	단면 계획, 굴착, 기계화 시공, 쉴드 TBM 등 공법, 리스크 관리 등
	궤도	326P	2	궤도 유형별 특성, 궤도 종류, 차륜 종류별 시공 및 유지관리 등
건축/설비 (8차시)	건축	325P	2	정거장 건축디자인, 지하공간 구성, 공간 및 규모 계획, 종합관제동 건축 등
	기계	476P	3	정거장 공조설비, 기계설비의 설계기준, 소방설비, 안전설비, 승강장안전문 등
	전기	404P	2	전력수급 계획, 전기설비, 전기공급, 변전설비, 전기설비 유지관리 등
	통신	198P	1	통신설비 운영, 통신시설 계획, 차상 통신설비, 자동 요금 징수설비 등
차량/ 열차제어 (4차시)	차량	297P	2	차량성능, 시험, 자동화설비, 차량시스템 검수 및 시험, 미래철도 시스템 등
	열차제어	548P	2	철도신호장치, 열차제어 시스템, 열차 운행계획, 센서 및 통신장치 등

※ 전문가 의견 및 교육 효율성 감안 최초 방침(’21.1.14.) 내용 일부 조정

□ 콘텐츠 제작 수행체계

			발주부서
			서울특별시 (도시기반시설본부 도시철도계획부)
			↕
총괄자문			계약당사자		원고개발 및 검수
도시철도 및 소프트웨어 전문가 공정회의 및 보고회 사전자문		↔	이러닝 콘텐츠 제작	↔	기술서적 발간 참여기술자 도시철도 및 소프트웨어 전문가
			가이드 제공 ↕ 콘텐츠 포팅
			협력기관
			서울시 인재개발원

붙임		집필진, 자문위원 및 실무부서 검토자 (’21.10.현재)

분야	원고 집필진		자문위원		실부부서 검토자
	소속(직위)	성명	소속(직위)	성명
계획	******* ****	***	******* ******	*** ************* **********************	********* ********
민간투자	***** ****	***	********* ******	*	********* ********
개착	*** *****	***	******* ****	*** ************* *******************	********* ********
터널	******* ****	***	***** ****	*	********* ********
궤도	*** *****	***	***** *****	*** ************* ********************	********* ********
건축	********** *****	***	*************** ****	*** ************* ******************	********* ********
기계설비	******** *****	***	******* *****	*** ************* ******************	********* ********
전기	********** ****	***	****** ****	*** ************* *********************	********* ********
통신	***** ****	***	****** ****	*** ************* ****************	********* ********
차량	******* ****	***	**** ****	*** ************* ***********************	********* ********
열차제어	***** ****	***	****** ****	*** ************* ***************************	********* ********