2014년 기능보강사업 계획변경 승인 검토 결과(양천구)

양천구 신정종합사회복지관 기능보강사업 계획변경 요청

가. 요청사항

○ 사업명 : 승강기 교체 공사 외 승강장 도색 및 내부 거울 설치공사

(단위:천원)

사업내역	변경전				변경요청				비고
	계	시 비	구 비	자부담	계	시 비	구 비	자부담
사업비	56,900	34,140	22,760	-	52,480 (△4,420)	31,488 (△2,652)	20,992 (△1,768)	-	△4,420 (총사업비 감소)
사업내역	- 승강기 교체 : 기존 56,900천원 → 변경 50,500천원(6,400천원 감소) - 승강장 벽면 도색 및 내부 거울 설치(추가) : 1,980천원 증가

나. 변경 요청 사유

- 당초 승강기 교체공사를 진행하고자 하였으나 공사를 진행하면서 승강장 노후 벽면 노출로 인한 미관저하 및 승강기 내부 거울 부재로 인한 이용자 불편 등을 고려하여 승강장 좌우측 벽면 도색, 승강장 내부 거울 설치를 추가하여 사업 변경요청

검토결과 : “승인”

(단위:천원)

사업내역	변경전				변경후				비고
	계	시 비	구 비	자부담	계	시 비	구 비	자부담
사업비	56,900	34,140	22,760	-	52,480 (△4,420)	31,488 (△2,652)	20,992 (△1,768)	-	△4,420 (총사업비 감소)
사업내역	- 승강기 교체 : 기존 56,900천원 → 변경 50,500천원(6,400천원 감소) - 승강장 벽면 도색 및 내부 거울 설치(추가) : 1,980천원 증가

○ 승강기 교체 사업 낙찰 금액 잔여예산을 활용하여 시설물의 안전과 편의를 도모할 수 있으며, 승인된 사업과 연계된 사업으로 사업 진행이 타당함