투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기에 따른 변경계약요청 (두모교 외 1개소 내진성능개선공사 책임감리용역)

1. 교량보수과-5402(2014.8.26)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 “두모교 외 1개소 내진성능개선공사 책임감리용역” 의 준공기한 연기를 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 두모교 및 홍제천고가교 내진성능개선공사 책임감리용역

나. 도 급 자 : 신명건설기술공사(주) 대표 김장흥

다. 준공기한 변경 (도급비 변경없음)

- 당초 : 2013. 6.12 ~ 2014. 8.31

- 변경 : 2013. 6.12. ~ 2014. 11.30.

라. 예산과목 : 도로시설관리, 도로시설물 운영, 도로시설물 내진성능개선,

시설 비 및 부대비, 감리비

마. 공기연장사유 : 감리대상공사인 “두모교 내진성능개선공사”의 준공기한 일정에 맞추어 용역 기간 연장

붙임 : 1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 요청서 1부.

3. 변경계약요청 관련 공문 1부. 끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	백운경		교량보수과장	신동헌		서부도로사업소장	08/27 김만수
협조자
시행	교량보수과-5451	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울시 마포구 가양대로 203	/
전화	300-8452	/전송	300-8459	/		/	대시민공개