문서번호	기전과-5773
결재일자	2021. 11. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
오태환		11/03 서승완
협조

2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(2차) 실정보고사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 11.

2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(2차)

실정보고사항 검토보고

2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(2차)와 관련하여 책임감리가 제출한 실정보고에 대하여 내용을 검토하고 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(2차-화곡시장) 현장 실정보고

- 문서번호 대영GE21A-11-03(21. 11. 02.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(2차)

○ 공사위치 : 강서구 화곡시장 앞

○ 공사내용

- 화곡본동시장 앞(20년 규제 28518) : 신호기(차) 신설

- 화곡시장 앞(21년 규제 8867) : 신호기(3->4색등) 개선

○ 계약금액 : 11,870,000원

○ 공사기간 : 2021. 8. 27. ∼ 2021. 12. 06.

○ 계약업체 : 연희에스엔(주) 대표 박노영

○ 감리업체 : 대영유비텍(주) 대표 조근환

□ 실정보고 내용

○ 도급비 세부내역 : 감 1,464천원

- 직접비 감 521천원

· 제어기 교체로 인해 LSU수량이 충분하여 LSU 사급 물량 삭제

· 현장여건에 따른 가공 케이블 설치 위치 조정에 의한 케이블 물량 변경

- 간접노무비 및 보험료 등 제경비 간접비 감 943천원

□ 조치의견

○ 책임감리 실정보고 내용이 타당하여 감리업체에 우선 실정보고 내용에       따라 작업 시행토록 지시하고 추후 작업완료 보고 시에 정산

붙임  2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(2차-화곡시장) 현장

실정보고 1부.  끝.