문서번호	치수과-18722
결재일자	2021.11.4.
공개여부	비공개
방침번호

주무관		기전팀장		치수과장		안전건설교통국장
최진호		김종천		민병기		11/04 최연우
협조
	재무과장		송경택

★ ◉

- 옥수빗물펌프장(유수지) 공영주차장 조성(통신분야) -

설계변경(정산) 검토 보고

2021. 11.

[치 수 과]

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [√] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [√] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	서울시	:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 옥수빗물펌프장(유수지) 공영주차장 조성(통신분야) -

설계변경(정산) 검토 보고

「옥수빗물펌프장(유수지) 공영주차장 조성(통신분야)」관련 설계변경 요인이 발생하여 이를 검토하고 보고함

□ 공사개요

○ 공 사 명: 옥수빗물펌프장(유수지) 공영주차장 조성(통신분야)

○ 공사기간: 2021. 5. 12. ~ 2021. 11. 7.

○ 계 약 자: 주식회사 온텍 대표 허윤훈

○ 계약금액: 금56,427,600원(금오천육백사십이만칠천육백원)

□ 설계변경 사유

○ 공영주차장 감시용 CCTV 관급자재 현장설치도로 CCTV 설치 물량 삭제

○ 빗물펌프장 CCTV 추가 이설설치: 1대 ⇒ 2대

○ 빗물펌프장 정문 도어카메라 신규설치

○ 주차관제시스템 함체보호 케노피 추가설치

주요 물량 증감내역
공 종	단 위	수 량
		당 초	변 경	증 · 감
CCTV 시스템 설치	대	10	0	감	10
CCTV시스템재사용철거후 이설설치	대	1	2	증	1
강제전선관 설치(노출 아연도 22mm)	m	0	120	증	120
비디오폰(도어카메라) 설치	대	0	1	증	1
광코어접속	EA	0	40	증	40
캐노피 제작납품(신규)	대	0	1	증	1

□ 변경 내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감
공급가액	51,297,819	71,768,737	증) 20,470,918
부가가치세	5,129,781	7,176,873	증) 2,047,092
합 계	56,427,600	78,945,610	증) 22,518,010

□ 조치계획

○ 상기 내용과 같이 시공물량 및 계약금액 증·감 등에 대해 설계변경을 시행하고 준공 처리하고자 함

붙임  1. 변경내역서 1부.

2. 제비율 검증 확인서 1부.

3. 계약원가 심사 의견서 1부.  끝.