문서번호	운영과-12818
결재일자	2021. 11. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
김재영		최영효	11/05 최규동
협조

「2022년 중랑물재생센터」

수질계측기 유지관리용역 추진계획

2021. 11.

중랑물재생센터

(운영과)

2022년 중랑물재생센터

수질계측기 유지관리용역 추진계획

센터내 설치 운영중인 수질계측기 유지관리용역을 추진하여 체계적인 관리로 수질측정기의 성능을 최적의 상태로 유지하여 안정적인 방류수질기준 유지에 기여

Ⅰ

추진개요

□ 관련근거

	【물재생센터 수질계측기 유지관리 지침】
▶ (점검) 일상점검(수시점검) 및 정기점검 월 2회 실시한다. ▶ (교정) 비교측정 또는 교정검사는 연 4회 실시하여야한다. ▶ (성능) 측정기의 허용오차범위는 기준범위 ±5% FS 이내이어야 한다.

□ 추진배경

❍ 유지관리 인력 부족으로 수질계측기 동작상태 확인 곤란

❍ 계측기 정상작동을 위하여 예방진단 및 정기점검 교정검사 필요

□ 수질계측기 현황

❍ 계측기 설비

구분	PH	ORP	DO	MLSS	SS	TOC	NH4	농도계	소계
2,3,4처리장	14	12	10	6	-	7	7	5	61
용수공급동	6	-	-	-	1	-	-	-	7
소 계	20	12	10	6	1	7	7	5	68

❍ 생물반응조 감시모니터링 시스템 설비(BMS)

연 번	위 치	대수	유 형	계측기	설치년도
1	2처리장 A, B계열	2	BMS	MLSS, DO, PH, SV30	2019
2	3처리장 A계열	2	BMS	MLSS, DO, PH, SV30	2018
3	3처리장 B계열	2	BMS	MLSS, DO, PH, SV30	2016 2018
4	3처리장 C계열	2	BMS	MLSS, DO, PH, SV30	2017
5	3처리장 D계열	1	BMS	MLSS, DO, PH, SV30	2018

Ⅱ

추진계획

□ 사업개요

❍ 용 역 명: 2022년 중랑물재생센터 수질계측기 유지관리용역

❍ 용역기간: 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.

❍ 소요예산: 300,000천원

❍ 계약방법: 제한경쟁입찰

❍ 입찰참가자격: 정보통신공사업법에 의한 정보통신공사업 등록업체로서 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

❍ 발주 전 사전검토

사전검토 사항	제외근거
일상감사(제외): 추정가격 10억원 이상 일반용역	일상감사 규정 제4조
계약심사(대상): 추정가격 2억원 이상 일반용역	계약심사 업무처리 규칙 제4조
사전규격공개(대상): 추정가격 5천만원 이상	지방계약법 시행령 제32조의2

❍ 예산방법: (2022년)중랑물재생센터 수처리 유지보수(사업), 수처리분야 계측기 유지관리, 수선유지교체비, 수선유지비(수질계측기 유지관리 용역)

□ 사업내용

❍ 계측기 측정값 허용오차(±5%) 범위내로 유지관리

❍ 계측기 센서 세정작업 및 변환기 데이터 점검

❍ 정기점검, 긴급점검 및 교정검사 실시

구분	정기점검	교정	긴급점검
점검횟수	월 2회	연 4회	고장발생시(수시)

□ 추진일정

❍ 계약심사‧발주(11월)

❍ 입찰 및 계약(12월)

❍ 용역착수(1월중) ⇨ 용역준공(12월)

붙임 1. 과업지시서 1부.

2. 설계내역서 1부  끝.