문서번호	물재생계획과-14580
결재일자	2021. 11. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	하수관리팀장	물재생계획과장
박영호	代박영호	11/15 이임섭

하수도 정비사업(침수해소)

낙찰차액 사용 요청건 검토보고 (은평구)

2021. 11.

물재생계획과

『*** 일대 침수지역 하수관로 성능향상사업외 1건』

하수도 정비사업 낙찰차액 사용 요청건 검토보고

「*** 일대 침수지역 하수관로 성능향상」등 2건의 침수해소사업 시행중 지장물 이설비 증가 및 노후·불량 하수관로 추가 정비에 따른 낙찰차액 사용 요청건에 대한 보고임.

□ 요청사항 및 검토결과

① *** 일대 침수지역 하수관로 성능향상사업

○ 공사개요

- 사업계획 : D450㎜~□2.5×1.0m, L=977m

- 공사기간 : (총차)2020. 1. ～ 2023. 12.

(금회)2021. 6. 25. ～ 2022. 02. 24.

- 발주내역 : 하수관로 개량 D450㎜~□2.5×1.0m, L=287m

- 총공사비 : *************************************

************************************

○ 공사구간 내 노후 하수관로 정비물량 추가

- 단면보수 : (증)D450㎜, L=167m

- 총공사비 : **************************************

⇒	**********************************************************************************************

② *** 일대 침수지역 하수관로 성능향상사업

○ 공사개요

- 사업계획 : D300㎜~□3.0×1.0m, L=2,266m

- 공사기간 : (총차)2021. 1. ～ 2023. 12.

(금회)2021. 1. ～ 2022. 1.

- 발주내역 : 하수관로 개량 D600㎜~□1.5×1.5m, L=439m

- 총공사비 : *************************************

***************************

○ 지장물 이설비 증가(상수도, 도시가스, 한전, 통신 등)

- 이 설 비 : (당초) 294백만원 → 변경 782.2백만원(증488.2백만원)

- 총공사비 : **************************

⇒	********************************************************************************************************************.

□ 향후계획

○ 낙찰차액 사용요청 2건에 대한 검토결과 회신(******구).  끝.