실정보고 검토서

공사명

동부간선도로(창동~상계) 지하차도 건설

공사개요

· 위 치 : 창동교~상계교

· 규 모 : 지하차도 건설, L=1.7km

· 공사기간 : ‘20.08.~‘25.02.

· 도 급 비 : 3,236억원

· 시공사 : ㈜SK에코플랜트

· 감리단 : ㈜도화엔지니어링

· 설계사 : ㈜동해종합기술공사

실정보고 건명

의정부 방면 임시 3차로 운영 실정보고

실정보고

사유

- 민원 및 추석명절 교통대책에 따른 동부간선 창동~상계구간

임시 3차로운영 보고(************************)

임시 3차로 운영에 따른 교통안전시설 설치

․ PE방호벽, 갈매기표지, 안전표지, 경도등, 윙카 등

․ 교통안전시설 최저단가에 손율30%(3개월) 적용

건설사업관리단

검토의견

- 지역주민 민원에 따른 동부간선도로 의정부 방면 창동~상계

구간 임시3차로 운영으로 민원해결이 필요함

변경(안)

구 분	당 초	변 경(단위:원)	비고
직접공사비(부대공_	-	28,076,312	안전시설 설치
제 경 비	-	9,623,688
도 급 액	-	37,700,000

예산조치 계획

당초 사업비 내 시행가능(민원사항에 따른 설계변경 증액조치)

발주처

검토의견

- 민원해결을 위한 건설사업관리단의 검토의견이 타당하여 승인

조치하고 추후 계약내역에 반영하고자 함.

결재

담당

노순재

과장

장종환

부장

11/18

임춘근