등록번호

기획예산과-14504

주무관

지속가능발전팀장

기획예산과장

기획재정국장

등록일자

2021.11.18.

박기원

김미중

김정현

11/18

강환복

결재일자

2021.11.18.

공개구분

부분공개(5)

협  조

- 2021 서대문구 지속가능발전 기본계획 재수립 및 숙의 공론장 운영 용역 -

준공기한 연기 보고

서 대 문 구

기획예산과

- 2021 서대문구 지속가능발전 기본계획 재수립 및 숙의 공론장 운영 용역 -

준공기한 연기 보고

지속가능발전 기본계획 재수립과 관련하여 추진 중인 숙의 공론장 운영 용역과 관련하여 계약대상자로부터 계약기간 연장 요청이 있어 다음과 같이 보고하며, 완성도 높은 성과를 위하여 준공기한을 연장하고자함.

Ⅰ		추진근거

□ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안정부)예규 제14장 7절

□ 사)한국지속가능발전센터 ‘2021년 서대문구 SDGs 수립 용역        준공 기한 연기 요청의건’[센터21-05(2021. 11.15.)]

Ⅱ		용역개요

□ 용 역 명 : 서대문구 지속가능발전 기본계획 재수립 및 숙의 공론장 운영 용역

□ 계약금액 : ********************

□ 용역기간 : 2021. 5. 26. ~ 11. 21

□ 계약상대자 : ************

□ 주  소 : ************************************

□ 대표자 : ***

□ 추진경위

□ 2021. 5. 26. 지속가능발전 착수 보고

□ 2021. 7. ~ 8. 지속가능발전 숙의 공론장 운영

□ 2021. 10. 18. 지속가능발전 목표(SDGs) 수립 토론회(중간보고)

□ 2021. 11. 10. 지속가능발전 목표(SDGs) 교육(최종보고)

Ⅲ		준공기한 연기

□ 연기계획

□ 당초기간 : 2021. 5. 26. ~ 2021. 11. 21.

□ 변경기간 : 2021. 5. 26. ~ 2021. 11. 30.

□ 연기사유

□ 당초 10월 말 최종보고회를 개최를 예정했으나, 행정 서면 의견        수렴 및 시민설문조사 기본 응답 수 확보를 위한 기간 지연과  숙의        공론장 전체회의 일정(10/18) 및 최종보고회 일정(11/10)의 연기로         최종보고서 수정·보완 및 편집 작업 일정의 연기가 불가피함.

□ 귀책사유 : 서대문구

□ 지체변상금 부과 : 미부과

□ 부서 검토 의견

□ 행정 서명 의견수렴 및 시민설문조사 기간이 예상했던 기간 보다         더 소요되어 최종보고서 수정 및 편집 작업 일정이 부족하게 됨.

완성도 높은 최종보고서를 위해 일정 연기가 필요함.

붙임 : 용역기간 연장 요청 공문 1부.