코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	불광천 수질개선 시설정비 기본 및 실시설계 실정보고 승인 통보

1. 동기공 2021-6381(2021.11.01.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 검토요청한 불광천 수질개선 시설정비 기본 및 실시설계 용역 실정보고(제2회)를 아래와 같이 승인하오니 과업수행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 승인사항

- 건설기술진흥법시행령 제75조의2에 따른 설계안전성 검토(추가과업) 시행 및 이에 따른 계약금액(6,490천원 증액) 조정.  끝.

- 추가과업에 따른 절대공기 부족에 따른 용역 준공기한(과업기간 60일 연장)변경.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	(주)동명기술공단종합건축사사무소,(주)제일엔지니어링종합건축사사무소
주무관	박성웅		하수계획팀장	노승원		물재생계획과장	11/22 이임섭
협조자
시행	물재생계획과-14855	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3795	/전송	02-2133-1042	/	psypsw@seoul.go.kr	/	대시민공개