문서번호	치수과-7397
결재일자	2021. 11. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
박지수		최연호	11/23 박상보
협조	총무과장		정현석
	기획예산과장		안인숙

- 잠실수중보 보수·보강공사 -

설계변경(총차1회, 1차1회) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 11.

한강사업본부

(시설부)

- 잠실수중보 보수·보강공사 -

설계변경(총차1회, 1차1회) 검토 보고

「잠실수중보 보수·보강공사」와 관련 건설사업관리자 설계변경(총차1회, 1차1회) 요청 사항에 대하여 검토하여 처리계획을 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 잠실수중보 보수‧보강공사

○ 위    치 : 서울시 광진구 자양동 307(잠실대교 주변)

○ 공사기간 : ‘21. 2. 26. ~ ‘22. 6. 30.(1차  ‘21. 9. 30까지)

○ 공사규모

- 세굴 방지공 설치 및 감세공 보강 : 4,028㎥

- 콘크리트 단면복구 3,839㎡, 균열보수 1,666m

- 점검시설 설치 394m, 남단 옹벽 보강 : 500㎡

○ 총공사비 : 6,569백만원

- 도급비 5,492백만원(1차 1,439백만원)

- 관급비 393백만원, 이설비 684백만원

○ 시 공 사 : 우륭건설(주) 대표 최부영

○ 감 리 사 : ㈜서영엔지니어링 외 1개사 대표 김종흔

□ 설계변경 개요

○ 관련근거

- 공사 설계변경(총차1회, 1차1회) 검토보고(일반2021-항만-16646호, 2021.11.19.)

○ 설계변경 사유

- 설계도서 누락 및 오류 사항 보완

‣ 점검시설 설치 변경(치수과-4059, 2021.6.24)

‣ 남단 옹벽 보강계획 변경(치수과-5288, 2021.8.12)

‣ 현장상이 및 유관부서 협의사항 조치(치수과-5995, 2021.9.10)

- 공사 실정보고 사항 반영 조치

‣ 작업장비 누락 반영 및 오탁방지막 규격 상향(치수과-5642,2021.8.27)

‣ 시공방법 변경 검토보고(치수과-5646, 2021.8.27.)

‣ 설계도서 누락·오류 정정(치수과-5994, 2021.9.10.)

○ 공사비 증·감 현황

- 총차 1회                                                       (단위 : 원)

구 분	단위	당 초	변 경	증 ·감	비 고
1. 보수보강공사	식	1,650,748,207	1,756,264,270	증)105,516,063
2. 점검시설	식	274,287,892	395,936,228	증)121,648,336
3. 세굴방지공	식	427,338,185	427,338,185	-
4. 가도및축도	식	667,447,352	809,439,170	증)141,991,818
5. 가물막이공	식	159,918,179	159,918,179	-
6. 남단옹벽공	식	24,267,955	58,786,211	증) 34,518,256
7. 부대공 및 사급자재대	식	309,787,296	485,240,143	증)175,452,847
순공사비	식	3,513,795,066	4,092,922,386	증)579,127,320
제경비(간접비)	식	1,978,531,834	2,252,977,614	증)274,445,780
도 급 액	식	5,492,326,900	6,345,900,000	증)853,573,100

- 1차1회                                                              (단위 : 원)

구 분	단위	당 초	변 경	증 ·감	비 고
1. 보수보강공사	식	561,222,658	420,185,756	감)141,036,902
2. 점검시설	식	274,287,892	395,936,228	증)121,648,336
3. 세굴방지공	식	-	-	-
4. 가도및축도	식	-	32,810,500	증) 32,810,500
5. 가물막이공	식	-	-	-
6. 남단옹벽공	식	24,267,955	58,786,211	증) 34,518,256
7. 부대공 및 사급자재대	식	56,190,927	329,326,346	증)273,135,419
직접공사비 계	식	915,969,432	1,237,045,041	증)321,075,609
제경비(간접비)	식	523,023,098	574,654,959	증) 51,631,861
도 급 액	식	1,438,992,530	1,811,700,000	증)372,707,470

□ 조치계획

○ 설계변경(총차1회, 1차1회) 요청 사항에 대하여 검토한 결과 제반 규정에 따라 적정하게 변경 설계 되었다고 판단되는 바,

상기와 같이 설계변경을 시행하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함

□ 행정사항

○ 설계변경 시행 및 변경계약 요청

○ 설계변경 승인 통보(치수과→건설사업관리단)

붙 임 : 1. 관련 보고서 1부

2. 설계변경 검토의견서 1부

3. 변경 내역서 각 1부

4. 계약심사 결과 1부

5. 제비율 검증확인서 각 1부.  끝.