문서번호	총무과-30749
결재일자	2021. 11. 24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
임채성		김창중	전결 11/24 김혁
협조

- 서소문청사 제1동 외벽 리모델링공사 -

설계변경(2차) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.11.

- 서소문청사 제1동 외벽 리모델링공사 -

설계변경(2차) 검토보고

서소문청사 제1동 외벽 리모델링 공사와 관련하여 공사 물량 변경 등 설계변경 검토 내용을 보고드림

□ 관련근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

(설계 변경으로 인한 계약금액의 조정)

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행안부 예규 제114호, ‘20.6.15)

- 제1장 입찰 및 계약 집행기준 제8절 보험료 사후정산 등

- 제13장 공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경, 제7절 계약금액의 조정

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울특별시 서소문청사 제1동 외벽 리모델링공사

○ 계약업체 : 이레비앤디㈜ 대표자 김근호, 김옥화

○ 계약금액 : 금4,070,370,000원

○ 공사기간 : 2021. 2. 22.~ 2021.11.26.

○ 공사내용 : 외장재 교체 및 단열재 설치

□ 적용단가 합의

○ 합의사유

- 리모델링공사 시행 중에 발생한 계약물량의 증가 및 신규비목에 대한 적용단가 합의 필요

	<계약물량 증감 및 신규비목 관련 규정>
□ 규정 : 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 공사계약 일반조건 - 제7절 계약금액의 조정(발주기관의 요구) ○ 물량감소 : 감소된 공사량의 단가는 계약단가 적용 ○ 물량증가 및 신규비목 : 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가와 그 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위안에서 협의하여 결정

○ 합의결과

- 물량 감소 및 증가는 계약단가를 적용

- 신규비목은 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 적용

□ 설계변경

○ 변경사유

- 서소문청사 제1동 외벽 리모델링공사 시행 중 공사물량 증·감 및 신규비목 발생

○ 변경내용

- 단열재 두께 및 준불연으로 변경

- 화강석 및 금속재 물량 변경

- 석재트러스 및 하지틀 크기 변경

- 후레싱 크기 변경, 트러스 추가 고정 철물 증가 등

○ 계약금액 변경 내용                                     (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감
도급비	*************	*************	*************

□ 행정사항

○ 예산과목

- 행정국 총무과, 행정지원체계강화, 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 시설비

- 행정국 총무과, 행정지원체계강화, 청사관리, 노후시설물 개선, 시설비

○ 변경계약 체결토록 재무과 요청 후 준공(정산)

붙임  합의각서 및 설계변경 내역서 각 1부.  끝.